9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
달성군 보훈회관 건립	2,312	461	1,851	0	2015	2014	100%
가창 내주리 도시계획도로	3,000	2,800	200	0	2015	2012	100
다사 매곡리 (다사중학교~다사역)도시계획도로	4,987	4,087	900	0	2017	2012	50
현풍 원교 -오산간 도로건설	20,000	7,374	1,830	10,796	2016	2013	35
유가 비슬산휴양림 진입도로 개설	14,000	0	300	13,700	2018	2013	35
논공 상리공단진입 도시계획도로 개설	5,000	3,000	1,500	500	2016	2013	35
옥포 본리2리(대방) 도시계획도로 개설	3,000	2,200	0	800	2017	2013	35
달성군 도동～자모 위험도로 구조개선	15,000	968	4,632	9,400	2017	2014	40
사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
논공 위천1리(새마을) 도시계획도로 개설	2,840	1,940	900	0	2016	2014	60
현풍 지리~오산리 (군도18호선) 도로 확포장	6,770	2,750	200	3,820	2017	2014	50
달성유통센타 ~구화원ic간 도시계획도로 개설	2,400	1,360	1,040	0	2016	2014	70
하빈면 소재지 우회 도시계획도로 개설	4,000	0	2,500	1,500	2017	2014	50
옥포 강림리 (보금자리주택주변) 도시계획도로 개설	6,500	0	90	6,410	2019	2014	35
옥포 간경 주진입도로개설	6,200	4,600	1,600	0	2016	2014	10
하빈 기곡1리 도시계획도로	2,080	15	40	2,025	2018	2014	10
가창 오1리 도시계획도로 개설	3,300	25	708	2,567	2016	2014	20
옥포 교항2리 외곽 도시계획도로	2,930	0	670	2,260	2017	2014	10
비슬산 휴양림도로 확․포장사업	14,000	0	300	13,700	2018	2015	5
사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
화원 구라1리 (중2-176호) 도시계획도로 개설	7,700	0	2,000	5,700	2017	2015	15
다사 세천리 (세천교회 주변) 일원 도시계획도로 개설	2,100	0	1,200	900	2017	2015	15
다사 매곡리 다사초등뒤편 도시계획도로 개설	2,800	0	750	2,050	2017	2015	15
가창 삼산~우록간 도시계획도로 개설	17,200	150	9,000	8,050	2017	2015	40
가창 단산리(샛터) 도시계획도로 개설	2,500	0	800	1,700	2017	2015	15
가창 삼산리(본동) 도시계획도로 개설	2,100	0	900	1,200	2017	2015	15
구지 창리 도시계획도로 개설	2,000	600	1,000	400	2017	2015	15
현풍지구 보행환경개선 한전지중화사업	5,600		2,006	3,594	2016	2014	90%
달성군 현풍지구 보행환경개선사업	3,000	39	826	2,135	2016	2013	70%
창조문화바람High-Five(5)현풍	6,000			6,000	2018	2014	5%
사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
비슬산 치유의 숲 조성	3,000	-	300	2,700	2018	2014	10%
현풍 원교 어린이공원 조성	2,000	-	2,000	-	2016	2015	100%
비슬산 유스호스텔 건립공사	19,758		600	11,238	2017	2016	10
달성군민체육관 증개축 공사	11,000	1,700	4,550	4,750	2017	2013	10%
신의 물방울 연계 6차산업 창출	2,634	511	843	1,280	2016		51
낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성사업	6,180	2,454	2,266	1,460

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▸ 개별 투자심사 사업의 추진 현황은 별지 작성하였습니다.

9-2. 지방채 발행사업

우리 달성군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업은 현황은 다음과 같습니다.

▸ 우리 군은 지방채 발행사업이 없습니다.

9-3. 민간투자사업

우리 군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

▸ 우리 군은 민간투자사업이 없습니다.