10-1. 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
군청사 주차장 확장 및 주민쉼터 조성	7,480	6,460	176	844	2018	2016	100
민속소싸움대회	770	187	187	396	계속사업	2016	100
옥연지 수변복합 문화공원조성	8,000	5,100	1,900	1,000	2019	2015	90
달성군 제2노인복지관 건립	7,423	1,095	1,328	4,700	2018	2015	50
창조문화바람High-Five(5)현풍	6,376	62	270	6,044	2019	2014	20
화물자동차 공영차고지 조성사업	20,000		1.35	19,998.65	2020	2016	8
달성군 도동～자모 위험도로구조개선	15,000	2	1,600	11,424	2019	2014	41
달성유통센타 ~구화원IC간 도시계획도로 개설	2,365	2,365			2017	2014	100
하빈면 소재지 우회 도시계획도로 개설	4,000	1,320	1,075	1,605	2018	2014	40
하빈 기곡1리 도시계획도로개설	2,800	330	1,075	1,395	2018	2017	60
화원 구라1리(중2-176호)도시계획도로 개설	7,800	5,570	1,790	440	2017	2015	100
다사 세천리 (세천교회 주변) 일원 도시계획도로 개설	2,400	1,445	505	450	2017	2015	80
다사 세천리 1025번지 일원 도시계획도로 개설	2,250	31	465	1,754	2019	2015	40
가창 삼산~우록간 도시계획도로 개설	17,150	6,784	4,524	3,842	2018	2015	60
가창 단산리(샛터) 도시계획도로 개설	2,500	1,158	531	811	2018	2015	60

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
가창 삼산리(본동) 도시계획도로 개설	2,300	1,195	842	263	2017	2015	95
가창 주리~중주리 도시계획도로 개설	3,000	73	1,105	1,822	2018	2015	50
가창 대일리 마을입구 도시계획도로 개설	2,300		50	2,250	2019	2017	10
가창 냉천리 도시계획도로 개설	2,250	724	1,087	439	2018	2016	40
가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	5,000		42	4,958	2020	2016	10
구지 창리 (시장주변) 도시계획도로 개설	2,350	1,039	800	511	2018	2015	75
논공 상리공단 진입 도시계획 도로 개설	5,850	4,850	300	700	2018	2013	80
논공 북1리 도시계획도로 개설	2,200	1,111	657	432	2018	2016	80
달성군청~옥포강림임대주택단지간 도시계획도로 개설	15,200	200		15,000	2020	2015	5
옥포본리2리 (대방)도시계획 도로 개설	2,800	2,600	200		2018	2013	60
옥포 강림리(보금자리주택주변) 도시계획도로 개설	6,500	4,590	1,910		2018	2014	50
옥포 간경 주진입도로 개설	6,200	6,200			2017	2014	100
옥포 교항2리 외곽도시 계획도로 개설	2,200	1,920	280		2018	2014	60
옥포 송해공원 ~기세교차로간 도시계획도로 개설	9,000		150	8,850	2019	2017	5

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
현풍 원교 -오산간 도로건설	14,334	10,330	2,700	1,304	2018	2013	90
현풍 상1리 도시계획도로 개설 유가 초곡리 도로확포장	2,200		800	1,400	2019	2016	40
유가 초곡리 도로 확포장	3,800		4	3,796	2020	2014	8
비슬산 휴양림도로 확포장	14,000		2,000	12,000	2019	2016	5
현풍지리~오산리(군도18호선) 도로 확포장	7,280	3,375	780	3,125	2018	2014	85
가창 최정산 도로확장공사	15,100		259	14,841	2021	2017	10
절전형LED보안등교체공사	4,000	1,500	1,300	1,200	2018	2015	70
하빈PMZ평화기념마을조성사업	6,162	38	1,266	4,432	2019	2015	45
낙.경.청(樂.敬.淸)선비문화네트워크활성화사업	6,000	400		5,600	2020	2017	15
경찰특공대부지이전 교환	13,778	3,857	4,143	5,778	2021	2016	30
달성토마토축제	290		290		2017	2016	100
낙동강 한국잼버리 후적지 개발사업	7,500		680	6,820	2021	2016	5
100대피아노콘서트	595		595		계속사업	2016	100
달성군민체육관 증개축공사	19,300	13,625	5,675		2017	2016	100
달성군보건소 이전신축	30,007	1,500	20,155	8,352	2020	2016	15
농산물종합가공기술지원센터 건립	3,488		72	3,416	2018	2017	70

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군청사 주차장 확장 및

주민쉼터 조성사업

담당자

회계과 김가민(☎668-2265)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군청 주차장 수용공간 부족으로 인해 군 청사 도로변 차량들의 무질서한       주차가 지속적인 문제가 되고 있어, 군 청사 인근 토지를 매입하여 주차       장확장 및 주민쉼터를 조성함으로써 원활한 주차환경 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 논공읍 금포리 1303 등 16필지

○ 규 모 : 8,902㎡ (주차면수-240면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	7,480	6,460	176	844
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  2. : 지방재정 투자심사

○ 2016.  4. ~ 2016.  5. : 공유재산심의 및 관리계획 승인

○ 2016.  6. ~ 2016.  8. : 부지매입

○ 2016. 11. ~ 2017. 10. : 지장물 철거공사 및 설계용역

○ 2017. 12. ~ 2018.  6. : 공사시행 및 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

민속소싸움대회

담당자

농업정책과 신인섭(☎668-2192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역전통 문화 계승발전 및 군민들에게 다양한 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. 27(목) ～ 5. 1(월)

○ 위 치 : 화원유원지 일원 (화원읍 성산리)

○ 규 모 : 12,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	770	187	187	196	200
국 비
시 도 비	200	50	50	50	50
시군구비	417	100	100	107	110
지 방 채
민간자본	153	37	37	39	40
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 5일간 7개 지역 176두 참가

○ 187백만원 집행완료

□ 향후계획

○ 2019년 상반기 개최예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 보조금 3백만원 증액

사업명

옥연지 수변복합 문화공원조성

담당자

공원녹지과 박건용(☎668-2704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4대강 살리기의 일환으로 추진되어 온 옥연지 둑높이기 사업과 연계한

수변개발을 통해 주민들의 휴식 및 여가공간을 제공하고 방문객의

증가로 인한 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 달성군 옥포면 기세리 옥연지 일원

○ 규 모 : 백세교, 백세정, 물레방아, 풍차, 관리사무소 설치, 수목식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,000	5,100	1,900	500	500
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	8,000	5,100	1,900	500	500
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2014. 5 ~ 10 : 관련기관 협의(한국농어촌공사 달성지사)

○ 2015. 1 ~  9 : 옥연지 송해공원 기본계획 수립

○ 2016. 3 ~ 11 : 백세정, 백세교, 물레방아 설치

○ 2017. 2 ~  5 : 송해공원 조경공사(수목, 초본류 식재)

○ 2017. 12 ~ 2018. 2 : 풍차설치

□ 향후계획

○ 2018. 4 ~ 12 : 관리사무소 부지매입 및 관리사무소 건축

사업명

달성군 제2노인복지관 건립

담당자

복지정책과 윤종호(☎668-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인인구의 지속적인 증가로 노인복지 수요에 대한 노인복지 공간의 부족을      해소하고 지역적으로 소외된 다사·하빈 지역의 어르신들의 복지 욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018

○ 위 치 : 달성군 다사읍 매곡리 919-2

○ 규 모 : 대지면적 2,629㎡(연면적 2,472.5㎡/지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,423백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,423	1,095	1,328	4,700	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,328	-	1,328	-	-
시군구비	5,795	1,095	-	4,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 착공(건물 2층 공사 진행 중)

□ 향후계획

○ 2018. 11 준공 예정

○ 2019.  1 개관 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

창조문화바람 High-Five(5)현풍

담당자

교통과 유재광 (☎668-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도농복합도시 특성에 기반한 연계를 통한 문화 장소 구축으로 사람이

모이는 공간 조성

○ 결핍된 문화를 발굴하여 재창조를 통해 지역민 중심의 공공서비스

제공으로 도심재생 실현

○ 현풍면 원도심-테크노폴리스 신도심과의 대립과 경쟁을 소통과

화합으로 이끄는 주민 화합·복합문화공간으로 재창조

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 현풍면 소재지 A=1.0Km, 현풍천변로 2.0Km

○ 규 모 : 현풍천변 보행로 개선, 5개 문화활성화사업, 프로그램사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,376백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,376	62	270	1,920	4,124
국 비	3,188	62	135	929	2,062
시 도 비	1,594		98	465	1,031
시군구비	1,594		37	526	1,031
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 8. 16. : 사업내용 변경 등 방침수립 및 변경요청

○ 2016. 8.~11. : 국토부 변경협의

○ 2017. 2.  2. : 국토부 사업변경 승인

○ 2018. 7. 13. : 일상감사 및 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 2018. 8 ~ 2019. 3 : 공사착공 및 문화 활성화사업 프로그램 사업진행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 전준홍(☎668-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 화물자동차의 주차난을 해소하고, 안전하고 쾌적한 환경조성 및 화물자동차 운전자를 위한 편의증진 제공을 목적으로 화물자동차 공영차고지를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1 ~ 2020. 12

○ 위    치 : 화원읍 설화리 809, 옥포면 간경리 253번지 일원

○ 면    적 : 82,000㎡(24,800평)

○ 주차면수 : 600면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	-	1.35	1,381.65	18,617.0
국 비	14,000	-	0.45	949.55	13,050.0
시 도 비	3,000	-	0.45	216.05	2,783.5
시군구비	3,000	-	0.45	216.05	2,783.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2015. 11. 16. : 화물자동차 공영차고지 조성 계획 수립

○ 2016. 9. 27.  : 중기지방재정계획수립

○ 2016. 11. 10. : 지방재정 투․융자심사 조건부 승인

○ 2016. 12. 13. : 국토교통부 국비 공모사업 확정

○ 2017. 5. 10.  : 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획시설결정 용역 착수

○ 2018. 3. 22.  : 개발제한구역관리계획 변경 신청(국토교통부)

□ 향후계획

○ 2019. 6.  : 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획시설 결정

○ 2019. 12. : 실시설계 용역, 소규모환경영향평가 등 실시

○ 2020. 12. : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경(당초 : 2017~219년 ⇒ 현재 : 2017~2020년)

사업명

달성군 도동~자모 위험도로 구조개선

담당자

건설과 김범석 (☎668-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 달성군 현풍면 자모리와 구지면 도동리를 연결하는 군도1호       선 다람재 구간은 급경사에 선형이 불량하여 사고의 위험이 높고 특히        동절기 강설시 통행이 불가하여 교통소통에 지장이 있어 이를 해소코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 10. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 달성군 현풍면 자모리～구지면 도동리 일원

○ 규 모 : 도로조성 B=8.5～11.5m, L=1,335m (터널 L=330m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,000	1,976	1,600	5,300	6,124
국 비	7,500	984	600	800	5,116
시 도 비
시군구비	7,500	992	1,000	4,500	1,008
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ 2014.  8. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2015.  3. : 문화재 현상변경 허가(문화재청)

○ 2015.  9. ~ 11 : 문화재 지표조사, 일반교통 안전진단용역

○ 2015. 12. : 설계경제성 검토(VE), 경관심의, 기술심의 등 실시

○ 2016. 12. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

달성유통센터~구화원IC간

도시계획도로 개설

담당자

건설과 이병운(☎668-3046)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 2. ~ 2017. 6.

○ 위 치 : 화원읍 설화리 555번지 일원

○ 규 모 : L=322m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,365	2,365
국 비
시 도 비
시군구비	2,365	2,365
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010. 2. ~ 3. : 실시설계용역 완료

○ 2011. 8. : 실시계획인가 고시

○ 2015. 5. : 공사 착공

○ 2017. 6. : 공사 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

하빈면 소재지

우회 도시계획도로 개설

담당자

건설과 권순혁(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통 불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 8.

○ 위 치 : 하빈면 현내리 739-3 ~ 240-3번지 일원

○ 규 모 : B=15m L=1,160m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	1,320	1,075	1,605
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	1,320	1,075	1,605
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2015. 2. ∼ 8. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2015. 9. : 보상협의 통보

○ 2016.12. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 8. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

하빈 기곡1리 도시계획도로 개설

담당자

건설과 권순혁(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 하빈면 기곡리 1129-1 일원

○ 규 모 : B=8m L=1,219m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,800	330	1,075	895	500
국 비
시 도 비
시군구비	2,800	330	1,075	895	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2014. 3. ∼ 2017. 1. : 실시설계용역 완료

○ 2016. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2016. 9. : 보상통보

○ 2017. 6. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

화원 구라1리 (중2-176호)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 이병운(☎668-3046)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2017. 8.

○ 위 치 : 화원읍 구라리 973번지 일원

○ 규 모 : B=12m~15m L=668m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,800	5,570	1,790	440
국 비
시 도 비
시군구비	7,800	5,570	1,790	440
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 2. ~ 4. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 4. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2016. 8. : 공사착공

○ 2017. 8. : 공사 준공

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

다사 세천리 (세천교회 주변) 일원

도시계획도로 개설

담당자

건설과 이준일(☎668-3044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 4.

○ 위 치 : 다사읍 세천리 238번지 일원

○ 규 모 : B=6m L=220m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,400	1,445	505	450
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	1,445	505	450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 2. ∼ 3. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 4. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017. 3. : 수용재결 신청(5.16 공탁)

○ 2017. 5. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

다사 세천리 1025번지 일원

도시계획도로 개설

담당자

건설과 구민우(☎668-3044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 다사읍 세천리 1025번지 일원

○ 규 모 :  B=6m L=250m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,250	31	465	904	850
국 비
시 도 비
시군구비	2,250	31	465	904	850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 1. ∼ 3. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017.11. : 보상협의

□ 향후계획

○ 2018. 7. : 공사 발주

○ 2018.12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 삼산 ~ 우록간

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 4. ~ 2018. 9.

○ 위 치 : 가창면 삼산리 ~ 우록리 일원

○ 규 모 :  B=15m L=2,500m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	17,150	8,784	4,524	1,400	2,442
국 비
시 도 비
시군구비	17,150	8,784	4,524	1,400	2,442
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2014. 4. ~ 11. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 5. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2016. 6. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 9. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 단산리(샛터)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 2. ~ 2018. 8.

○ 위 치 : 가창면 단산리 494-3번지 일원

○ 규 모 : B=8~6.3m L=942m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500	1,158	531	811
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	1,158	531	811
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 2. ~ 11. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017.  4. : 수용재결 신청

○ 2017.  7. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 8. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 삼산리 (본동)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 2.

○ 위 치 : 가창면 삼산리 920번지 일원

○ 규 모 : B=8m L=175m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,300	1,195	842	263
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	1,195	842	263
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2015. 2. ~ 3. : 실시설계용역 완료

○ 2015.  5. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2016.  5. : 공사착공

○ 2017.  1. : 수용재결 신청

□ 향후계획

○ 2018. 2. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 주리 ~ 중주리

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 6. ~ 2018. 4.

○ 위 치 : 가창면 주리 일원

○ 규 모 : B=8m L=920m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	73	1,105	1,822
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	73	1,105	1,822
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016. 2. ~ 4. : 실시설계용역 완료

○ 2017.  2. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017.  6. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 대일리 마을입구

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 가창면 대일리 787번지 일원

○ 규 모 : B=10m L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,300		50	2,250
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		50	2,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2018. 8. : 보상시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 냉천리

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 가창면 냉천리 540번지 일원

○ 규 모 : B=8m L=424m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,250	724	1,087	439
국 비
시 도 비
시군구비	2,250	724	1,087	439
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2015. 2. ~ 5. : 실시설계용역 완료

○ 2015.  11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017.  6. : 수용재결 신청

○ 2017.  6. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가창 우록리(본동마을)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김범석(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 가창면 우록리 1630-2번지 일원

○ 규 모 : B=8~10m L=1,127m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000		42	3,078	1,880
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		42	3,078	1,880
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 2. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2018. 1. : 실시설계요역 완료

○ 2018. 7. : 보상통보

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

구지 창리(시장주변)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 노현식(☎668-3046)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설       로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 2. ~ 2018. 4.

○ 위 치 : 구지면 창리 510-2번지 일원

○ 규 모 : B=6~8m L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,350	1,039	800	511
국 비
시 도 비
시군구비	2,350	1,039	800	511
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2014.  2. ~ 3. : 실시설계용역 완료

○ 2014.  9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017.  6. : 공사착공

○ 2017.  7. : 수용재결신청(7.10 공탁)

□ 향후계획

○ 2018. 4. : 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

논공 상리 공단진입 도시계획

도로 개설

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도 5호선에서 달성1차산업단지(상리공단)으로의 진출입로가 협소하여       주변간선도로망 구축으로 단지 활성화에 기여하고 장기 미집행 도시계획       도로 개설로 주민숙원사업 해소 및 지역주민 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 논공읍 상리 415번지 일원

○ 규 모 : B=30m, L=980m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,850	4,850	300	700	0
국 비
시 도 비	2,000	2,000	0	0	0
시군구비	3,850	2,850	300	700	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2013.  5.  : 실시설계 용역 완료

○ 2013.  6.  : 1차 공사 착공

○ 2015.  9.  : 2차 공사 실시설계용역 착수

○ 2016.  3.  : 2차 공사 실시설계용역 완료

○ 2016. 12.  : 1차 공사 준공, 2차 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

논공 북1리 도시계획도로 개설

담당자

건설과 황덕모(☎668-3754)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통

불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을

촉진시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 6. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 논공읍 북리 474-12번지 일원

○ 규 모 : B=8~12m, L=368m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,200	1,111	657	432	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	1,111	657	432	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015.  8. : 실시설계용역 완료

○ 2016.  4. : 손실보상금 결정 및 협의

○ 2017.  3. : 공사착공

○ 2017.  7. : 1차 수용재결

□ 향후계획

○ 2018.  5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

달성군청～옥포강림임대주택

단지간 도시계획도로 개설

담당자

건설과 김성수(☎668-3755)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옥포 강림리 임대주택아파트 입주 등으로 인구가 급속히 증가함에 따라       주민들의 정주여건 향상 및 지역경제 활성화를 위해 달성군청과 옥포강림       임대주택단지간 도로를 건설코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 논공읍 금포리 ~ 옥포면 강림리 일원

○ 규 모 : B=30m, L=560m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,200	200	0	600	14,400
국 비
시 도 비	7,600	0	0	600	7,000
시군구비	7,600	200	0	0	7,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2010.  5. : 실시설계용역 완료

○ 2015.  4. : 현장시장실 운영 시 도로개설 건의

○ 2015.  3. : 市 투자심사 완료

□ 향후계획

○ 2018.  1. : 시비 6억원 재배정(대구시 → 달성군)

○ 2018.  7. : 보완설계용역 시행

○ 2018. 10. ~ 2020. 12. : 보상협의 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥포 본리2리(대방) 도시계획

도로 개설

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통

불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을

촉진시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 2. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 옥포면 본리리 2293번지 일원

○ 규 모 : B=12m, L=409m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,800	2,600	200	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,800	2,600	200	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2012.  3. : 실시설계용역 완료

○ 2014.  3. : 손실보상금 결정 및 협의

○ 2016. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥포 강림리(보금자리주택주변)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 이춘식(☎668-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기미집행 도시

계획도로 개설로 삶의 질적 향상과 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 옥포면 강림리 621번지 일원

○ 규 모 : B=15m, L=570m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,500	4,590	1,910	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	6,500	4,590	1,910	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015.  5. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 12. : 실시계획고시

○ 2016.  3. : 손실보상금 결정 및 협의

□ 향후계획

○ 2018.  1. : 공사 착공

○ 2018. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥포 간경 주진입도로 개설

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도 5호선간의 진입도로로써 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및

장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질적향상과 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 옥포면 간경리 944번지 일원

○ 규 모 : B=12m, L=575m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,200	6,200	0	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	6,200	6,200	0	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2009.  6. : 실시설계용역 완료

○ 2010. 12. : 1차 공사 보상협의

○ 2011. 11. : 1차 공사 준공(B=12m, L=100m)

○ 2012.  4. : 2차 공사 보상협의

○ 2015.  2. : 2차 공사 착공(B=12m, L=475m)

○ 2017. 12. : 2차 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥포 교항2리 외곽 도시계획

도로 개설

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통

불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진       시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 옥포면 교항리 1644번지 일원

○ 규 모 : B=8m, L=420m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	208년	2019년 이후
계	2,200	1,920	280	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	1,920	280	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015.  3. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 10. : 손실보상금 결정 및 협의

○ 2017. 11. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥포 송해공원～기세교차로간

도시계획도로 개설

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통

불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진       시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 옥포면 기세리 656-2번지 일원

○ 규 모 : B=30m, L=900m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000	0	150	4,150	4,700
국 비
시 도 비	6,300	0	0	2,000	4,300
시군구비	2,700	0	150	2,150	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017.  8. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2018.  7. : 실시설계용역 완료

○ 2018. 10. ~ 2019. 12. : 보상협의 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

현풍 원교-오산간 도로건설

담당자

건설과 이채운(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙동강 수위 상승 시 상습 침수지역이며, 기존 도로가 협소하고 시설물의       노후로 교통사고가 잦아 도로구조를 개선하여 이를 해소하고 낙후지역의 개발       을 촉진코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 6. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 현풍면 원교리 ~ 오산리 일원

○ 규 모 : B=8~12m, L=1,350m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,334백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,334	10,330	2,700	1,304	0
국 비	7,167	4,867	1,000	1,300	0
시 도 비
시군구비	7,167	5,463	1,700	4	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013.  6.  : 실시설계 용역 착수

○ 2014.  3.  : 설계경제성검토(설계VE) 및 건설기술심의

○ 2014.  7.  : 실시설계용역 준공

○ 2014.  8. : 감리용역 및 공사 착공

○ 2016. 11. : 전기공사 착공

○ 2017.  3. : 교량슬래브 콘크리트 타설완료 - 3차 공사 준공

○ 2017.  4. : 4차 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

현풍 상1리 도시계획도로 개설

담당자

건설과 김성수(☎668-3755)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통

불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진       시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 현풍면 상1리 현풍향교 동편

○ 규 모 : B=6~12m, L=360m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,200	0	800	1,000	400
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	0	800	1,000	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017.  3.  : 실시설계 용역 완료

○ 2017.  9.  : 1차분 공사 착공

○ 2017. 12.  : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ 2018. 1. ~ 2019. 12 : 2차분 보상협의 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

유가 초곡리 도로 확포장

담당자

건설과 황덕모(☎668-3754)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통불편 민원을 해       소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 유가면 초곡리 212번지 일원

○ 규 모 : B=8m, L=1,413m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	0	4	900	2,896
국 비
시 도 비
시군구비	3,800	0	4	900	2,896
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2015.  8. : 실시설계용역 착수

○ 2016.  1. : 도시관리계획(도로) 결정에 따른 전략환경영향평가 시행

○ 2017.  5. : 도시관리계획(도로)결정 입안도서 및 실시설계서 재작성

○ 2017.  8. : 주민열람 재공고 및 관련부서(기관) 재협의

□ 향후계획

○ 2018.  3. : 도시관리계획(도로)결정 지형도면 고시

○ 2018.  6. : 실시설계 용역 완료

○ 2018.  9. ~ 2020. 12. : 보상협의 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

비슬산 휴양림도로 확포장사업

담당자

건설과 오길수(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비슬산 휴양림도로는 급경사 및 도로선형이 불량해 비슬산을 찾는 내방객들의       통행위험이 상존하여 이를 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 6. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 유가면 용리 산 67번지 일원

○ 규 모 : B=18~20m, L=2,200m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,000	0	0	2,000	12,000
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	13,000	0	0	1,000	12,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015.  9. : 중기지방재정계획, 투자심사 심의완료

○ 2015. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2017.  8. : 실시설계용역 중지(지적임야간 지적불일치)

○ 2017.  4. : 지적임야간 접합 불일치 협의 완료

○ 2017.  5. : 도시관리계획(도로)결정 입안도서 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2018. 12. ~ 2019. 12. : 보상협의 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

현풍 지리~오산리

(군도18호선) 도로확포장

담당자

건설과 이윤수(☎668-2913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현풍면 지리~오산리를 연결하는 도로가 협소하여 차량통행 및 선형불량으로    시거확보가 어려워 이를 해소하고자 도로를 확장하여 교통소통의 원활함과    지역균형발전에 기여코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2018.

○ 위 치 : 달성군 현풍면 지리~오산리

○ 규 모 : L=2,600m B=8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,280	3,375	780	3,125
국 비
시 도 비
시군구비	7,280	3,375	780	3,125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○2013. 8. ~ 12. : 실시설계용역 완료

○2014. 2. : 주민설명회 개최

○2014. 6. : 교통안전진단 용역 완료

○2014.10. : 보상열람 공가

○2014.12. ~ 2015. 1. : 감정평가 실시 및 보상협의 통보

○2016. 3. ~ 6. : 사전재해영향성검토 용역

○2016. 5. : 도로구역 결정(변경) 고시

○2016. 5. : 보상 재평가 수 결정 통보

○2016. 7. : 일상감사 및 계약심사 요청

○2016.12. : 공사 착공

○2017. 4. : 수용재결 신청

○2018. 6. : 공기 연장(~ 2018. 9. 18.)

□ 향후계획

○2018. 9. : 공사 준공

사업명

가창 최정산 도로확장공사

담당자

건설과 우승수(☎668-2912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 리도 203호선(국지도~내주리 입구)과 농도 307호선(내주리 입구~최정산 정상부)으로 지정된 최정산 진입도로구간은 도로경사가 급하고 선형이 불량하며 좁아서 농어촌 도로로서의 기능을 하지 못하고 있어 도로를 확포장 및 일부구간 선형을 개선하여 교통소통에 원활을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2021.

○ 위 치 : 달성군 가창면 주리 국지도 30호선~최정산 정상부

○ 규 모 : L=7,660m B=7.8 ~ 10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,100	0	259	4,500	10,341
국 비	15,100	0	259	4,500	10,341
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○2016. 4. : 달성군, 국방부간 위탁 협약 체결

○2016. 6. : 2016년 예산 교부 통보(2,468백만원)

○2016. 6. ~ 8. : 실시설계용역 건설기술 심의

○2016.10. : 실시설계용역 발주(PQ+가격입찰)

○2017. 2. : 실시설계용역 계약 및 착수

○2017. 5. : 중심선 측량 및 노선설계

○2017. 7. : 실시설계 및 개발제한구역 협의

○2018. 5. : 소규모환경영향평가 용역 완료

○2018. 6. : 설계경제성(VE)

사업명

절전형 LED보안등 교체공사

담당자

도시과 박정현(☎668-3874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전력소모가 많은 나트륨 보안등을 전력소모가 적은 친환경 절전형 LED

보안등으로 교체하여 에너지 절감 및 밝고 안전한 밤거리를 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년 (3년간)

○ 위 치 : 달성군 관내 9개 읍·면

○ 규 모 : 기존 나트륨(150W)등에서 LED(50W)등으로 약 8,300등 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	1,500	1,300	1,200
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	1,500	1,300	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015. 10.  군 지방재정 투융자 심사 및 중기재정계획 반영

○ 2016. 12.  1차공사 준공

○ 2017. 12.  2차공사 준공

○ 2018.  6.  3차공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  9.  3차공사 준공 및 사업완료

사업명

하빈PMZ 평화기념마을조성사업

담당자

건축과 조수정(☎668-3852)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 역사관광지, 자연체험지를 네트워크화하여 관광거점으로의 기능 강화

○ 역사적 보전가치가 높은 지역 건축물 관리 및 활용계획마련 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 하빈면 봉촌리 및 하산리 일원

○ 규모 및 내용

1구간 : 하목정 진입경관조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관조성

2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성

3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 건립

4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성(낙동마을)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,162백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,162	38.2	1,266	1,711	3,146.8
국 비	3,081	19.1	633	855.5	1,573.4
시 도 비	1,540.5	9.55	316.5	427.75	786.7
시군구비	1,540.5	9.55	316.5	427.75	786.7
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○기본(디자인개발) 및 실시설계 완료

○평화예술센터건립 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2019. 10. 평화예술센터건립 공사업체 선정 및 공사시행

○ 2019.1 ~ 2020.12. PMZ평화예술촌 조성공사, 하목정 진입부 경관개선,

낙동강 둑길 야간경관 조성공사 등 시행

□ 사업변경 내역

○ 인센티브 부여로 인한 총사업비 증액(당초 : 6,000백만원 → 변경 : 6,162백만원)

사업명

낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화

네트워크 활성화 사업

담당자

건축과 임채은(☎668-3853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역자산의 종합적이고 체계적인 조사 및 활용을 통해 역사 관광지, 자       연 체험지를 네트워크화하여 관광거점으로의 기능 강화와 송해공원과 테       크노폴리스로 조성 등 주변 거점사업의 효과를 극대화하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 옥포면 기세리 일원

○ 규 모 : 도로 바닥 및 입면 정비 6.5km, 체험공간 조성, 건축물 입면

개선, 안내사인물 설치, 가로경관 개선 등 약 700,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000	400	0	2,076	3,524
국 비	3,000	200	0	1,038	1,452
시 도 비	1,500	100	0	519	726
시군구비	1,500	100	0	519	726
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본(디자인개발) 및 실시설계용역 중지(관련기관협의 및 심의)

○ 선비문화체험관 건립예정 토지매입(2018. 8.)

□ 향후계획

○ 2018. 9. 공공디자인 심의

○ 2018. 12. 실시설계 완료 및 최종보고회 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

경찰특공대 부지 이전 보상

담당자

정책사업과 김원양(☎668-2153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화원 설화리, 옥포 기세리 일대 공공기관 유치 및 개발을 위한 사업가능 부지 확보

○ 대구지방경찰청 소유인 (구)화원면허시험장과 추후 교환하여 사문진 역사공원, 화원동산과 연계하여 관광지로 개발, 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 4. ~ 2021.12.

○ 위 치 : 화원읍 설화리 838-2, 옥포면 기세리 31-1번지 일원

○ 규 모 : 94,829㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,778백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,778	3,857	4,143	5,778-	-
국 비
시 도 비
시군구비	13,778	3,857	4,143	5,778-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2014. 4. : 구 화원면허시험장과 특공대예정부지 교환 요청

○ 2015. 4. : 달성군‧특공대 이전사업 관련 국‧공유재산 교환 MOU체결

○ 2015.11. : 개발제한구역 대구시 도시계획위원회 심의(가결)

○ 2016. 6. : 국토부 개발제한구역 관리계획 승인

○ 2016.12. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수(대구지방경찰청)

○ 2017. 3. : 도시계획시설 결정(달성군)

○ 2017. 6. : 토지보상 추진

○ 2018. 4. : 도시계획시설 실시계획인가 신청(대구지방경찰청)

□ 향후계획

○ 2018. 8. : 도시계획시설 실시계획인가(달성군)

○ 2019. 4.~10. : 중앙토지수용위원회 수용재결 신청 및 결정

○ 2019. 2. : 공사 발주

○ 2020. 3. : 공사 착공 및 준공

사업명

달성토마토축제

담당자

관광과 김태현(☎668-3912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 토마토 등 지역특산물을 홍보하고 관광객 유인을 통한 지역경제 활성화 및 달성군 브랜드 인지도 상승

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. 20 ~ 5. 21.

○ 위 치 : 대구 달성군 유가읍 상리 971 (국립대구과학관 옆)

○ 규 모 : 관광객 10만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 달성 토마토축제 개최완료 : 토마토 80톤 사용

□ 향후계획

○ 관광객과 농민들의 의견을 반영하여 지속여부 검토

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

낙동강 한국잼버리 후적지 개발사업

담당자

관광과 이석철(☎668-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2016년 한국잼버리대회 후적지를 활용, 대규모 친환경 종합관광레포츠 단지를 조성함으로써 시민의 여가선용 및 레포츠 활동공간 제공하여   지역주민의 만족도 제고 및 지역균형발전에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021

○ 위 치 : 달성군 구지면 오설리 875-2번지 일원

○ 규 모 : 216,400㎡ (골프장, 야영장, 다목적광장, 주차장 등 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,500	-	6,80	-	6,820
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,500	-	6,80	-	6,820
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016.  12. : 달성군 친환경골프장 조성사업 계획(안) 수립

○ 2017.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수(중지 5.30.)

○ 2018.  7. : 환경입지컨설팅 신청

□ 향후계획

※ 환경입지컨설팅 결과에 따라 사업추진방향 검토 후 추진

○ 2018.  8. ~ 11. : 사업구상 및 타당성 검토

○ 2018. 12.       : 일상감사 및 계약심사

○ 2019.  2. ~  8. : 기본 및 실시설계 용역, 관련 협의

○ 2019.  9. ~ 2021. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비(백만원)	11,320	7,500
사업기간	2017∼2020	2017~2021
사업규모	야영장, 물놀이장, 잔디광장, 피크닉장, 골프장, 주차장 등	골프장, 주차장 등

사업명

100대 피아노 콘서트

담당자

문화체육과 최용수(☎668-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 피아노가 사문진나루터로 최초 유입된 역사적 사실을 사회·문화적 콘텐츠로 풀어내어 달성을 대표하는 문화사업으로 정착한 100대 피아노 콘서트는 달성군민의 자긍심 제고 및 관광자원과의 결합을 통해 국내 대표적인 도시브랜드 사업으로 발전시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. 30.(토) ~ 10. 1.(일)

○ 위 치 : 화원읍 사문진상설야외공연장

○ 규 모 : 관람객 40,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	595		595
국 비	95		95
시 도 비	100		100
시군구비	400		400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2017년도 사업 완료

- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단

- 후원 : 대구광역시, 한국문화예술위원회

- 내용 : 100인 피아니스트 및 유명 예술인 초청공연

- 출연 : 금난새(예술감독), 김동규, 유키 구라모토, 정동하 등

□ 향후계획

○ 2018년 달성100대 피아노콘서트 실시 : 9. 29.(토) ~ 30.(일)

□ 사업변경 내역

❍ 해당없음

사업명

달성군민체육관 증개축 공사

담당자

문화체육과 오규승(☎668-2033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 테크노폴리스, 국가산업단지, DGIST 등 대규모 지역 개발에 따른 인구유입이 예상됨으로 기본체육시설 확충 시급

○ 기존 체육관이 냉난방 시설이 없고 노후화되어 이용자의 불편 초래

○ 인근에 위치해 있는 달성종합스포츠파크를 연계한 생활체육프로그램 진행       및 각종대회와 경기유치 등으로 지역경제 활성화와 공공체육시설 기반조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 대구광역시 달성군 현풍면 성하리 235-4번지 일원

○ 규    모 :  부지면적 - 11,478㎡  (연면적 6,052.8㎡ / 지하2층, 지상2층)

○ 사업내용 : 지하2층 - 기계실

지하1층 - 다목적강당 및 생활체육실

지상1 ~ 2층 - 다목적체육관 및 관람석

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 19,300백만원 [국3,300 시1,500 군14,500]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,300	13,625	5,675
국 비	3,300	3,300	0	-
시 도 비	1,500	1,500	0	-
시군구비	14,500	8,825	5,675

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  완료 %)

○ 2013.  6. 28 : 대구시 투융자심사 조건부 승인(국비 등 재원마련 조건)

○ 2013. 10. 14 : 달성군민체육관 증·개축공사 기본계획 수립

○ 2014.  6. ～ 10 : 국제현상설계공모 공고, 심사 및 선정

- 선정 : drozdov&partners(우크라이나) / 공동이행 : ㈜현대건축사사무소

○ 2014. 12. 19 : 공유재산 관리계획 승인

○ 2015.  9.  8 : 설계용역 변경시행계획수립(건축과)

- 계약협상결렬 및 국내업체 자진포기(7. 23)로 인한 국제현상설계공모 차기당선작과 계약협상 추진

○ 2015. 10.  6 : 설계용역 착수(계약 10. 2)

- 계약업체 : Javier Mosquera Gonzalez(스페인), 공동이행 : ㈜화인종합건축사사무소

○ 2016.  4. 29 : 달성군민체육관 건립계획 변경(사업비증가, 부지 및 건축규모 확대)

○ 2016.  5.  9 ~ 6.  1 : 설계경제성(VE) 검토

○ 2016.  5. 20 : 공유재산 관리계획 승인(사업변경분)

○ 2016.  7. 28 : 대구시 투자심사(재심사) 조건부승인

○ 2016.  7. 22 ~ 8. 25 : 공사 일상감사

○ 2016.  8.  8 : 설계용역 완료

○ 2016.  8. 25 ~ 9. 19 : 공사 계약심사

○ 2016. 10. 30 : 감리용역 착수(계약 10. 29.)

○ 2016. 10.  5 : 공사 착공(계약 10. 4.)

○ 2017. 12. 26. : 공사준공

○ 2018.  1. 20. : 개관

○ 2018.  1. 23. : 달성군 시설관리공단 이관

□ 향후계획

○ 2017.  12월 : 시운전 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초(‘13년 기준)	변 경(‘16년 )	비 고
위 치	성하리 235-4번지	성하리 235-4번지 외 10필지	증)10필지
부지면적	10,439㎡	11,478㎡	증)1,039㎡
연면적	4,875㎡	6,052.8㎡	증)1,178.8㎡
규 모	지하2층/지상2층	지하2층/지상3층
	- 지하2층 : 주차장 - 지하1층 : 생활체육실 및 사무실 - 지상1층 : 다목적체육관 - 지상2층 : 관람석	- 지하2층 : 기계실 - 지하1층 : 다목적강당 및 생활체육실 - 지상1층~2층 : 다목적체육관 및 관람석
사 업 비	110억원	193억원	증)83억원
사업기간	2013. ~ 2017. 9월	2013. ~ 2017. 12월

사업명

달성군보건소이전신축

담당자

보건과 윤숙연☎668-3104)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공보건의료에 대한 지역주민의 요구도가 높아짐에 따라 공공보건의료       향상을 위한 인프라를 구축하고 주민의 기대수준에 부흥하는 양질의 보건      의료서비스 제공을 위해 보건소를 이전신축 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020. 4.

○ 위 치 : 달성군 현풍면 하리 253-2, 250-4번지

○ 규 모 : 건축면적4,798㎡ 연면적 11,973.44㎡(지하1층/지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  30,007백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	30,007	1,500	20,155	7,068	1,284
국 비	3,716		3,716
시군구비	26,291	1,500	16,439	7,068	1,284

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 중앙 투․융자 심사 조건부 승인      : 2016.  3.

○ 건축설계 공모                 : 2016.  6.

○ 농어촌의료서비스개선 사업 공모신청     : 2016.  8.

○ 설계용역계약 및 기본설계용역착수      : 2016.  10.

○ 기본설계 완료                 : 2016.  12.

○ 기본 설계 심의요청(보건복지부)        :  2017.   1.

○ 기본 설계 심의승인(조건부)       : 2017.   3

○ 기본 설계변경 심의요청(보건복지부)   :  2017.  11.

○ 기본 설계변경 심의승인(조건부)   : 2017.  12.

○ 설계용역 완료                     : 2018.   5.

□ 향후계획

○ 공사착공 : 2018.  8.

○ 공사준공 : 2020.  4.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 및 연면적변경

- 변경전 ; 사업기간 2015~2018. 7. , 연면적 10,383㎡ (지하1층/지상4층)

- 변경후 ; 사업기간 2015~2020. 4. , 연면적 11,973.44㎡(지하1층/지상5층)

사업명

농산물종합가공기술지원센터 건립

담당자

농촌지도과 차영호(☎668-2973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물의 단순생산에서 새로운 가치를 창출하는 농업의 6차산업화를

통한 농가소득향상과 발전 잠재력 개발로 농업의 비즈니스 기반구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년  1월 ～ 2018년 12월

○ 위 치 : 달성군 옥포면 교항리 2961

○ 규 모 : 지상 2층, 연면적 997.8㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,488백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,488		72	3,416
국 비	500		36	464
시 도 비
시군구비	2,988		36	2,952
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 농산물가공센터 외부 판넬 시공

○ 농산물 가공장비 조달청 구매요청

□ 향후계획

○ 농산물 가공센터 준공 : 2018. 8. 25

○ 가공장비 설치 및 시운전 : 10월 ~ 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경

- 당초) 지상 2층 1,200㎡ ⇒ 변경) 지상 2층, 연면적 997.8㎡,