사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
계	358,095,736,000			84,346,048,040		57,065,176,200	11,419,526,090	39,585,650,110	6,060,000,000
종합사회복지관 증축	3,395,200,000	2017-01-01 ~ 2019-12-31	부지매입, 설계용역	460,257,670	달성군종합사회복지관 건물증축	2,104,227,630		2,104,227,630		마감작업 진행중	85	희망지원과
	달성군종합사회복지관 증축
달성군장애인재활자립작업장확장이전	5,600,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	부지매입, 설계, 증축	5,600,000,000	달성군장애인재활자립작업장 확장이전	3,883,499,100		3,883,499,100		설계용역완료	70	희망지원과
	달성군장애인재활자립작업장 확장이전
화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	7,500,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=8m, L=1,267m	100,000,000	B=8m, L=1,267m	750,000,000		750,000,000		보상준비중	15	건설과
	B=8m, L=1,267m
논공 상리 공단진입 도시계획도로개설	6,000,000,000	2015-08-11 ~ 2019-03-25	B=30(15)m,L=980m	6,000,000,000	B=30(15)m,L=980m					공사완료	100	건설과
	B=30(15)m,L=980m
가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	15,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	B=15m,L=2,170m	200,000,000	B=15m,L=2,170m	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000		보상중	20	건설과
	B=15m,L=2,170m
가창 동부순환도로 개설	9,500,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=12m,L=1,700m	250,000,000	B=12m,L=1,700m	100,000,000		100,000,000		보상중	20	건설과
	B=12m,L=1,700m
가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	5,000,000,000	2017-01-01 ~ 2019-12-31	B=8(10)m,L=1,130m	3,120,000,000	B=8(10)m,L=1,130m					보상중	25	건설과
	B=8(10)m,L=1,130m
하빈 군도7호선(감문~대평) 도로확장	18,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	B=19.5m,L=4,500m		B=19.5m,L=4,500m	300,000,000		300,000,000		설계중	5	건설과
	B=19.5m,L=4,500m
옥포 본리2리(대방) 도시계획도로개설	3,846,841,000	2012-02-07 ~ 2019-07-12	B=10m,L=400m	3,810,000,000	B=10m,L=400m	8,641,000		8,641,000		공사완료	100	건설과
	B=10m,L=400m
옥포 강림리(보금자리주택주변) 도시계획도로 개설	5,862,000,000	2015-02-27 ~ 2019-07-30	B=15m,L=560m	5,840,000,000	B=15m,L=560m	22,237,000		22,237,000		공사완료	100	건설과
	B=15m,L=560m

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	15,000,000,000	2017-07-30 ~ 2020-12-31	B=24.7m,L=1,140m	1,150,000,000	B=24.7m,L=1,140m	6,500,000,000		4,000,000,000	2,500,000,000	보상중	18	건설과
	B=24.7m,L=1,140m
달성군청~옥포강림임대주택단지간 도로건설	15,200,000,000	2018-07-12 ~ 2021-02-28	B=30m,L=560m	638,400,000	B=30m,L=560m	5,391,190,000		2,991,190,000	2,400,000,000	보상중	20	건설과
	B=30m,L=560m
현풍 오산~원교간(군도1호선) 도로 선형 개량	16,153,680,000	2014-08-14 ~ 2018-12-21	B=10m,L=1,350m	15,953,680,000	B=10m,L=1,350m	200,000,000	200,000,000			공사완료	100	건설과
	B=10m,L=1,350m
도로굴착복구	11,500,000,000	2019-02-01 ~ 2020-01-31			굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□	3,978,823,600		3,978,823,600		공사완료	100	건설과
	굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□
유가 초곡리 도로확포장	6,270,000,000	2015-08-11 ~ 2021-12-31	B=8m,L=2,274m	3,470,000,000	B=8m,L=2,274m	695,590,000		695,590,000		공사중지(1공구),설계완료(2공구)	40	건설과
	B=8m,L=2,274m
비슬산 휴양림도로 확포장	18,500,000,000	2015-11-23 ~ 2023-02-28	B=15~20m L=2,200m	4,500,000,000	B=15~20m L=2,200m	600,000,000		600,000,000		보상중	35	건설과
	B=15~20m, L=2,200m
가창 동서 연결도로 개설	3,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	B=8.0m L=5.3km		B=8.0m L=5.3km	300,000,000		300,000,000		설계중	5	건설과
	B=8.0m L=5.3km
가창 최정산 도로공사	15,137,015,000	2016-08-01 ~ 2021-02-28	B=8~10m L=7,600m	3,760,711,310	B=8~10m L=7,600m	3,975,526,090	3,975,526,090			공사중	65	건설과
	B=8~10m L=7,600m
달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	13,005,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-31	B=8.5~11.75m L=1,300m	8,684,000,000	B=8.5~11.75m L=1,300m	5,324,000,000	4,224,000,000	1,100,000,000		공사중	98	건설과
	B=8.5~11.75m L=1,300m

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)	6,586,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	하빈PMZ 평화예술센터 건립, 주민역량 프로그램사업 운영	3,194,000,000	평화예술센터 건립, 국제포럼 개최 및 프로그램사업 운영, 하빈PMZ 평화기념마을조성사업 공사 발주	3,230,000,000	1,615,000,000	807,500,000	807,500,000	평화예술센터 준공 및 개관, 주민역량 프로그램사업 운영, 하빈PMZ 평화기념마을조성공사 관련 관계기관 협의 및 행정절차 진행	56	도시과
	-1구간 :하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성 -2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성 -3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 건립 -4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌조성(낙동마을) -주민역량 프로그램사업 운영
도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)	6,000,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	기본 및 실시설계 원가계산 용역 등	2,476,000,000	간판정비사업 시행, 주민참여 마을활성화 프로그램 개발사업 연구용역 시행, 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 시행, 선비문화체험관 기본 및 실시설계용역 시행, 낙Ｃ경Ｃ청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 시행	1,410,000,000	705,000,000	352,500,000	352,500,000	기본(디자인개발) 및 실시설계 용역 완료, 주민참여 마을활성화 프로그램 개발사업 연구용역 완료, 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 완료, 간판정비사업 준공, 선비문화체험관 건립공사 기본 및 실시설계용역 진행 중, 낙경청 선비문화허브네트워크 활성화사업 공사 중	40	도시과
	벚꽃길 산책로 경관개선사업, 기세리 선견지마을 경관개선사업, 소나무 숲 산책로 조성사업, 용연사 전통문화가로 경관개선사업, 프로그램 사업 등

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
한옥마을 조성사업	44,000,000,000	2016-07-01 ~ 2022-04-30				770,000,000		770,000,000		도시개발계획수립 및 실시계획 용역	30	정책사업과
	한옥마을 조성 99,80□, 한옥 106호
경찰특공대 이전 부지 교환	15,100,000,000	2014-04-01 ~ 2020-03-31	보상비 및 기타비용	14,479,917,130	보상금 공탁	850,000,000		850,000,000		수용재결 완료, 보상금 공탁	80	정책사업과
	면적 94,798□ 65필지
참꽃케이블카 설치	31,000,000,000	2016-05-01 ~ 2022-06-30			군립공원계획 결정(변경) 및 도시관리계획(궤도)결정 용역	43,400,000		43,400,000		군립공원계획 결정(변경) 및 도시관리계획(궤도)결정 완료	20	정책사업과
	케이블카 설치 연장1.9km
비슬관광지 조성	49,000,000,000	2016-06-01 ~ 2022-12-31	주차장조성공사, 비슬산관광지 조성계획수립	659,081,930	주차장정비공사, 협의보상	7,228,041,780		7,228,041,780		비슬산관광지 실시설계 중	35	정책사업과
	관광지 조성 250,800□정도
현풍 교통문화파크 조성	12,540,000,000	2018-08-01 ~ 2021-10-31	현풍교통문화파크 조성		현풍교통문화파크 조현풍교통문화파크 조성	8,000,000,000		8,000,000,000		공원조성계획결정(변경)및 지형도면 고시 및 협의보상실시, 실시설계용역 준비 중	35	정책사업과
	현풍교통문화파크 조성 27,943□