과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
합 계(276건)				221,710,649,347	153,601,894,600	135,921,810,560	74,925,457,170
기획예산실	지방행정□재정지원	지역인구정책지원	기타보상금	482,460,000	293,030,000	169,989,240	36,629,000	출생신고 기한이 출생일로부터 1개월이내로 12월 출생아 지원을 위해 연장 필요
회계과	일반행정	현풍읍 민원실 청사 내진보강공사	시설비	324,000,000	16,434,000	16,434,000	307,566,000	실시설계(3개월) 완료 후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 및 준공기한(4개월) 미도래 - 원인행위액 : 16,434천원(실시설계) (원인행위일자 : 2020.09.25.)"
회계과	일반행정	구지면 행정복지센터 내진보강공사	시설비	406,000,000	16,470,000	16,470,000	389,530,000	실시설계(3개월) 완료 후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 및 준공기한(4개월) 미도래
정보통신과	일반행정	스마트시티 통합플랫폼 기반구축	자산및물품취득비	1,350,000,000	767,505,010	767,505,010	582,494,970	각종 행정절차 지연으로 인하 사업지연
정보통신과	일반행정	안전 영상정보 인프라(CCTV)구축	시설비	3,613,533,000	1,954,347,200	1,372,063,400	2,165,682,390	공사기간 지연 및 각종 행정절차 이행으로 인한 사업지연
농업정책과	농업□농촌	벼육묘장 설치 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000			100,000,000	시비교부 지연으로 인한 공기부족
농업정책과	농업□농촌	과수산업 경쟁력제고	민간자본사업보조(이전재원)	40,000,000			40,000,000	보조사업자 미 선청으로 2021년 사업 재공모 사업추진 예정
농업정책과	농업□농촌	채소류 경쟁력제고	민간자본사업보조(이전재원)	938,307,000	517,170,060	517,170,060	366,403,000	대구시 2021년 농업부문 예산감소에 따라 해당사업의 집행잔액을 이월하여 2021년 장기성필름, 자동선별기 지원사업 추진
청소위생과	폐기물	달성군 재활용품선별장 현대화	시설비	2,500,000,000	2,297,899,170	2,297,899,170	190,000,000	한국국토정보공사와 국유지(현풍읍 원교리 1749-33) 매입 관련 업무협의 진행 중
공원녹지과	지역및도시	국가 물산업클러스터 명품경관 조성	시설비	398,133,000			398,133,000	대구시 물에너지산업과 실시설계 용역에 따른 유관기관 협의 및 의견수렴 이행에 기간 소요
공원녹지과	지역및도시	국가 물산업클러스터 명품경관 조성	시설부대비	2,867,000			2,867,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
공원녹지과	지역및도시	군립공원, 도시자연공원구역 관리	시설비	995,424,407	791,657,930	648,294,930	200,000,000	"공사 준공기한 미도래 - 2020. 9.~2021. 1."
공원녹지과	지역및도시	부리어린이공원 조성	시설비	3,200,000,000	2,858,928,890	2,858,928,890	341,071,110	손실보상 협의기간(2020. 9. ~ 2021. 2.) 미도래
공원녹지과	지역및도시	상리근린공원 조성	시설비	2,800,000,000	65,662,340	65,662,340	2,725,338,000	사전 행정절차(감정평가, 손실보상 협의 등) 이행에 따른 토지 보상비 이월
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	시설비	748,766,410	575,937,140	521,313,140	227,453,270	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	감리비	311,154,000	272,655,000	151,724,000	159,430,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	시설부대비	6,848,000	1,390,000	1,390,000	4,000,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	숲가꾸기	시설비	387,552,000	308,194,000	308,194,000	79,358,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	숲가꾸기	감리비	10,836,000	3,690,000	3,690,000	6,000,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	미세먼지 공익숲가꾸기	시설비	743,560,000	701,191,000	701,191,000	42,369,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	미세먼지 공익숲가꾸기	감리비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	미세먼지 공익숲가꾸기	시설부대비	800,000			800,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
복지정책과	노인□청소년	노인여가시설 개보수	시설비	335,903,000	246,645,850	246,645,850	83,510,000	"2회추경 예산으로, 실시설계 완료(12월중) 후 공사기간 부족"
복지정책과	노인□청소년	노인여가시설 개보수	자산및물품취득비	108,500,000	94,906,610	94,906,610	10,000,000	"2회추경 예산으로, 실시설계(12월중) 및 공사완료('21.2월중) 후 물품구입 예정 "
복지정책과	보육□가족및여성	국공립 구지어린이집 환경개선	시설비	250,000,000	12,691,000	12,691,000	237,309,000	설계 후 공사시간(2021년 1월~2월) 미도래로 이월
복지정책과	보육□가족및여성	어린이집 확충	민간위탁금	571,000,000	351,000,000	351,000,000	140,000,000	국공립 어린이집 리모델링 완료(2021.02월) 미도래로 인한 미집행
복지정책과	보육□가족및여성	어린이집 확충	시설비	1,485,476,160	1,148,594,830	975,170,090	281,944,000	국공립 어린이집 리모델링 공사(2021년 1월~2월) 후 지출
희망지원과	취약계층지원	아동학대 상담·조사공간 환경개선	시설비	15,000,000			15,000,000	해당 사업의 예산 교부가 2020년 11월에 확정됨에 따라 아동학대조사 상담실 장소 확보 및 환경개선을 위한 공사 업체 선정 등 절차 이행 지연.
희망지원과	취약계층지원	아동학대 상담·조사공간 환경개선	자산및물품취득비	5,000,000			5,000,000	해당 사업의 예산 교부가 2020년 11월에 확정됨에 따라 아동학대조사 상담실 장소 확보 및 환경개선을 위한 공사 업체 선정 등 절차 이행 지연.
교통과	대중교통□물류등기타	농촌형 교통모델	운수업계보조금	388,456,000	370,569,100	370,569,100	17,886,000	사업기간('20.1.1.~20.12.31.) 미도래 (당해 월 운행 보조금의 익월 청구 및 정산)
교통과	문화및관광일반	현풍 교통문화파크 조성	시설비	2,084,325,000	846,097,360	753,229,360	1,000,000,000	편입토지 및 지장물 보상지연 용역완료 시기 미도래에 따른 사업비 이월
건설과	도로	화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	시설비	3,702,068,000	3,150,362,520	2,478,008,020	1,224,059,980	2회추경 확보 후 12월 공사발주로 공기 부족
건설과	도로	화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	감리비	100,000,000	89,800,000		100,000,000	절대공기 부족
건설과	도로	화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	3,780,000			3,780,000	공사이월에 따른 부대비 이월
건설과	도로	화원 성산1리(광법사)도시계획도로 개설	시설비	258,560,000	114,818,660	114,818,660	20,000,000	절대공기부족에 따른 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	화원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	8,657,000	8,657,000	41,343,000	보상 진행 중인 사업 - 보상신문공고 잔액 이월
건설과	도로	화원 본리1리 479번지선 도시계획도로 개설	시설비	478,260,000	396,432,010	237,101,510	206,874,490	공사준공 미도래로 인한 공사비 이월 - 21년 02월 준공
건설과	도로	화원 천내리(337-4번지선) 도시계획도로 개설	시설비	500,000,000	426,158,400	426,158,400	73,841,600	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 - 편입용지 13/17건, 지장물 4/8건
건설과	도로	화원 설화2리 달성유통센터 뒤편 외 1개소 도시계획도로 개설공사	시설비	1,511,624,000	1,066,026,040	1,066,026,040	445,597,960	보상지연으로 인한 보상비 이월 - 2021. 상반기 공탁예정
건설과	도로	화원 명곡리(명곡램프연결로) 도시계획도로 개설	시설비	160,000,000	109,712,300	78,540,300	81,459,700	용역기간 미도래로 인한 용역비 이월
건설과	도로	화원 본리리(661-1번지선) 도시계획도로 개설	시설비	70,000,000	45,036,700	27,437,700	42,562,300	용역기간 미도래로 인한 용역비 이월
건설과	도로	화원 성산리(29-3번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,700,000,000	1,148,887,890	1,148,887,890	551,112,110	보상지연으로 인한 보상비 및 공사비 이월
건설과	도로	화원 구라리(산54-3번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,000,000,000	19,643,800	19,643,800	980,356,200	보상지연으로 인한 보상비 및 공사비 이월
건설과	도로	논공 노이2리 마을회관옆 도시계획도로 개설	시설비	440,210,900	312,609,930	228,826,940	100,000,000	공사기간 미도래 (20.09.18.~21.05.15.)
건설과	도로	논공 삼리2리 안씩실 도시계획도로 개설	시설비	150,000,000	80,701,900	80,701,900	69,298,100	잔여 보상비 이월
건설과	도로	논공 위천1리 위천1길 도시계획도로 개설	시설비	400,000,000	198,982,820	198,982,820	200,000,000	공사기간 미도래
건설과	도로	논공 위천리 위천삼거리옆 도시계획도로 개설	시설비	300,000,000	64,783,150	64,783,150	235,216,850	잔여 보상비 이월
건설과	도로	논공 위천그린공단 중앙길 도시계획도로 개설	시설비	1,771,772,800	1,765,157,310	1,765,157,310	6,615,490	잔여 보상비 이월
건설과	도로	논공 하2리 정골 도시계획도로 개설	시설비	810,895,700	687,558,290	687,558,290	123,337,410	잔여 보상비 이월
건설과	도로	달성군청 뒤 도시계획도로 개설	시설비	2,021,048,400	1,910,459,230	1,910,459,230	110,589,170	잔여 보상비 이월
건설과	도로	논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	시설비	122,823,400	91,828,800	91,828,800	30,994,600	잔여 보상비 이월(보상준비중)
건설과	도로	논공 금포리 대진섬유 옆 도시계획도로 개설	시설비	1,400,000,000	692,198,250	692,198,250	707,801,750	잔여 보상비 이월
건설과	도로	다사 서재리 선진섬유앞 도시계획도로 개설	시설비	1,600,000,000	1,469,535,120	1,469,535,120	130,464,880	보상 협의 진행 중인 사업 - 21년 1월 공탁금 지출 예정
건설과	도로	다사 문산리 장수식당 일원 도시계획도로 개설	시설비	1,100,000,000	913,935,720	658,222,720	441,777,280	착공 후 민원 사항으로 인한 설계재검토로 인한 공사 중지로 연내 준공 불가

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	시설비	1,780,417,000	1,105,570,610	1,105,570,610	600,000,000	주거이전비 지출예정
건설과	도로	다사 서재휴먼시아~진흥아파트 도시계획도로 개설	시설비	2,700,000,000	2,635,682,250	2,635,682,250	64,317,000	보상 협의 지연 - 21년 1월 수용재결 예정
건설과	도로	다사 세천리(279-6번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	시설비	100,000,000	3,520,000	3,520,000	82,000,000	손실보상금 협의를 위한 감정평가 진행 중
건설과	도로	다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결 도로개설	시설비	100,000,000			85,000,000	손실보상금 협의를 위한 감정평가 진행 중
건설과	도로	다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	시설비	153,300,000	126,793,000	109,018,000	26,507,000	관련용역 중앙부처 협의 등 사전 절차 이행 지연
건설과	도로	다사 매곡리(다사성당앞) 도로확장	시설비	1,092,085,000	320,053,810	165,770,120	100,000,000	준공기간 미도래 및 보상협의 지연 - 준공예정일 : 2021. 07. 07.
건설과	도로	다사 달성군립도서관 북편 도시계획도로 개설	시설비	100,000,000			95,000,000	감정평가진행 중으로 사전 및 행정절차 이행 지연
건설과	도로	다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	시설비	400,000,000	367,164,900	367,164,900	32,835,000	보상 협의 지연
건설과	도로	다사 서재리 하늘소망교회 뒤편 도시계획도로 개설	시설비	1,009,827,000	647,412,640	140,997,140	789,388,360	보상 협의 지연으로 인한 공사중지로 연내 준공 불가 - 21년 1분기 수용재결 예정
건설과	도로	다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로 개설	시설비	727,524,750	465,380,250	465,380,250	262,144,000	보상 협의 진행 중인 사업 - 잔여지 보상 등 잔액 이월
건설과	도로	옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	828,627,300	146,075,000	146,075,000	500,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 53%
건설과	도로	옥포 본리2리(옥포초교뒤편) 도시계획도로 개설	시설비	740,255,900	599,403,200	599,403,200	100,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 83%
건설과	도로	유가 유곡2리 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000	104,136,940	13,542,000	186,458,000	공사기간 미도래 - 2020.9.8.~2021.3.6.
건설과	도로	옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	622,994,760	332,222,500	332,222,500	290,772,260	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	2,520,000	997,600	997,600	1,522,400	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	옥포 간경2길 도시계획도로 개설	시설비	850,000,000	808,972,450	567,712,300	282,287,700	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 신당리(신당2길)도시계획도로 개설	시설비	297,840,000	215,861,830	124,348,240	173,491,760	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 신당리(신당2길)도시계획도로 개설	시설부대비	2,160,000			2,160,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	옥포 교항1리 교항5길 도시계획도로 개설	시설비	550,000,000	232,362,290	82,993,300	467,006,700	공사기간 미도래 - 2020.11.23. ~ 2021.07.20.

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	옥포 본리2리 2307-6번지선 도시계획도로 개설	시설비	411,579,900	186,272,380	9,898,380	400,000,000	공사기간 미도래 - 2020.11.23. ~ 2021.07.20.
건설과	도로	옥포 강림1리 900번지선 도시계획도로 개설	시설비	220,000,000	105,654,090	47,759,500	172,240,500	공사기간 미도래 - 2020.11.23. ~ 2021.07.20.
건설과	도로	옥포 간경리 505번지선 도시계획도로 개설	시설비	806,172,310	639,476,850	545,086,850	200,000,000	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 본리리 913번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	662,370,090	607,602,780	399,501,020	262,869,070	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 본리리 990번지선 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000	127,785,570	48,059,100	151,940,900	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	시설비	2,651,292,630	1,639,747,080	1,639,747,080	1,011,545,550	잔여 보상비 이월 - 보상률 77%
건설과	도로	옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	시설비	417,170,800	371,117,600	371,117,600	46,053,200	잔여 보상비 이월 - 보상률 71%
건설과	도로	옥포 강림1리 876번지선 도시계획도로 개설	시설비	168,452,650	82,967,090	82,967,090	50,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 90%
건설과	도로	옥포 본리1리(본리교 일원) 도시계획도로 개설	시설비	613,082,900	481,759,240	481,759,240	131,323,660	잔여 보상비 이월 - 보상률 80%
건설과	도로	옥포 본리1리 2196번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,510,465,800	1,434,513,220	1,434,513,220	75,952,580	잔여 보상비 이월 - 보상률 94%
건설과	도로	옥포 간경리 808번지선 도시계획도로 개설	시설비	750,000,000	484,845,300	484,845,300	265,154,700	잔여 보상비 이월 - 보상률 70%
건설과	도로	옥포 간경리 731번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,095,164,500	818,715,780	818,715,780	276,448,720	잔여 보상비 이월 - 보상률 71%
건설과	도로	옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	70,000,000	60,306,100	60,306,100	9,693,900	용역기간 미도래 - 2020.07.08. ~ 2021.01.03.
건설과	도로	옥포 본리1리 금성사앞 도시계획도로 개설	시설비	813,131,100	518,318,400	518,318,400	220,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 68%
건설과	도로	현풍 성하2리(마을안길)도시계획도로 개설	시설비	350,000,000	179,780,780	179,780,780	170,219,220	보상비 이월
건설과	도로	옥포 강림2리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	시설비	1,813,075,500	1,809,910,170	1,809,910,170	3,165,330	공사기간 미도래 - 2021년 1월 착공예정
건설과	도로	옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	시설비	6,692,690,620	5,868,352,880	5,212,813,880	1,479,876,740	용역기간 미도래 - 2020.12.17. ~ 2022.01.15.
건설과	도로	옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	감리비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	공사기간 미도래 - 2020.07.24. ~ 2022.07.13.
건설과	도로	달성군청~옥포강림임대주택단지간 도로건설	시설비	5,200,847,570	4,245,218,020	4,222,272,020	978,575,550	공가기간 미도래 - 2020.5.13.~2021.1.14.

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	현풍 지2리 724번지선 도시계획도로 개설	시설비	609,801,500	214,907,000	214,907,000	394,894,500	보상비 이월
건설과	도로	옥포 교항1리 1263번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	534,329,800	501,771,900	501,771,900	31,119,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 66%
건설과	도로	옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설	시설비	1,275,489,800	1,013,667,170	1,013,667,170	261,822,630	잔여 보상비 이월 - 보상률 77%
건설과	도로	옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	시설비	58,135,100	3,520,000	3,520,000	50,000,000	잔여 보상비 이월(감정평가 준비 등) - 보상률 0%
건설과	도로	옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	시설비	100,000,000	60,595,950	60,595,950	39,404,050	잔여 보상비 이월(감정평가 준비 등) - 보상률 0%
건설과	도로	옥포 김흥2리 마을주진입로 도시계획도로 개설	시설비	1,330,288,700	567,166,760	567,166,760	150,000,000	공사기간 미도래 - 2019.07.03. ~ 2021.05.25.
건설과	도로	가창 정대리(777번지선) 도시계획도로 개설	시설비	261,544,000	13,959,500	13,959,500	50,000,000	보상협의 진행 중으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	옥포 교항1리 1226번지선 외1개소 도시계획도로 개설	시설비	751,775,950	598,837,980	464,828,280	286,947,670	공사기간 미도래 - 2020.08.12. ~ 2021.04.08.
건설과	도로	옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	시설비	250,242,030	145,244,900	145,244,900	100,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 85%
건설과	도로	옥포 신당리 1168번지선 도시계획도로 개설	시설비	141,353,330	80,422,300	80,422,300	20,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 99%
건설과	도로	옥포 신당리 도시계획도로 개설	시설비	597,723,700	416,803,120	416,803,120	100,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 90%
건설과	도로	옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	358,743,250			50,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 80%
건설과	도로	옥포 교항1리(교항2길) 도시계획도로 개설	시설비	620,251,400	207,943,510	26,596,180	400,000,000	공사기간 미도래 - 2020.11.23. ~ 2021.07.20.
건설과	도로	가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	시설비	4,140,465,780	4,134,625,810	4,134,625,810	5,839,970	보상협의 진행 중으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	가창 동부순환도로 개설	시설비	2,209,887,730	1,730,541,630	1,730,541,630	479,346,100	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	시설비	1,947,060,160	1,596,040,940	1,577,050,940	351,019,220	추가구간 보상금 추경예산편성으로 보상절차 진행 중
건설과	도로	가창 단산리(376-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	452,496,420	364,991,820	285,325,820	80,281,550	관급자재 지출 등
건설과	도로	가창 오2리(235번지선) 도시계획도로 개설	시설비	709,250,000	318,992,340	318,992,340	166,820,000	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	가창 행정리(511번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	시설비	597,573,000	159,437,500	159,437,500	9,916,000	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	가창 오1리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	시설비	896,227,000	552,415,600	552,415,600	343,811,400	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	가창 단산리(807번지선) 도시계획도로 개설	시설비	382,991,000	280,191,950	280,191,950	102,799,050	보상협의 완료 후 2021년 공사 발주를 위한 공사비 이월
건설과	도로	가창 정대리(600번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,044,400,000	625,373,740	431,699,740	612,700,260	절대공기 부족(공사기간 미도래로 인한 공사비 이월)
건설과	도로	가창 냉천리(830번지선) 도시계획도로 개설	시설비	500,000,000	206,086,700	206,086,700	293,913,300	보상 협의 진행중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	가창 대일리(점촌마을) 도시계획도로 개설	시설비	700,000,000	529,867,770	529,867,770	170,132,230	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	시설비	963,268,000	584,283,470	584,283,470	378,984,530	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 기곡2리 기곡1길 도시계획도로 개설	시설비	771,771,000	530,980,110	168,576,110	432,789,390	절대공기부족에 따른 이월 - 공사기간 미도래(2020. 4. ~ 2021. 2.)
건설과	도로	하빈 기곡2리 기곡1길 도시계획도로 개설	시설부대비	3,780,000	1,360,000	1,360,000	2,420,000	절대공기부족에 따른 이월 - 공사기간 미도래(2020. 4. ~ 2021. 2.)
건설과	도로	가창 대일리(73번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,100,000,000	938,728,700	938,728,700	161,271,300	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 현내2리 우체국 앞 도시계획도로 개설	시설비	257,381,000	72,427,740	72,427,740	50,000,000	사업구간 내 지장물이 민사소송 진행으로 보상협의 지연
건설과	도로	하빈 봉촌1리(양지마)도시계획도로 개설	시설비	472,838,040	457,101,670	409,551,160	50,000,000	절대공기부족에 따른 이월 - 공사기간 미도래(2020. 9. ~ 2021. 1.)
건설과	도로	하빈 군도7호선(감문~대평) 도로확장	시설비	410,000,300	357,153,000	136,914,000	100,000,000	절대공기부족에 따른 이월 (교통안전진단, 환경영향평가)
건설과	도로	하빈 감문1리 하빈로52길 도시계획도로 개설	시설비	600,000,000	372,236,760	372,236,760	227,763,240	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 기곡1리(터실) 도시계획도로 개설	시설비	500,000,000	168,149,500	168,149,500	331,850,500	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 감문2리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	시설비	1,200,000,000	863,703,510	863,703,510	336,296,490	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 현내3리(911번지선) 도시계획도로 개설	시설비	440,000,000	300,671,600	300,671,600	139,328,400	토지수용 신청에 의한 공탁예상금 이월
건설과	도로	하빈 무등1리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	시설비	700,000,000	532,492,750	532,492,750	167,507,250	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 현내2리(하빈로86길) 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	1,150,000,000	718,651,160	718,651,160	431,348,840	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 무등1리(445-1번지선) 도시계획도로 개설	시설비	70,000,000	40,536,600	20,796,600	49,203,400	도시계획변경 용역 진행으로 인한 절대공기부족

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	현풍 원교리 89번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	1,735,880,300	945,912,900	945,912,900	789,959,590	보상비 이월
건설과	도로	하빈 동곡2리(179-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	30,000,000	22,981,800	5,607,800	24,392,200	용역기간 미도래(2020.11.~2021.3.)
건설과	도로	현풍 원교1리 신동아빌라옆 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	480,429,260	203,908,150	190,774,150	265,521,110	보상비 이월
건설과	도로	현풍 상1리 현풍향교 주변 도시계획도로 개설	시설비	621,554,900	606,104,900	606,104,900	15,450,000	보상비 이월
건설과	도로	현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	시설비	100,000,000	33,397,100	33,397,100	60,000,000	보상비 이월
건설과	도로	현풍 상2리(현풍초교옆) 도시계획도로 개설	시설비	440,781,860	382,089,540	277,806,610	162,975,250	보상비 이월
건설과	도로	현풍 원교1리 도시계획도로 개설	시설비	317,315,960	210,525,450	87,063,190	120,000,000	공사기간 미도래 - 2020.8.14~2021.2.9.
건설과	도로	현풍 부1리(우성하이츠옆)도시계획도로 개설	시설비	666,616,000	507,958,710	412,837,910	253,778,090	공사기간 미도래 - 2020.8.12.~2021.2.7.
건설과	도로	현풍 부1리(우성하이츠옆)도시계획도로 개설	시설부대비	3,384,000	860,000	860,000	2,524,000	공가기간 미도래 - 2020.8.12.~2021.02.07
건설과	도로	현풍 대1리 도시계획도로 개설	시설비	543,171,130	460,840,360	460,840,360	80,000,000	공사기간 미도래 - 2019.11.27.~2021.1.15.
건설과	도로	현풍면 원교2리(KT&G옆) 도시계획도로 개설	시설비	268,056,000	130,672,440	30,000,000	238,056,000	공사기간 미도래 - 2020.12.23.~2021.6.20.
건설과	도로	현풍면 원교2리(KT&G옆) 도시계획도로 개설	시설부대비	1,944,000			1,944,000	공사기간 미도래 - 2020.12.23.~2021.6.20.
건설과	도로	현풍 대1리 955번지선외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	583,373,740	362,376,390	362,376,390	10,000,000	보상비 이월
건설과	도로	현풍 상1리 마을회관옆 도시계획도로 개설	시설비	527,571,010	436,480,530	436,480,530	40,000,000	보상비 이월
건설과	도로	현풍 성하3리 도시계획도로 개설	시설비	324,063,410	108,001,500	108,001,500	190,000,000	보상비 이월
건설과	도로	현풍 지2리 도시계획도로 개설	시설비	130,000,000	90,036,770	90,036,770	39,963,230	보상비 이월
건설과	도로	구지 수리리 665~567번지간 도시계획도로개설	시설비	406,002,300	218,585,520	218,585,520	100,000,000	잔여 보상비 이월 - 보상률 93%
건설과	도로	구지 창리 구지중학교옆 도시계획도로 개설	시설비	403,303,300	236,724,980	109,136,080	287,999,220	공사기간 미도래 - 2020.10.13. ~ :2021.04.10.
건설과	도로	구지 가천리 마을회관앞 도시계획도로 개설	시설비	827,967,510	454,635,600	363,372,600	350,000,000	공사기간 미도래 - 2019.11. ~ 2020.12.(중지중) - 오수관로 공사 중지로 인한 공사지연

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	구지 창리(665번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,122,634,560	735,310,300	473,510,320	649,124,240	공사기간 미도래 - 2020.08.20. ~ 2021.06.15.
건설과	도로	구지 창리(472-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	900,786,640	545,257,390	486,488,390	317,696,000	공사기간 미도래 - 2019.11.18. ~ 2020.08.22.(중지중) - 전주이설공사 지연 등
건설과	도로	구지 창리(472-2번지선) 도시계획도로 개설	시설부대비	2,304,000			2,304,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	구지 창리 399-3번지선 도시계획도로 개설	시설비	309,605,220	251,590,000	251,590,000	58,015,220	잔여 보상비 이월 - 보상률 98%
건설과	도로	구지 창리 555번지선 도시계획도로 개설	시설비	291,574,810	204,216,090	163,023,090	128,551,720	공사기간 미도래 - 2020.07.20. ~ 2021.03.16.
건설과	도로	구지 창리 555번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	2,016,000	860,000	860,000	1,156,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	도시관리계획 신설 및 변경	시설비	599,068,000	559,428,100	343,577,100	255,490,900	과업기간 미도래에 따른 절대공기 부족
건설과	도로	구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,772,809,100	1,548,919,930	1,548,919,930	223,889,170	잔여 보상비 이월 - 보상률 75%
건설과	도로	구지 창리 213번지선 도시계획도로 개설	시설비	171,341,690	104,264,620	104,264,620	67,077,070	잔여 보상비 이월 - 보상률 98%
건설과	도로	구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,000,827,600	833,413,320	833,413,320	163,601,680	잔여 보상비 이월 - 보상률 47%
건설과	도로	도로건설 관리계획 수립	시설비	250,000,000	190,894,000	130,000,000	120,000,000	과업기간 미도래에 따른 절대공기 부족
건설과	도로	시특법 시설물 정기점검	시설비	163,265,000	53,461,000	33,751,000	30,000,000	정밀안전점검시기 미도래
건설과	도로	화원 설화리 910-4번지선 도로정비	시설비	170,000,000	7,305,100	7,305,100	150,000,000	2회추경 예산으로 분할 감정평가 등 보상협의기간 부족
건설과	도로	다사 세천리 887번지선 외 2개소 마을안길정비	시설비	200,000,000	15,233,400	15,233,400	184,766,600	보상 협의 지연(감정평가 진행중)
건설과	도로	논공 금포리 863-1번지 일원 도로정비	시설비	50,000,000	20,208,400	1,335,400	30,000,000	2회추경 예산으로 준공기한 미도래 - 사업기간 : 2020.10.~2021.12.
건설과	도로	비슬산 휴양림도로 확포장	시설비	4,226,654,540	3,352,792,590	2,188,241,190	2,038,413,350	공사기간 미도래 - 2020.04.16. ~ 2023.04.15.
건설과	도로	비슬산 휴양림도로 확포장	감리비	600,000,000	590,000,000	418,807,550	181,192,450	용역기간 미도래 - 2020.05.18. ~ 2023.06.02.
건설과	도로	다사농협 앞 도로정비	시설비	600,000,000	210,702,800	210,702,800	389,297,200	2회추경 예산으로 보상통보(11월) 등 사전 및 행정절차 진행 중
건설과	도로	유가 초곡리 도로확포장	시설비	2,464,489,600	2,006,735,270	1,553,047,470	911,442,130	공사기간 미도래 - 2020.08.14. ~ 2021.08.08.

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	유가 초곡리 도로확포장	시설부대비	5,868,000	5,151,000	5,151,000	717,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	유가 가태2리(예연서원) 진입도로 확포장	시설비	50,000,000	35,397,600	35,397,600	14,602,400	보상 협의 지연
건설과	도로	유가 양1리 마을안길정비	시설비	550,000,000	428,344,330	428,344,330	121,655,670	보상 협의 지연(2회추경 예산으로 보상 완료 후 사업 발주)
건설과	도로	유가 쌍계1리 노후교량 정비	시설비	30,000,000	9,180,000		30,000,000	소하천 기본계획 수립 후 용역 진행 예정으로 해당 사업 용역 이월
건설과	도로	유가 유곡2리(969-1번지선) 마을안길 개설공사	시설비	100,000,000			100,000,000	노선 선형 협의 지연
건설과	도로	유가 유곡~도의리 도로 확포장(구, 유가초등학교)	시설비	450,000,000	60,842,800	60,842,800	389,157,200	2회추경 예산으로 보상통보(11월) 등 사전 및 행정절차 진행 중
건설과	도로	유가 유곡1리(짐실) 마을안길 확포장	시설비	450,000,000	46,865,500	46,865,500	400,000,000	2회추경 예산으로 보상통보(11월) 등 사전 및 행정절차 진행 중
건설과	도로	유가 쌍계리 휴양림길 외 1개소 인도 설치	시설비	550,000,000	273,525,000	273,525,000	276,475,000	보상 협의 지연(2회추경 예산으로 보상 완료 후 사업 발주)
건설과	도로	옥포 신당리 1150-2번지선 도로정비공사	시설비	330,000,000	192,832,100	192,832,100	137,167,900	보상 협의 지연(2회추경 예산으로 보상 완료 후 사업 발주)
건설과	도로	현풍 지리 681번지선 도로정비	시설비	200,000,000	25,474,490	25,474,490	174,525,510	보상 협의 지연
건설과	도로	현풍 대리 645번지선 외 2개소 도로정비	시설비	391,282,170	290,019,140	290,019,140	101,263,000	보상 협의 지연
건설과	도로	현풍 국도5호선~원오교간 도로확장	시설비	500,000,000	74,482,000	9,240,000	434,758,000	도시관리계획(도로) 변경 결정 입안 절차 추진 중
건설과	도로	가창 군도15호선(우록리 1407-24번지선) 도로확장	시설비	289,446,700	237,954,660	237,954,660	51,492,040	공사준공기한 미도래에 따른 공사비 이월 - 2021년 공사비를 추가 반영하여 사업진행예정
건설과	도로	현풍 대리 848번지선 외 3개소 도로정비	시설비	500,000,000	304,132,050	304,132,050	195,867,950	보상 협의 지연(2회추경 예산으로 보상 완료 후 사업 발주)
건설과	도로	가창 동서 연결도로 개설	시설비	340,281,000	54,677,000		200,000,000	개발제한구역 관리계획변경협의 지연에 따른 용역추진 지연(국토교통부)
건설과	도로	가창 최정산 도로공사	시설비	8,580,298,600	6,856,022,840	6,203,842,160	2,000,000,000	공사준공기한 미도래에 따른 이월 - 2019.02.21. ~ 2021.02.19.
건설과	도로	가창 단산리 755-1번지선 외 1개소 마을안길 정비	시설비	50,000,000	34,492,300	34,492,300	15,507,700	실시설계용역 완료 후 보상비 부족으로 2021년 본예산 확보 후 보상통보예정
건설과	도로	하빈 대평리 191번지선 외 2개소 마을안길 정비	시설비	50,000,000	11,810,400	11,810,400	38,189,600	실시설계 완료 후 보상협의 관련 사전 및 행정절차 진행 중
건설과	도로	하빈 동곡2리 국도 접속도로 가각부 정비	시설비	30,000,000	5,814,000	5,814,000	24,186,000	실시설계용역 완료 후 보상비 부족으로 2021년 본예산 확보후 보상통보예정

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	하빈 동곡2리(마을회관 뒤편) 1142번지선 마을안길 정비	시설비	350,000,000	222,197,600	222,197,600	127,802,400	보상 협의 지연
건설과	도로	구지 내리 374-1번지선 외 1개소 마을안길 확포장	시설비	50,000,000	48,416,400	48,416,400	1,583,600	실시설계용역 완료 후 보상비 부족으로 2021년 본예산 확보후 보상통보예정
건설과	도로	구지 화산리 439번지 일원 도로확장	시설비	182,014,900	69,724,870	69,724,870	112,290,030	보상 협의 지연(2회추경 예산으로 보상 완료 후 사업 발주)
건설과	도로	논공 금포리 917-2번지선(대진섬유옆) 도로확장	시설비	400,000,000	341,995,030	341,995,030	58,004,970	보상 협의 지연
건설과	도로	군도 3호선(기세리 인근) 위험도로 개선사업	시설비	300,000,000			300,000,000	용역기간 미도래 - 2020년 12월 착수예정
안전방재과	재난방재□민방위	재난안전관리	연구용역비	1,900,000,000	1,451,600,000	1,161,280,000	738,720,000	용역완료예정기간 미도래 (용역기간: 2020.03.19~2022.03.08.)
안전방재과	재난방재□민방위	폭염대응 시설 설치사업	시설비	1,208,000,000	204,319,000	189,019,000	1,014,440,000	설계변경에 따른 공사 발주 지연
안전방재과	재난방재□민방위	재해위험지역정비(다사 서재2 자연재해위험 개선지구 정비)	시설비	5,923,104,150	5,779,016,310	5,779,016,310	100,000,000	설계변경 등으로 공사기간 변경됨에 따른 집행시기 지연
안전방재과	수자원	지방하천정비(현풍천 재해예방사업)(전환)	시설비	2,531,588,000	1,757,611,470	1,572,419,180	959,168,820	공사 준공기한 미도래 - 2020. 1. ~ 2024. 3.
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환)	시설비	14,378,159,300	13,162,706,380	12,159,182,380	2,218,976,920	공사 준공기한 미도래 - 2020. 1. ~ 2024. 1. 편입토지·지장물 보상협의 지연
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환)	감리비	600,000,000	600,000,000	431,400,000	168,600,000	공사 준공기한 미도래 - 2020. 1. ~ 2024. 1. 편입토지·지장물 보상협의 지연
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환)	시설부대비	20,235,000	7,933,700	7,933,700	12,301,300	공사 준공기한 미도래 - 2020. 1. ~ 2024. 1. 편입토지·지장물 보상협의 지연
안전방재과	수자원	소하천정비(생활)-다사 문양리 문양소하천 정비공사(전환)	시설비	2,321,947,000	1,226,165,640	310,629,000	1,450,000,000	공사 준공기한 미도래 - 2020.10.21. ~ 2021.10.15.
안전방재과	수자원	소하천정비(생활)-다사 문양리 문양소하천 정비공사(전환)	시설부대비	9,828,000	3,718,800	3,718,800	4,000,000	공사 준공기한 미도래 - 2020.10.21. ~ 2021.10.15.
안전방재과	수자원	가창 정대리 471번지선 윙계소하천 정비공사(전환)	시설비	148,920,000	85,457,290	8,505,500	140,414,500	1회추경 예산으로, 실시설계 완료 후 공사기간 부족 및 준공기한 미도래 - 준공 예정일 : 2021.3.
안전방재과	수자원	가창 정대리 471번지선 윙계소하천 정비공사(전환)	시설부대비	1,080,000			1,080,000	1회추경 예산으로, 실시설계 완료 후 공사기간 부족 및 준공기한 미도래 - 준공 예정일 : 2021.3.
안전방재과	수자원	구지 화산리 202번지선 창리소하천 정비공사(전환)	시설비	446,760,000	90,860,600	90,860,600	355,899,400	1회추경 예산으로, 실시설계 완료 후 공사기간 부족 및 준공기한 미도래 - 준공 예정일 : 2021.12.
안전방재과	수자원	구지 화산리 202번지선 창리소하천 정비공사(전환)	시설부대비	3,240,000	886,050	886,050	2,353,950	1회추경 예산으로, 실시설계 완료 후 공사기간 부족 및 준공기한 미도래 - 준공 예정일 : 2021.12.
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(가창 옥분리 산31번지 일원 농로포장공사)	시설비	293,986,500	233,272,330	151,344,330	142,629,070	○보상협의 지연 및 준공기한 미도래 - 2021년 2월 준공예정

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(다사 문산리 452번지 일원 농로확포장공사)	시설비	554,748,500	476,764,700	476,764,700	77,983,800	○보상협의 지연 -편입토지 및 지장물 보상지연(보상률80%) ○국비교부 지연 : 2020.6.1.
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(하빈 현내리 798-1번지 일원 외 1개소 농로정비공사)	시설비	160,000,000	93,097,730	93,097,730	66,902,270	○보상협의 지연 -편입토지 및 지장물 보상지연(보상률70%) ○국비교부 지연 : 2020.6.1
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(하빈 대평리 899번지 일원 농로 개설공사)	시설비	100,000,000	58,429,200	58,429,200	41,570,800	○보상협의 지연 -편입토지 및 지장물 보상지연(보상률70%) ○국비교부 지연 : 2020.6.1.
도시과	지역및도시	도시관리계획 운영	연구용역비	1,077,181,000	218,800,000	191,359,000	840,236,000	○ 용금공단 지구단위계획 수립 용역 : 용역기한 미도래(용역기간 : 2020.05.11. ~ 2021.05.10.) ○ 다사읍 서재리 도시개발 구역지정 및 개발계획 수립용역 : 용역 이행에 기간 소요(용역기간 : 2020.12. ~ 2021.6.) ○ 달성군 도시관리계획(정비) 용역 : 용역 이행에 1년 이상 기간 소요(용역기간 : 2020.12. ~ 2022.6.)
도시과	지역및도시	도시재생업무 운영	연구용역비	316,993,000	184,589,000	94,389,000	100,000,000	용역기간 미도래('20. 11. ~ '21. 11.)
도시과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업(1,000년의 화원, 다시 꽃피다)	시설비	2,712,500,000	2,703,442,540	2,672,075,540	40,424,460	건축기획 용역(2건/40백만원) 완료시기 미도래
도시과	지역및도시	달성 관문 간판개선사업	시설비	616,500,000	88,000,000	70,400,000	546,100,000	간판디자인 및 실시설계 용역 중으로, 코로나19로 인한 주민 동의서 징구 등 용역수행의 제약 및 사전 행정절차(경관 심의) 이행에 기간 소요
도시과	지역및도시	달성 관문 간판개선사업	시설부대비	3,500,000			3,500,000	간판디자인 및 실시설계 용역 중으로, 코로나19로 인한 주민 동의서 징구 등 용역수행의 제약 및 사전 행정절차(경관 심의) 이행에 기간 소요
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	사무관리비	6,000,000			6,000,000	하빈PMZ평화기념마을 조성사업 준공 이후 사무관리비 집행 예정
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	연구용역비	75,557,000	68,234,800	49,875,000	25,682,000	우리마을 매력찾기 프로젝트Ⅳ 시행 (21. 07월 완료 후 집행예정)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	민간위탁금	60,000,000			60,000,000	하빈PMZ평화기념마을 조성사업 준공 이후 주민역량강화교육,축제 등 집행 예정
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	시설비	2,743,875,930	2,556,843,770	1,967,308,420	56,000,000	하빈PMZ 평화기념마을 조성사업 공사 강수일수 증가로 인한 공기연장 (21.01월 준공예정) 마을활성화를 위한 상징조형물 제작·설치 (20.12월 착수, 21.06월 완료예정) 낙동강변둑길 야간경관조명 제작설치 공사 (20.12월 착공, 21.04월 준공예정)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	사무관리비	5,000,000	1,535,980	1,535,980	3,464,020	종합공사(마을회관 리모델링 등) 준공 후 집행예정(2021.1월)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	연구용역비	112,157,000	18,000,000		100,000,000	- 주민교육용역 : 진행중(2021.4월 완료예정) - 체험프로그램 운영 및 기획용역 : 선비문화체험관 준공시기 고려하여 발주 예정(2021.2월 발주예정)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	시설비	4,764,219,140	2,892,559,910	1,767,626,810	1,901,748,070	- 종합공사 : 준공기한 미도래(2021.2월 준공예정) - 선비문화체험관 건립 : 준공기한 미도래(2021.8월 준공예정) - 기세리 주민쉼터 조성 : 실시설계 용역중(2021.1월 완료예정)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	감리비	50,000,000	26,432,000		50,000,000	선비문화체험관 건립 준공기한 미도래(2021.8월 준공예정)
도시과	지역및도시	동곡 칼국수거리 경관개선사업	시설비	300,000,000	206,842,230	39,135,000	260,865,000	주민동의 지연으로 공사발주 지연, 11월 착공 2021년 1월 준공예정
도시과	지역및도시	구라리 지하차도 진입로 주변 경관개선사업	시설비	170,000,000			170,000,000	2020년 진입관문 및 도시구조물 경관개선사업으로 선정으로 사업추진 중 시비 재배정이 지연되어 사업중단. 2021년 시비 재배정 후, 공사추진예정
도시정비과	수자원	달성1차산단 내 노후 우수관거 정비사업	시설비	496,400,000	371,916,430	320,589,430	85,000,000	행정절차(일상감사 및 계약심사 등) 이행에 따른 기간 소요

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시정비과	수자원	현풍천 주변 하수관거 정비사업	시설비	794,960,000	683,773,060	581,695,060	120,000,000	"행정절차(일상감사 및 계약심사 등) 이행에 따른 기간 소요 하천내 공사로써 금년 이상기후로 장마기간이 길어져 공사 지연"
도시정비과	수자원	화원읍 성산리 492-3번지 일원 오수관거 설치사업	시설비	731,377,000	266,588,820	257,403,820	473,973,180	행정절차(일상감사 및 계약심사 등) 이행에 따른 기간 소요
도시정비과	수자원	논공읍 하리 871번지 일원 우수관로 설치공사	시설비	380,000,000	242,186,620	127,310,630	252,689,370	토지무상이용 협의에 따른 기간 소요
도시정비과	농업□농촌	화원 성산리(산37번지선) 농로정비공사	시설비	100,000,000	2,869,900	2,869,900	85,755,000	지적 불부합으로 인하여 분할측량 지연됨
도시정비과	농업□농촌	화원 본리리(산225번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	18,800,000		150,000,000	농번기로 인하여 착공지연
도시정비과	농업□농촌	화원 본리리(633번지선) 농로확포장공사	시설비	100,000,000	61,390,870	19,800,000	80,200,000	농번기로 인하여 착공지연
도시정비과	농업□농촌	화원 설화리(484-1번지선) 농로 및 용수로정비공사	시설비	297,840,000	169,215,000	79,123,900	218,716,100	배수계획 수정요구 민원으로 인한 공사 추진 지연
도시정비과	농업□농촌	논공 노이리(604번지선) 농로확장공사	시설비	207,740,000	157,268,240	119,128,610	88,611,390	공사 준공기한 미도래 - 20. 6월 : 보상완료 - 20. 10. 26 : 공사착공 - 21. 1. 23 : 공사준공(예정)
도시정비과	농업□농촌	화원 설화리(97-2번지선) 농로개설공사	시설비	198,560,000	80,988,260	49,553,560	149,006,440	농번기로 인하여 착공지연
도시정비과	농업□농촌	논공 위천리(409-1번지선) 농로정비공사	시설비	268,327,000	56,889,440	56,889,440	211,437,560	사업 계획 변경으로 인한 분할측량 지연
도시정비과	농업□농촌	논공 하동지 보수공사	시설비	297,840,000	12,394,000	12,394,000	285,446,000	저수지내 낚시터 관리인과 협의 지연
도시정비과	농업□농촌	유가 한정2리(75-5번지선) 배수로정비공사	시설비	83,663,000	78,111,300	78,111,300	5,551,700	보상협의 지연(14필지중 3필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 김흥2리(533번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000			80,000,000	보상협의 지연(11필지중 2필 미협의) 미협의 토지 제외 공사발주 예정
도시정비과	농업□농촌	옥포 김흥리(1067번지선) 농로개설공사	시설비	200,000,000	125,356,030	125,356,030	74,643,970	보상협의 지연(7필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 반송1리(133번지선) 농로개설공사	시설비	200,000,000	26,098,200	26,098,200	173,901,800	노선 선정 관련 민원으로 인한 보상통보 지연 (11월 감정평가 완료후 보상통보)
도시정비과	농업□농촌	옥포 반송2리(733-1번지선) 농로개설공사	시설비	550,000,000	505,884,530	505,884,530	44,115,470	2회추경 보상비 추가 확보 및 통보 (12필지중 9필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 신당리(1319번지선) 농로개설공사	시설비	51,341,000	26,174,280	26,174,280	25,166,720	보상협의 지연(11필지중 6필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	현풍 지1리(1136번지선) 농로확포장공사	시설비	150,000,000	125,792,570	125,792,570	20,445,000	수로 추가설치 관련 민원으로 공사중지 (11월 중지해제) 민원 사항 반영 및 설계변경 후 공사재개
도시정비과	농업□농촌	현풍 자모리(527번지선) 농로확포장공사	시설비	150,000,000	98,062,100	98,062,100	51,937,900	노선 선정 관련 민원으로 인한 보상통보 지연 (8필지중 8필 미협의)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시정비과	농업□농촌	가창 단산리(97번지선) 농로확장공사	시설비	150,000,000	17,245,100	17,245,100	132,754,900	보상협의 지연(7필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 단산리(281번지선) 농로확포장공사	시설비	88,750,000	62,999,430	62,999,430	25,750,570	보상협의 지연(11필지중 5필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 옥분리(386번지선) 농로개설공사	시설비	87,238,000	74,595,680	74,595,680	12,642,320	보상협의 지연(6필지중 1필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 주리(585번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	101,906,800	101,906,800	48,093,200	보상협의 지연(18필지중 9필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 하산2리(44-3번지선 외 1개소) 농로정비공사	시설비	200,000,000	136,533,510	136,533,510	63,466,490	보상협의 지연(16필지중 8필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 기곡2리(산116번지선) 농로정비공사	시설비	100,000,000	44,863,900	44,863,900	55,136,100	노선 선정 관련 민원으로 인한 보상통보 지연 (11월 감정평가 완료후 보상통보)
도시정비과	농업□농촌	구지 오설리(456-3번지선) 용배수로정비공사	시설비	150,000,000	7,929,000	7,929,000	142,071,000	관련기관(부산지방국토관리청) 협의 지연
도시정비과	농업□농촌	농업생산기반정비사업	시설비	2,520,290,770	2,353,936,590	2,164,106,290	356,184,480	준공 : 13건, 공사중 : 5건 공사기간 미도래
도시정비과	농업□농촌	논공 노이리(943번지선) 농로확장공사	시설비	80,000,000	20,649,000	20,649,000	59,351,000	보상협의 지연
도시정비과	농업□농촌	유가 도의리(1081번지선) 용수로정비공사	시설비	450,000,000	227,488,400	72,435,400	377,564,600	1회 추경사업으로 절대공기 부족 - 20. 7. 8 : 실시설계용역 완료 - 20. 11. 3 : 공사착공 - 21. 5. 1 : 공사준공(예정)
도시정비과	농업□농촌	구지 목단리(331번지선) 농로개설공사	시설비	200,000,000	66,278,450	66,278,450	97,747,000	보상협의 지연(14필지중 14필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	논공 노이리(노홍지~싱이골) 간이양수장 및 용수관로설치공사	시설비	297,840,000	229,896,960	182,288,000	115,552,000	노홍저수지 수위가 낮아지지 않아 양수장 설치가 어려워 공법을 변경하고자 함 사업계획 변경으로 인한 절대공기 부족
도시정비과	농업□농촌	도시생활환경개선(가창, 현풍 농촌생활환경정비)(전환)	시설비	1,000,000,000	808,295,240	672,734,240	327,265,760	영농기(우수기) 중지로 인하여 절대공기 부족
정책사업과	일반행정	(가칭)송해선생 코미디박물관 건립	사무관리비	5,000,000			5,000,000	연계사업(선비문화체험관 건립) 지연에 따른 사업이행 지연 및 사업자와 협의하여 영상구입 예정
정책사업과	일반행정	(가칭)송해선생 코미디박물관 건립	시설비	338,200,000	272,727,000	202,727,000	135,473,000	연계사업(선비문화체험관 건립) 지연에 따른 사업이행 지연
정책사업과	문화및관광일반	참꽃케이블카 설치	시설비	2,556,600,000	1,076,863,390	622,569,390	1,921,143,000	- 용역기간 미도래(2020.4.20.~2021.2.13.) - 감사원 사전컨설팅 결과 반영에 따른 사업추진 절차 변경(환경영향평가 이후 외자구매 추진)
문화체육과	체육	가창 파크골프장 조성	시설비	1,164,308,000	126,443,600	126,443,600	1,020,396,000	관련부서 협의 등 행정절차 이행중
문화체육과	체육	화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성	시설부대비	3,000,000			3,000,000	소규모환경영향평가 등 용역 수행중
문화체육과	체육	달성 테크노 스포츠 센터 건립	시설비	2,400,000,000	62,854,200	62,854,200	1,637,145,000	공공건축 사전검토 등 행정절차 이행 기간 소요

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
문화체육과	체육	화원명곡체육공원 내 유소년축구장 조성	시설비	1,000,000,000	103,831,100	86,371,100	913,628,000	토지보상 등 절차 이행중
문화체육과	체육	화원테니스장 야간조명 정비공사	시설비	450,000,000	10,980,000	10,980,000	439,020,000	일상감사 등 행정절차 이행중
문화체육과	체육	다사체육공원 생활체육센터 건립	시설비	2,500,000,000	32,297,050	32,297,050	2,467,702,000	공공건축 사전검토 등 행정절차 이행 기간 소요
문화체육과	체육	달성군민운동장 리모델링 사업	시설비	100,000,000	55,235,000		100,000,000	용역기산 미도래
관광과	관광	관광객 유치 사업	사무관리비	214,748,000	158,257,700	158,257,700	41,800,000	코로나 19로 인한 사업지연
관광과	관광	화원유원지 관광지 조성	시설비	1,700,000,000	1,064,521,500	568,791,500	1,131,208,000	보상협의 지연
관광과	관광	육신사 공영주차장 조성	시설비	100,000,000	81,394,230	8,324,090	91,675,910	공사기간 미도래 2021. 2. 17. 준공예정
관광과	문화재	문화재 재난방지시설 구축	시설비	52,000,000	6,551,000	6,551,000	45,449,000	문화재청 설계승인 지연
관광과	문화재	세계유산(도동서원) 명품둘레길 조성	시설비	257,143,000			257,143,000	문화재청 기본설계(안) 시달 지연
관광과	문화재	세계유산 보존관리 사업	시설비	170,000,000	19,587,000	19,587,000	150,413,000	문화재청 설계승인 지연
보건과	보건의료	국가예방접종실시	의료및구료비	5,396,809,000	5,157,801,720	5,157,801,720	31,538,310	20년 하반기 신규 1차 접종자들의 2차접종 비용(21년 상반기 집행)지원을 위해 예산 이월 승인(질병관리청 소관 국고보조금 관리규정) - 예산이월공문 통지(2020.11.06)
보건과	보건의료	의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	의료및구료비	169,140,000	14,229,520	14,229,520	154,910,480	한시적 임시지원사업으로, 11월 국고 보조금 교부 및 사업기간 종료일 미도래 - 확정내시통지공문 2020.11.01. - 사업기간 : 2020.11.05.~2021.04.30.
보건과	보건의료	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비	136,412,000			136,412,000	실시설계 지연에 따른 공사비이월 - 국토부에서 한국토지주택공사를 지원기관으로 지정, 설계용역업무 위탁 중으로 12월 3일 완료예정 - 공사 입찰 등의 절차 및 공사기간(2020.12.~ 2021.2.) 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
합 계(1건)				820,000,000	551,120,970	494,096,970	57,024,000
안전방재과	수자원	하천유지관리	시설비	820,000,000	551,120,970	494,096,970	57,024,000	준공기한 미도래, 환경영향평가 및 하천점용허가 협의 지연