과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
합 계(158건)				100,143,660,577	67,449,462,568	56,833,204,138	24,110,818,670
회계과	일반행정	달성군 여성문화복지센터 증축	시설비	370,000,000	283,166,960	142,806,350	227,193,650	설계완료기간 미도래(착수일 : 2020. 09. 29, 완료예정일 : 2021. 03. 27.)
일자리경제과	산업□중소기업일반	전통시장 시설현대화사업(전환)	시설비	1,157,000,000	1,067,241,730	832,002,560	235,239,170	공사기간 미도래
일자리경제과	산업□중소기업일반	전통시장 시설현대화사업(전환)	감리비	23,000,000	14,320,000		14,320,000	용역기간 미도래
농업정책과	농업□농촌	계란 냉장차량 지원	민간자본사업보조(이전재원)	15,000,000	15,000,000		15,000,000	차량 출고 지연으로 사업 미완
청소위생과	폐기물	지역 청소관리	연구용역비	64,800,000	64,245,000	44,770,000	19,475,000	사전 및 행정정차 이행 지연
공원녹지과	지역및도시	도시공원, 유원지 관리	시설비	490,000,000	484,653,430	472,962,430	11,691,000	공사기간 미도래(20.12.~21.1.)
공원녹지과	지역및도시	군립공원, 도시자연공원구역 관리	시설비	995,424,407	791,657,930	648,294,930	143,363,000	"공사 준공기한 미도래 - 2020. 9.~2021. 1."
공원녹지과	지역및도시	상리어린이공원 조성	시설비	1,413,440,500	660,286,820	558,093,820	234,248,200	공사기간(2020. 12. 21. ~ 2021. 3. 30.) 미도래에 따른 공사비(관급자재 포함) 이월
공원녹지과	지역및도시	강림어린이공원 조성	시설비	761,962,900	16,067,200	16,067,200	745,895,700	손실보상 협의기간(2020. 9. ~ 2021. 2.) 미도래
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병 방제(자체)	시설비	496,400,000	496,400,000	414,029,000	82,371,000	소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목 제거는 당해연도 11월부터 이듬해 3월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	산림욕장 보완	시설비	198,570,000	193,251,530	178,219,530	15,032,000	2021년 옥연지 산림욕장 보완공사를 위한 실시설계 용역 기간 미도래
공원녹지과	임업□산촌	산불방지 헬기임차	사무관리비	765,149,920	761,306,220	652,806,220	108,500,000	12월31일 임차완료, 완료검사 후 1월 중순 집행 가능
희망지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	자산및물품취득비	2,300,000	1,400,000	1,400,000	900,000	조달구입 물품 납품 지연
희망지원과	취약계층지원	아동양육 한시 지원 사업	사회보장적수혜금	8,295,200,000	8,295,200,000	8,018,492,780	276,707,220	포인트사용기간 연장(당초20.12.31>변경21.3.31)
건설과	도로	화원 설화리(628번지선)도시계획도로 개설	시설비	100,000,000			100,000,000	보상비저렴으로 인한 행정소송진행 중으로 보상 지연
건설과	도로	화원 본리리(인흥마을) 도시계획도로 개설	시설비	961,618,000	592,616,670	550,934,670	410,683,330	절대공기부족(2021.2.28.준공예정)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	화원 설화리(803-9번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	시설비	260,022,000	180,415,140	142,946,140	117,075,860	보상비저렴으로 인한 행정소송 진행 중으로 보상협의 지연
건설과	도로	화원 천내리 662-2번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	826,338,000	786,668,640	726,706,120	99,631,880	절대공기부족
건설과	도로	화원 성산1리(광법사)도시계획도로 개설	시설비	258,560,000	114,818,660	114,818,660	123,741,340	절대공기부족 (2021.2.8. 준공예정)
건설과	도로	화원 성산1리(42번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	시설비	104,010,000	73,409,650	31,243,750	72,766,250	절대공기 부족 (2021.2.27. 준공예정)
건설과	도로	화원 성산리(206번지선) 도시계획도로 개설	시설비	37,313,000	27,635,500	27,635,500	9,677,500	보상협의 지연
건설과	도로	화원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설	시설비	26,859,000	23,894,000	23,894,000	2,965,000	보상협의 지연
건설과	도로	논공 삼리리(승호마을) 도시계획도로 개설	시설비	613,021,400	193,047,590	181,161,590	431,859,810	공사기간 미도래
건설과	도로	논공 금포1리 새터 도시계획도로 개설	시설비	348,920,000	144,456,610	144,456,610	148,920,000	공사기간 미도래
건설과	도로	논공 금포1리 새터 도시계획도로 개설	시설부대비	1,080,000			1,080,000	공사기간 미도래
건설과	도로	논공 남리 주공아파트뒤 도시계획도로 개설	시설비	238,827,800	173,328,160	173,328,160	65,499,640	잔여 보상비 이월
건설과	도로	논공 하2리 제실옆 도시계획도로 개설	시설비	1,145,022,340	813,701,040	812,406,040	210,000,000	공사기간 미도래 2019.12.24. ~ 2021.01.17.
건설과	도로	논공 하2리 제실옆 도시계획도로 개설	시설부대비	3,600,000			3,600,000	공사기간 미도래
건설과	도로	다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	시설비	1,780,417,000	1,105,570,610	1,105,570,610	74,846,390	주거이전비 지출예정
건설과	도로	다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	시설비	153,300,000	126,793,000	109,018,000	17,775,000	관련용역 중앙부처 협의 등 사전 절차 이행 지연
건설과	도로	다사 매곡리(다사성당앞) 도로확장	시설비	1,092,085,000	320,053,810	165,770,120	826,314,880	보상협의지연에 따른 수용재결로 인한 공사 중지
건설과	도로	다사 서재리 하늘소망교회 뒤편 도시계획도로 개설	시설비	1,009,827,000	647,412,640	140,997,140	79,441,500	절대공기부족(2021.6.30. 준공예정)
건설과	도로	다사 서재리 393번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	21,280,000	8,346,000	8,346,000	12,934,000	감정평가진행 중으로 사전 및 행정절차 이행 지연
건설과	도로	다사 서재리 서재초등학교 남편 외 2개소 도시계획도로 개설공사	시설비	24,392,000	12,762,000	12,762,000	11,630,000	감정평가진행 중으로 사전 및 행정절차 이행 지연
건설과	도로	옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	828,627,300	146,075,000	146,075,000	182,552,300	잔여 보상비 이월(보상률 81%)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	다사 세천리 276번지 외 2개소 도시계획도로 개설공사	시설비	33,228,000	18,949,000	18,949,000	14,279,000	감정평가진행 중으로 사전 및 행정절차 이행 지연
건설과	도로	옥포 강림1리 876번지선 도시계획도로 개설	시설비	168,452,650	82,967,090	82,967,090	35,485,560	잔여 보상비 이월(보상률 91%)
건설과	도로	옥포 김흥리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	시설비	542,311,420	77,408,950	77,408,950	200,000,000	잔여 보상비 이월(보상률 71%)
건설과	도로	옥포 본리1리 금성사앞 도시계획도로 개설	시설비	813,131,100	518,318,400	518,318,400	74,812,700	잔여 보상비 이월(보상률 67%)
건설과	도로	옥포 교항1리 1263번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	534,329,800	501,771,900	501,771,900	1,438,900	잔여 보상비 이월(보상률 66%)
건설과	도로	옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	23,200,500	4,400,000	4,400,000	18,800,500	잔여 보상비 이월(보상률 0%)
건설과	도로	옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	시설비	58,135,100	3,520,000	3,520,000	4,615,100	잔여 보상비 이월(보상률 0%)
건설과	도로	가창 삼산리(371번지선) 도시계획도로 개설	시설비	624,755,640	561,668,970	561,668,970	63,086,670	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	옥포 기세리 522번지선 도시계획도로 개설	시설비	25,571,600			25,571,600	잔여 보상비 이월(보상률 0%)
건설과	도로	옥포 김흥2리 마을주진입로 도시계획도로 개설	시설비	1,330,288,700	567,166,760	567,166,760	613,121,940	공사기간 미도래 2019.07.03. ~ 2021.05.25.
건설과	도로	가창 정대리(777번지선) 도시계획도로 개설	시설비	261,544,000	13,959,500	13,959,500	197,584,500	보상지연으로 인한 보상비 및 공사비 이월
건설과	도로	가창 삼산리(445번지선) 도시계획도로 개설	시설비	450,059,000	210,465,250	210,465,250	239,593,750	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	시설비	250,242,030	145,244,900	145,244,900	4,997,130	잔여 보상비 이월(보상률 67%)
건설과	도로	옥포 신당리 1168번지선 도시계획도로 개설	시설비	141,353,330	80,422,300	80,422,300	40,931,030	잔여 보상비 이월(보상률 99%)
건설과	도로	옥포 신당리 도시계획도로 개설	시설비	597,723,700	416,803,120	416,803,120	80,920,580	잔여 보상비 이월(보상률 91%)
건설과	도로	가창 용계2리 도시계획도로 개설	시설비	27,403,000	18,332,000	18,332,000	9,071,000	감정평가 예정
건설과	도로	옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	358,743,250			308,743,250	잔여 보상비 이월(보상률 80%)
건설과	도로	가창 단산리(376-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	452,496,420	364,991,820	285,325,820	48,403,280	절대공기 부족(2021.02.09. 준공예정)
건설과	도로	가창 오2리(235번지선) 도시계획도로 개설	시설비	709,250,000	318,992,340	318,992,340	190,257,660	보상협의 진행 중으로 인한 보상비 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	가창 행정리(511번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	시설비	597,573,000	159,437,500	159,437,500	428,219,500	보상협의 진행중으로 인한 보상비 이월
건설과	도로	하빈 동곡2리(동곡농협 뒷편)도시계획도로 개설	시설비	204,257,560	46,101,560	46,101,560	158,156,000	절대공기부족 (중지중)
건설과	도로	하빈 동곡2리(동곡농협 뒷편)도시계획도로 개설	시설부대비	2,010,000	992,200	992,200	1,017,800	절대공기 부족 (중지중)
건설과	도로	하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	시설비	102,551,060	27,809,370	27,809,370	10,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상금 이월 (재감정으로 보상액 재결정_건설과-21257)
건설과	도로	하빈 기곡2리 기곡1길 도시계획도로 개설	시설비	771,771,000	530,980,110	168,576,110	170,405,500	절대 공기 부족(2021.2.17. 준공예정)
건설과	도로	하빈 대평2리 모산(하빈로172길) 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	548,701,000	203,254,690	203,254,690	345,446,310	보상협의 지연으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	하빈 현내2리 우체국 앞 도시계획도로 개설	시설비	257,381,000	72,427,740	72,427,740	134,953,260	보상협의 지연으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	하빈 봉촌1리(양지마)도시계획도로 개설	시설비	472,838,040	457,101,670	409,551,160	13,286,880	절대 공기 부족(2021.1.31. 준공예정)
건설과	도로	하빈 대평1리(하빈로179길)도시계획도로 개설	시설비	393,675,440	6,338,600	6,338,600	50,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	하빈 무등1리(하빈로140길)도시계획도로 개설	시설비	94,802,200	2,003,100	2,003,100	50,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상금 이월
건설과	도로	하빈 동곡2리(동곡농협) 2차 도시계획도로 개설	시설비	451,017,750	222,806,590	222,806,590	228,211,160	절대공기 부족 (2020.05.03. 준공예정)
건설과	도로	옥포 기세리(소로3류-옥144호선) 도시계획도로 개설	시설비	375,740,700	192,870,530	192,870,530	182,870,170	공사 준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 신당리(옥포농협앞)도시계획도로 개설	시설비	371,431,000	153,222,500	153,222,500	218,208,500	잔여보상비 이월(보상률 64%)
건설과	도로	현풍 성하2리(마을진입로) 도시계획도로 개설	시설비	263,560,000	224,265,260	224,265,260	39,294,740	미청구 관급자재 지출
건설과	도로	옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	시설비	259,806,000	225,837,290	225,837,290	33,968,710	잔여 보상비 이월(보상률 67%)
건설과	도로	옥포 간경리 757번지선 도시계획도로 개설	시설비	762,774,500	230,581,400	230,581,400	532,193,100	잔여 보상비 이월(보상률 72%)
건설과	도로	옥포 본리리 801번지선 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	1,921,700	1,921,700	48,078,300	용역기간 미도래 2019.11.06 ~ 2020.02.03.
건설과	도로	현풍 원교2리 도시계획도로 개설	시설비	248,560,000	159,544,000	159,544,000	50,000,000	공사기간 미도래(2019. 3. ~ 2021. 1.)
건설과	도로	옥포 교항리 2071번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	15,029,300	15,029,300	34,970,700	용역기간 미도래 2019.11.13. ~ 2020.02.10.(용역중지중)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	현풍 대1리 955번지선외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	583,373,740	362,376,390	362,376,390	210,997,350	잔여 보상비 이월(보상률 : 80%)
건설과	도로	현풍 상1리 마을회관옆 도시계획도로 개설	시설비	527,571,010	436,480,530	436,480,530	51,090,480	잔여 보상비 이월(보상률 : 75%)
건설과	도로	현풍 성하3리 도시계획도로 개설	시설비	324,063,410	108,001,500	108,001,500	26,061,910	잔여 보상비 이월(보상률 : 85%)
건설과	도로	현풍 대리 이양서원 진입 도시계획도로 개설	시설비	300,000,000	59,264,190	59,264,190	240,735,810	잔여 보상비 이월(보상률 : 90%)
건설과	도로	현풍 지리 지동3길 도시계획도로 개설	시설비	198,241,200	103,814,700	103,814,700	94,426,500	잔여 보상비 이월(보상률 : 90%)
건설과	도로	현풍 부1리 245번지선 도시계획도로 개설	시설비	95,142,160	65,168,000	65,168,000	29,974,160	잔여 보상비 이월(공정률 :95%)
건설과	도로	현풍 성하2리 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000			200,000,000	잔여 보상비 이월(보상률 : 75%)
건설과	도로	구지 수리리 665~567번지간 도시계획도로개설	시설비	406,002,300	218,585,520	218,585,520	87,416,780	잔여 보상비 이월(보상률 93%)
건설과	도로	현풍 중1리 285-5번지선 도시계획도로 개설	시설비	32,290,770	15,529,500	15,529,500	16,761,270	잔여 보상비 이월(보상률 : 90%)
건설과	도로	구지 가천리 마을회관앞 도시계획도로 개설	시설비	827,967,510	454,635,600	363,372,600	114,594,910	공사기간 미도래 2019. 11. ~ 2020. 9.(중지중)
건설과	도로	구지 창리(472-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	900,786,640	545,257,390	486,488,390	96,602,250	공사기간미도래 2019.11. ~ 2021. 2.
건설과	도로	하빈 현내2리(539-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	28,064,000	8,307,000	8,307,000	19,757,000	감정평가 의뢰로 인한 이월
건설과	도로	도로굴착복구	시설비	4,597,612,400	4,597,612,400	4,277,204,650	320,407,750	준공기간 미도래(2021년 1월 준공)으로 준공시 집행잔액
건설과	도로	도로 긴급보수비	시설비	929,285,440	872,366,440	789,334,360	83,001,220	준공기한 미도래
건설과	도로	시특법 시설물 정기점검	시설비	163,265,000	53,461,000	33,751,000	19,710,000	준공기한 미도래
건설과	도로	제설전진기지(창고) 설치	시설비	798,000,000	658,226,770	651,179,770	10,182,000	준공기한 미도래
건설과	도로	논공 금포리(1083번지) 도로확장	시설비	130,130,000	115,111,340	115,111,340	15,018,660	보상협의 지연
건설과	도로	화원 설화리 910-4번지선 도로정비	시설비	170,000,000	7,305,100	7,305,100	12,694,900	명시이월 요청액(1억5천) 차액발생-보상협의시작('20.12.28.)으로 인한 금년도 지출집행 어려움
건설과	도로	화원 명천로 인도보수	시설비	220,000,000	211,550,900	168,500,000	51,500,000	준공기한 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	다사 대실초교앞 도로확장	시설비	320,000,000	167,851,460	53,069,500	266,930,500	공기부족
건설과	도로	논공 금포리 863-1번지 일원 도로정비	시설비	50,000,000	20,208,400	1,335,400	18,664,600	2회 추경 예산으로 11월 착수 후 용역기간 미도래
건설과	도로	논공 노이6길 도로정비	시설비	220,000,000	124,300,270		220,000,000	2회 추경 예산으로 11월 착공 후 공사기간 미도래
건설과	도로	다사 죽곡리 다사교회 일원 인도정비	시설비	130,000,000	56,559,500	10,260,000	119,740,000	공기부족
건설과	도로	유가 가태2리 마을진입로 확포장	시설비	520,851,180	316,010,210	68,799,050	350,000,000	노선협의 지연으로 인해 9월 발주 후 공사기간 미도래
건설과	도로	유가 도의3리 마을안길 확포장	시설비	110,000,000	74,923,110	33,227,110	57,696,000	영농활동으로 인한 공사 중지 후 11월 재개, 공사기간 미도래
건설과	도로	옥포 김흥리 산120번지선 자동염수살포장치 설치	시설비	400,000,000	294,172,480	1,100,000	398,900,000	사업 시행 절차 진행중
건설과	도로	현풍 오산1리 138번지선 마을안길정비	시설비	155,863,960	112,602,250	112,602,250	43,261,710	보상협의 지연
건설과	도로	현풍 국도5호선~원오교간 도로확장	시설비	500,000,000	74,482,000	9,240,000	56,002,000	준공기한 미도래
건설과	도로	가창 중주리~내주리 연결도로(429번지선) 확포장	시설비	655,369,900	178,712,740	178,712,740	224,236,500	보상협의 지연
건설과	도로	가창 우록리 1321번지선 외 1개소 도로정비	시설비	945,239,600	309,944,200	309,944,200	452,695,100	보상협의 지연
건설과	도로	가창 동서 연결도로 개설	시설비	340,281,000	54,677,000		140,281,000	행정협의 지연
건설과	도로	가창 최정산 도로공사	시설비	8,580,298,600	6,856,022,840	6,203,842,160	376,456,440	준공기한 미도래
건설과	도로	가창 최정산 도로공사	시설부대비	18,684,600	5,475,600	5,475,600	13,209,000	준공기한 미도래
건설과	도로	하빈 하산2리 610번지선 외 1개소 도로정비	시설비	70,362,000	62,047,000	62,047,000	8,315,000	사업비 확보중
건설과	도로	구지 대암리 314-1번지 일원 도로정비	시설비	298,000,000	291,275,500	291,275,500	6,724,500	보상협의지연
건설과	도로	다사 문양리 748번지(장귀미) 도로확포장	시설비	10,016,370	667,700	667,700	9,348,670	토지편입민원
건설과	도로	가창오리지구 급경사지 보수보강공사	시설비	100,000,000	85,401,020	40,933,200	59,066,800	공기부족
안전방재과	수자원	하천수문관리	시설비	363,680,000	316,060,260	304,960,260	51,064,000	준공기한 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
안전방재과	수자원	소하천정비(생활)-다사 문양리 문양소하천 정비공사(전환)	시설비	2,321,947,000	1,226,165,640	310,629,000	18,518,000	공사기간 미도래 (준공예정일 21.10.15)
안전방재과	수자원	가창 우록리 992번지선 화백록소하천 정비공사	시설비	397,120,000	301,148,340	227,716,340	167,317,880	공사기간 미도래
안전방재과	수자원	소하천정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역(화원,논공)	시설비	500,000,000	452,611,000	189,299,960	310,700,040	용역기간 미도래
안전방재과	수자원	소규모 하천 환경 정비	시설비	1,970,112,470	1,894,435,130	1,794,472,280	109,187,000	준공기한 미도래
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(가창 대일리 산99번지 일원 농로포장공사)	시설비	169,899,200	107,465,800	1,834,800	168,064,400	공사기간 미도래(2021. 2. 26.)
도시과	지역및도시	현풍 경관광장 도시계획시설사업	시설비	470,000,000	432,113,900	214,033,900	218,080,000	행정절차 지연에 따른 용역중지(2020. 11. 24. ~)
도시과	지역및도시	지역역량강화(달성3색 문화창조 도시브랜드 구축)	민간위탁금	90,000,000	90,000,000		90,000,000	사업계획 변경(사업기간 연장)
도시과	지역및도시	눈꽃(설화)처럼 밝은 설화마을 만들기 프로젝트	민간위탁금	148,000,000	148,000,000		148,000,000	코로나19 확산으로 인하여 사업계획서에 대한 추가 검토기간 소요
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	시설비	2,743,875,930	2,556,843,770	1,967,308,420	720,567,510	금년 강우일수 및 강수량 증가로 인한 공사기간 연장 / 주민민원으로 12월 공사중지 중, 주민협의 완료 후 중지해제 예정 (2021. 2월 준공예정)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	연구용역비	112,157,000	18,000,000		12,157,000	주민교육프로그램 용역 진행중(2021.4월 완료예정), 선비문화체험관 체험프로그램 기획및 운영용역 발주예정(2021.2월)
도시과	지역및도시	도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	시설비	4,764,219,140	2,892,559,910	1,767,626,810	1,094,844,260	선비문화체험관 준공기한 미도래, 기세리 주민쉼터 조성사업 실시설계 용역중
도시과	지역및도시	가창 찐빵거리 전선 지중화 사업	시설비	305,470,340	85,304,400	85,304,400	220,165,940	공사기간 미도래(최종 정산은 공사 준공 후 가능하여 원인행위 불가)
도시정비과	농업□농촌	화원 설화1리(1037번지선) 농로 확포장공사	시설비	279,935,600	59,350,630	59,350,630	216,590,000	공사기간 미도래 (19.11.20 ~ 21.1.9)
도시정비과	농업□농촌	화원 본리리(1147번지선) 농로정비공사	시설비	50,000,000	24,454,000	3,306,000	37,748,000	토지보상관련 민원발생으로 공사중지중
도시정비과	농업□농촌	다사 문산리(697번지선) 농로 개설공사	시설비	148,915,400	103,350,470	37,413,370	101,297,100	공사기간 미도래 (20.12.23 ~ 21.4.21)
도시정비과	농업□농촌	유가 가태리(617번지선) 농로확포장공사	시설비	136,724,410	22,996,500	22,996,500	113,727,910	보상협의지연 (13필지중 8필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	유가 쌍계리(249-3번지선) 농로 정비공사	시설비	60,000,000	22,991,900	22,991,900	4,700,000	관급자재대금 지출지연
도시정비과	농업□농촌	가창 대일1리(470번지선 외 2개소) 농로개설공사	시설비	312,752,750	80,144,690	80,144,690	61,141,550	보상협의지연 (17필지중 6필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 반송2리(213번지선) 농로 확포장공사	시설비	208,488,000	65,634,030	65,634,030	16,080,000	관급자재대금 지출지연

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시정비과	농업□농촌	가창 주리(699번지선) 농로 확포장공사	시설비	352,331,600	191,038,480	86,491,480	160,312,120	공사기간 미도래(20.10.05~21.02.01.)
도시정비과	농업□농촌	현풍 지1리(1322번지선) 농로확포장공사	시설비	244,881,300	83,969,000	83,969,000	153,807,000	보상협의지연 (13필지중 3필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 동곡2리(406번지선) 농로 개설공사	시설비	245,272,720	92,915,240	18,612,700	172,208,570	공사기간 미도래 (20.10.15 ~ 21.2.11)
도시정비과	농업□농촌	옥포 본리1리 농로 포장공사	시설비	94,009,400	63,489,700	63,489,700	30,519,700	보상협의지연(6필지중 2필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 우록리(66-4번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	120,128,570	89,417,800	56,199,370	우수관 매설관련 토지소유자 협의로 인한 공사중지 중
도시정비과	농업□농촌	가창 우록리(1317번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	130,600,990	130,600,990	17,471,400	보상협의지연(5필지중 2필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 행정리(497번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	130,508,780	88,366,780	51,420,000	공사기간 미도래(20.10.12.~21.01.09.)
도시정비과	농업□농촌	하빈 하산2리(71번지선) 농로개설공사	시설비	68,959,470	37,750,500	37,750,500	25,802,100	보상협의지연(25필지중 9필지 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 묘리 간이배수장 설치공사	시설비	397,840,000	382,487,590	367,487,590	29,722,410	관급자재대금 미지출
도시정비과	농업□농촌	농업기반정비(재해위험저수지 개보수)(전환)	시설비	467,610,790	460,051,890	349,781,890	117,828,900	공사기간미도래(20.10.14~21.01.11)
도시정비과	농업□농촌	도시생활환경개선(유가, 구지 농촌생활환경정비)	시설비	477,682,230	417,191,630	310,071,630	153,387,440	공사기간 미도래(20.11.02 ~ 21.03.01)
도시정비과	지역및도시	양.배수장 유지관리	시설비	552,300,000	524,055,570	510,455,570	13,600,000	건축허가 협의 지연으로 인한 공사 기간 연장
정책사업과	문화및관광일반	공공사업 관리	공공운영비	74,400,000	52,201,320	33,701,320	18,500,000	북부권 복합행정시설 부지정비
정책사업과	문화및관광일반	경찰특공대 이전 부지 교환	시설비	685,517,000	365,374,198	365,374,198	5,000,000	대구경찰특공대 이전 손실보상금
정책사업과	문화및관광일반	비슬관광지 조성	시설비	4,686,388,000	3,893,041,320	3,620,181,320	1,066,206,000	용역중지로 인한 완료기한 미도래, 중토위 이의재결 절차 진행중, 국유지 매입 절차 추진중
문화체육과	문화예술	달천 예술창작공간 조성	시설비	804,201,260	777,747,310	764,247,310	13,500,000	공사기간 미도래
문화체육과	문화예술	달천 예술창작공간 조성	자산및물품취득비	70,000,000	15,094,000		68,298,100	사업기간 미도래
문화체육과	문화예술	달성문화원 리모델링 공사	시설비	1,877,385,720	1,829,825,220	1,741,255,220	88,570,000	공사기간 미도래(준공예정일: 2021.01.11)
문화체육과	체육	화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성	시설비	1,394,748,000	916,715,790	479,894,790	796,970,000	소규모환경영향평가 등 용역 수행중으로 공사중지

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
문화체육과	체육	금호강변 체육시설 개보수 사업	시설비	797,914,000	230,192,000	18,774,000	728,838,000	공사기간 미도래
문화체육과	체육	가창체육공원 축구장 정비	시설비	800,000,000	159,136,900	69,926,480	641,275,940	공사기간 미도래
문화체육과	체육	논공 위천파크골프장 조성 공사	시설비	66,000,000	49,500,000	11,250,000	19,350,000	용역기간 미도래
문화체육과	체육	달성 테크노폴리스 생활체육광장 조성	시설비	22,000,000	19,350,000		19,350,000	용역기간 2021.06.26.
관광과	관광	마비정 벽화마을 관리	시설비	3,997,000,000	531,277,380	374,825,380	198,431,700	①사업계획 변경 방침에 따라 도시계획도로·쉼터 조성 공사(2020.12. ~ 2021.6.) 진행중 ②도시계획도로·쉼터 조성 공사 선금 지출(110백만원) ③주차장 도시계획시설 결정·실시계획인가 용역 진행중(2020.12. ~ 2021.7.)
관광과	관광	핵심관광지육성(자본)	시설비	250,000,000	231,808,900	88,764,000	143,044,900	디자인 기본계획 및 실시설계 용역 지연으로 인한 제작설치 지연
관광과	관광	낙동가람 수변역사 누림길(도동지구) 조성사업	시설비	693,122,000	74,683,420	74,683,420	618,438,580	편입토지 및 지장물에 대한 보상 지연
관광과	문화재	문화재 보수정비(시지정)	민간자본사업보조(이전재원)	1,300,000,000	1,298,000,000	1,280,000,000	18,000,000	사업기간 미도래(2020.11.~2021.06.)
농촌지도과	농업□농촌	청사내진보강	시설비	300,000,000	20,200,000	20,200,000	248,429,680	공사기간 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	사고이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
합 계(1건)				820,000,000	551,120,970	494,096,970	56,160,000
안전방재과	수자원	하천유지관리	시설비	820,000,000	551,120,970	494,096,970	56,160,000	준공기간미도래