사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
계	467,670,849,000			124,112,410,410		82,926,854,098	15,412,482,300	64,619,371,798	2,895,000,000
안전 영상정보 인프라(CCTV)구축	3,613,533,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31	CCTV 설치 및 자가통신망 구축	1,372,063,400	CCTV 설치 및 자가통신망 구축	3,613,533,000		3,613,533,000		CCTV설치 및 자가통신망 구축	38	정보통신과
	CCTV 설치 및 자가통신망 구축
부리어린이공원 조성	4,300,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-31			공원조성 A=4,395□	3,200,000,000		3,200,000,000		토지 손실보상협의	70	공원녹지과
	공원조성 A=4,395□
상리근린공원 조성	3,100,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31			공원조성 A=28,945□	2,800,000,000		2,800,000,000		실시계획 인가 등 행정절차 진행	5	공원녹지과
	공원조성 A=28,945□
종합사회복지관 증축	3,501,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	부지매입, 설계용역타당성	460,257,670	달성군종합사회복지관 건물증축	3,035,548,820		3,035,548,820		공사완료	100	희망지원과
	달성군종합사회복지관 증축
달성군장애인재활자립작업장확장이전	5,700,000,000	2019-01-01 ~ 2020-12-24	증축, 등기	3,883,499,100	달성군장애인재활자립작업장 확장이전	1,741,019,610		1,741,019,610		공사완료	100	희망지원과
	달성군장애인재활자립작업장 확장이전
화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	4,700,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=8m, L=1,267m	850,000,000	B=8m, L=1,267m	2,000,000,000		2,000,000,000		보상준비중	55	건설과
	B=8m, L=1,267m
옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	16,400,000,000	2017-07-30 ~ 2022-07-31	B=24.7m,L=1,140m	7,649,000,000	B=24.7m,L=1,140m	5,095,000,000		4,200,000,000	895,000,000	공사중	55	건설과
	B=24.7m,L=1,140m
달성군청~옥포강림임대주택단지간 도로건설	15,500,000,000	2018-07-12 ~ 2022-07-31	B=30m,L=560m	6,629,590,000	B=30m,L=560m	5,970,000,000		3,970,000,000	2,000,000,000	공사완료(1공구),공사발주예정(2공구)	60	건설과
	B=30m,L=560m
가창 동부순환도로 개설	9,500,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=12m,L=1,700m	2,440,000,000	B=12m,L=1,700m	2,200,000,000		2,200,000,000		보상중	35	건설과
	B=12m,L=1,700m

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	15,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	B=15m,L=2,170m	1,800,000,000	B=15m,L=2,170m	4,000,000,000	4,000,000,000			보상중	35	건설과
	B=15m,L=2,170m
가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	5,000,000,000	2017-01-01 ~ 2019-12-31	B=8(10)m,L=1,130m	3,120,000,000	B=8(10)m,L=1,130m					보상중	25	건설과
	B=8(10)m,L=1,130m
하빈 군도7호선(감문~대평) 도로확장	18,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	B=19.5m,L=4,500m	700,000,000	B=19.5m,L=4,500m	100,000,000		100,000,000		설계중	5	건설과
	B=19.5m,L=4,500m
도로굴착복구	11,500,000,000	2019-02-01 ~ 2020-01-31			굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□	2,500,000,000		2,500,000,000		공사중	99	건설과
	굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□
유가 초곡리 도로확포장	7,420,000,000	2015-08-11 ~ 2021-08-31	B=8m,L=2,271m	4,170,000,000	B=8m,L=2,271m	3,250,000,000		3,250,000,000		공사완료(1공구),공사중(2공구)	70	건설과
	B=8m,L=2,271m
비슬산 휴양림도로 확포장	18,500,000,000	2015-11-23 ~ 2023-04-30	B=15~18m L=2,261m	4,100,000,000	B=15~18m L=2,261m	4,500,000,000		4,500,000,000		공사중	60	건설과
	B=15~18m, L=2,261m
가창 동서 연결도로 개설	3,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	B=8.0m L=5.3km		B=8.0m L=5.3km	300,000,000		300,000,000		설계중	5	건설과
	B=8.0m L=5.3km
가창 최정산 도로공사	16,335,249,000	2016-08-01 ~ 2021-02-28	B=8~10m L=7,600m	12,146,228,000	B=8~10m L=7,600m	4,189,021,000	2,989,021,000	1,200,000,000		공사중	99	건설과
	B=8~10m L=7,600m
달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	13,005,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-31	B=8.5~11.75m L=1,300m	8,684,000,000	B=8.5~11.75m L=1,300m	5,324,000,000	4,224,000,000	1,100,000,000		공사중	98	건설과
	B=8.5~11.75m L=1,300m
지방하천정비(화원 천내천 고향의 강 조성사업)(전환)	25,540,067,000	2012-01-01 ~ 2020-06-30	하천정비 L=2.1km	25,559,000,000	유지수확보(펌프장)1식	1,192,039,000		1,192,039,000		총괄공사 준공	100	안전방재과
	하천정비 L=6.3km, 교량2개소, 가동보1개소, 유지수확보(펌프장 1식

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
지방하천정비(현풍천 재해예방사업)(전환)	14,939,000,000	2015-01-01 ~ 2024-03-31	실시설계용역	2,800,000,000	유지용수공 1식	1,599,690,000	750,000,000	849,690,000		1차공사 준공	12	안전방재과
	하천정비L=5.3km, 교량공2개소, 유지수확보(펌프장) 1식
지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환)	36,281,000,000	2018-01-01 ~ 2024-01-31	실시설계용역	4,855,000,000	유지용수공 1식	14,998,394,300	1,034,461,300	13,963,933,000		1차공사 준공, 2차공사 발주 (호안공 및 데크로드공 추진중)	52	안전방재과
	하천정비 L=8.8km, 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 유지수확보(펌프장) 1식
도시재생 뉴딜사업(1,000년의 화원, 다시 꽃피다)	24,150,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31			부지매입(3필지), 건축기획 용역 등	2,782,075,540	2,415,000,000	367,075,540		정상추진(주차장 부지매입 협의 중, 설계공모 추진 등)	11	도시과
	천내1,2리 일원(150,000□) : 거점시설 3개소, 주차장 1, 주민역량강화교육 등
도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)	6,586,000,000	2016-01-01 ~ 2021-12-31	· 3구간 하빈PMZ 평화예술센터 건립	6,424,000,000	· 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성 · 2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성 · 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성	162,000,000		162,000,000		정상추진	85	도시과
	· 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성 · 2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성 · 3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 조성 · 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성
도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)	6,000,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□	3,886,000,000	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□	2,114,000,000		2,114,000,000		정상추진(선비문화체험관 착공, 기세리 주민쉼터 조성사업 실시설계중)	47	도시과
	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
한옥마을 조성사업	44,000,000,000	2016-07-01 ~ 2020-12-31	도시개발계획수립 및 실시계획 용역	173,331,400	도시개발계획 및 실시설계용역 선급금지급 및 문화재 지표조사 용역완료	157,634,600		157,634,600		낮은 사업성으로 인해 사업보류	100	정책사업과
	한옥마을 조성 99,80□, 한옥 106호
경찰특공대 이전 부지 교환	15,100,000,000	2014-04-01 ~ 2021-12-31	보상비 및 기타비용	14,479,917,130	보상금 지급 및 부지교환	365,374,198		365,374,198		수용재결 완료, 부지교환 완료, 보상금 공탁	100	정책사업과
	면적 94,798□ 65필지
참꽃케이블카 설치	31,000,000,000	2016-05-01 ~ 2022-06-30	군립공원계획 결정(변경) 및 도시관리계획(궤도)결정 용역	43,400,000	기본 및 실시설계, 환경영향평가	622,569,390		622,569,390		기본 및 실시설계, 환경영향평가 중	30	정책사업과
	케이블카 설치 연장1.9km
비슬관광지 조성	33,900,000,000	2016-06-01 ~ 2023-12-31	주차장조성공사, 비슬산관광지 조성계획수립, 주차장정비공사, 손실보상금 협의	7,887,123,710	수용재결 완료	3,620,181,320		3,620,181,320		비슬산관광지 실시설계 중	42	정책사업과
	관광지 조성 250,800□정도
달성 화석박물관 건립	23,700,000,000	2016-12-01 ~ 2022-06-30	타당성용역시행		건축설계용역 등 시행	549,575,180		549,575,180		건축설계용역 진행중	40	정책사업과
	연면적5,922.48□, 지하1층/지상3층
달성교육문화복지센터 건립	32,000,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	타당성용역시행		건축설계용역 시행	945,198,140		945,198,140		기본 및 실시설계용역 진행 중	45	정책사업과
	연면적13,757.14□ 지하1/지상3층