109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 달성군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
달성군 여성문화 복지센터 증축	8,590	-	142	8,448	-	2022	2019	54%
달성군 재활용품 선별장 현대화	13,000	-	2,298	190	10,512	2023	2019	17%
달성군 장애인 재활자립작업장 확장이전	5,625	3,884	1,741	-	-	2020	2019	100%
화물자동차 공영 차고지 조성사업	40,000	201	466	13,389	25,944	2022	2020	50%
달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	15,139	14,052	1,087	-	-	2020	2014	100%
가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	15,000	1,660	4,134	1,214	7,992	2023	2018	40%
화원 구라리 (891번지선) 도시계획도로 개설	6,500	33	24	1,000	5,443	2023	2019	20%
옥포 간경리 미진이지비아동편 도시 계획도로 개설	5,623	20	80	-	5,523	2023	2019	5%
화원 명곡리 (명곡램프연결로) 도시계획도로 개설	6,300	--	79	-	6,221	2023	2019	10%
옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	5,700	2,261	1,639	-	1,800	2022	2019	40%
현풍 달성문화원옆 도시계획도로 확장	6,200	-	33	5,100	1,067	2023	2019	25%
화원 본리리 (661-1번지선) 도시계획도로 개설	1,670	-	27	-	1,643	2023	2020	5%
화원 구라리 (산54-3번지선) 도시계획도로 개설	5,400	-	20	500	4,880	2023	2020	20%
군도3호선 (기세리 인근) 위험도로 개선사업	14,000	300	-	250	13,450	2024	2020	5%
현풍 국도5호선~ 원오교간 도로확장	8,350	1,500	10	100	8,240	2023	2020	5%
하빈 PMZ 평화 기념마을 조성	6,586	3,693	2,024	868	-	2021	2015	93%
낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업	6,000	1,038	1,769	3,193	-	2021	2016	66%
현풍 경관광장 도시계획시설사업	19,670	-	214	-	7,000	2022	2019	50%
달성교육문화복지 센터건립	32,000	-	945	12,513	18,542	2023	2018	50%
비슬관광지 조성	33,900	7,774	3,620	1,066	21,440	2023	2018	45%
비슬산 참꽃 케이블카 설치	31,000	81	623	3,021	27,275	2022	2019	30%
달성 화석박물관 건립	23,700	-	550	11,645	11,505	2022	2019	45%
달성문화원 리모델링 공사	2,000	2	1,839	-	-	2020	2019	100%
달성 테크노 스포츠 센터 건립	16,540	3,540	63	680	12257	2023	2019	22%
화원명곡체육공원 내 유소년축구장조성	3,600	-	87	1,600	1,913	2022	2019	20%
다사체육공원 생활체육센터 건립	5,500	-	32	746	4,722	2022	2020	1%
달성 테크노폴리스 생활체육광장 조성	3,990	2,220	-	20	1,750	2022	2020	10%
화원유원지 관광지 조성	48,700	691	672	699	46,638	2025	2019	45%
달성군 보건소 이전 신축	28,000	16,367	11,633	-	-	2020	2016	100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

달성군 여성문화복지센터 증축

담당자

회계과 신민재(☎668-8372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여성문화복지센터 증축을 통해 본관 및 신축 건물을 활용한 평생교육

능력개발과 대주민 서비스를 충족시키고, 산하기관을 배치하여 행정의

효율성을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 화원읍 설화리 556-15번지 외 1필지

○ 규 모 : 지하1층 / 지상8층(연면적 : 2,920㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,590		142	8,448
국 비
시 도 비
시군구비	8,590		142	8,448
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ 2019.  9. : 기본계획 수립

○ 2019.  9. : 군 지방재정계획 심의(투자심사)

○ 2020.  9. : 설계용역 착수

○ 2021.  6. : 설계용역 완료

○ 2021.  6. : 공사 시행

□ 향후계획

○ 2022.  6. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

달성군 재활용품선별장 현대화 사업

담당자

청소위생과 이상엽(☎668-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재활용품선별장이 노후화되고 재활용품 쓰레기 발생량이 늘어남에 따라 선별작업의 불편 및 적재공간의 협소함을 개선하기 위하여 인접 부지를 매입하고 건물을 신축하여 재활용품선별장을 현대화 하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~2023. 12.

○ 위 치 : 현풍읍 원교리 718-2, 720, 721, 1749-33번지

○ 규 모 : 부지면적 5,614㎡, 건축연면적 3,600㎡(2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000		2,298	190	10,512
국 비
시 도 비
시군구비	13,000		2,298	190	10,512
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

○ 2020 : 부지 매입 예산지출

□ 향후계획

○ 2021. 하반기 : 민사소송 결과에 따라 사업추진예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

달성군 장애인재활자립작업장 확장이전

담당자

희망지원과 문유진(☎668-2566)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제조면적 확보로 자립장 운영의 안전화 및 일자리 창출

○ 작업 및 적재공간의 확보로 근로장애인의 안전사고 예방 및 작업라인의

효율적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 8.

○ 위 치 : 구지면 예현리 757-12

○ 규 모 : 2,051㎡(사무동 599㎡, 공장동 1452㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,625	3,884	1,741	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	5,625	3,884	1,741	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 8. : 준공 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

화물자동차 공영차고지 건설지원

담당자

교통과 전준홍(☎668-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 운수사업자에게 주차공간을 제공하여 차고지 난을 해소함으로써 도심 내 불법 주‧박차에 따른 안전사고 예방 및 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2022.

○ 위 치 : 화원옥포IC 일원(화원읍 설화리, 옥포읍 간경리)

○ 규 모 : 79,574㎡ (주차면 612면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원 (국 950, 시 33,050, 군 6,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	40,000	201	466	13,389	25944
국 비	950	200	450	-	300
시 도 비	33,050	-	16	11,380	21654
시군구비	6,000	1	-	2,009	3990

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본구상 및 타당성 용역 완료	: 2016. 8.

○ GB관리계획변경 및 도시관리계획시설 결정 용역 착수	: 2017. 5.

○ 2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경 신청	: 2018. 3.

○ 지방도시계획위원회 심의(GB관리계획변경)	: 2019. 1.

○ GB관리계획변경 승인 승인(국토부)	: 2019.11.

○ 지방재정 중앙 투자사업 재심사(조건부 승인)	: 2020. 4.

○ 기본 및 실시 설계 용역 착수	: 2020. 5.

○ 지방도시계획위원회(도시계획시설결정) 심의 결정            : 2020. 6.

○ 재해영향평가, 소규모환경영향평가 등 준공	: 2021. 3.

○ 중앙토지수용위원회 사업인정 협의	: 2021. 4.

□ 향후계획

○ 설계의 경제성(VE) 검토 요청	: 2021. 8.

○ 건설기술심의(100억 이상) 요청	: 2021.10.

○ 건축인허가(세움터) 접수, 일상감사 및 계약심사 요청	: 2021.11.

○ 수용재결 신청 및 수용재결	: 2022. 2.

○ 공사착공 및 준공	: 2022. 6.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2016. ~ 2019.	2016. ~ 2020.
총사업비	20,000백만원 (국 14,000. 시 3,000. 군 3,000)	40,000백만원 (국 9,500. 시 33,050. 군 6,000)

* 변경사유 : 행정절차 지연에 따른 사업기간 및 사업비(토지보상 등) 증가, 지방이양 대상사업 전환에 따른 사업비 재원 변경

사업명

달성군 도동~자모 위험도로 구조개선

담당자

건설과 전찬규(☎668-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도1호선 중 도로경사가 급하고 선형이 불량한 도동서원~자모제 구간(L=1.3km)의 선형을 개량하여 교통사고의 위험성을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2020.

○ 위 치 : 현풍읍 자모리 ~ 구지면 도동리

○ 규 모 : B=8~11.5m, L=1,335m (터널 L=330m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,139백만원(국 7,500. 군 7,639)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,139	14,052	1,087	0	0
국 비	7,500	6,608	892
시 도 비
시군구비	7,639	7,444	195	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  1. : 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설

담당자

건설과 전찬규(☎668-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 주변지역에 위치하여 상대적으로 낙후된 지역의 균형개발로 주민 정주여건을 향상시키고 토지이용의 효율성을 증대시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023.

○ 위 치 : 가창면 우록리 630-3번지 ~ 1035-7번지

○ 규 모 : B=10~15m, L=2,170m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원 (국 7,500, 군 7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	1,660	4,134	1,214	7,992
국 비	7,500	739	61	614	6,086
시 도 비
시군구비	7,500	921	4,073	600	1,906
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017. 11. : 실시설계 용역 착수

○ 2020. 10. : 실시설계 용역 완료

○ 2021.  8. : 보상 협의 중(보상률 73%)

□ 향후계획

○ 2022.  7. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

화원 구라리(891번지선)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 박준호(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 화원읍 구라리 891번지

○ 규 모 : B=6~8m, L=730m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,500	33	24	1,000	5,443
국 비
시 도 비
시군구비	6,500	33	24	1,000	5,443
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 11. : 실시설계 용역 착수

○ 2020.  4. : 실시설계 용역 완료

○ 2021.  8. : 보상 협의 중(보상률 18%)

□ 향후계획

○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옥포 간경리 미진이지비아 동편

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김가빈(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민들의 교통불편을 해소하고 삶의 질을 향상하여 지역균형개발 및 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 옥포읍 간경리 721-1번지 일원

○ 규 모 : B=15m, L=350m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,623	20	80		5,523
국 비
시 도 비
시군구비	5,623	20	80		5,523
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 실시설계 용역         : 2019. 11. ~ 2020. 2.

○ 실시계획 인가고시     : 2020. 6.

□ 향후계획

○ 보상계획 및 열람공고    : 2022. 1.

○ 편입토지 및 지장물 보상 : 2022. 3.

○ 공사 시행               : 2023. 1. ~ 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

화원 명곡리 (명곡램프연결로)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 박준호(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 화원읍 명곡리 372-1번지

○ 규 모 : B=15m, L=1,050m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,300	0	79	0	6,221
국 비
시 도 비
시군구비	6,300	0	79	0	6,221
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020.  2. : 실시설계 용역 착수

○ 2021.  7. : 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2022.  1. ~ 2022. 12. : 보상 추진

○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옥포 본리2리 2452번지선

도시계획도로 개설

담당자

건설과 김가빈(☎668-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.~ 2022.

○ 위 치 : 옥포읍 본리리 2452번지 일원

○ 규 모 : B=6~12m, L=518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,623	20	80		5,523
국 비
시 도 비
시군구비	5,700	2,261	1,639		1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 실시설계 용역           : 2018. 1. ~ 2018. 5.

○ 실시설계 인가고시       : 2018. 11.

○ 보상계획 및 열람공고    : 2019. 2.

○ 편입토지 및 지장물 보상 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

□ 향후계획

○ 공사 시행               : 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 개설

담당자

건설과 홍승완(☎668-3755)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구테크노폴리스 및 달성종합스포츠파크 개발로 인한 교통량 증가로 교통혼잡이 번번히 발생하는 부동들삼거리 ~ 상리교 구간 도로를 확장하여 지역 주민의 교통 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 현풍읍 상리 부동들삼거리 ~ 상리교

○ 규 모 : B=19m, L=655m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,200백만원 (군 5,500, 특 700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,200		33	5,100	1,067
국 비
시 도 비
시군구비	5,500		33	4,400	1,067
지 방 채
민간자본
기 타	700			700(특별교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  25%)

○ 실시설계 용역           : 2018. 10. ~ 2019. 12.

○ 보상계획 및 열람공고    : 2020.  1. ~ 2020.  2.

○ 편입토지 및 지장물 보상 : 2020.  3. ~ 2022.  4.

□ 향후계획

○ 계약심사 및 일상감사    : 2022.  5. ~ 2022.  6.

○ 공사 시행               : 2022.  7. ~ 2023. 12.

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	총사업비 : 6,200백만원 - 설계 1,500 - 보상비 4,500 - 공사비 200	총사업비 : 8,800백만원 - 설계 2,900 - 보상비 5,600 - 공사비 300

사업명

화원 본리리(661-1번지선)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 박준호(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 화원읍 본리리 661-1번지

○ 규 모 : B=10m, L=320m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,670	0	27	0	1,643
국 비
시 도 비
시군구비	1,670	0	27	0	1,643
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020.  7. : 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 실시설계 용역 완료

○ 2022.  1. ~ 2022. 12. : 보상 추진

○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

화원 구라리 (산54-3번지선)

도시계획도로 개설

담당자

건설과 박준호(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 화원읍 구라리 산54-3번지

○ 규 모 : B=8~10m, L=400m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,400	0	20	500	4,880
국 비
시 도 비
시군구비	5,400	0	20	500	4,880
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 10. : 실시설계 용역 착수

○ 2020.  2. : 실시설계 용역 완료

○ 2021.  8. : 보상 협의 중(보상률 27%)

□ 향후계획

○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군도3호선(기세리 인근)위험도로 개선사업

담당자

건설과 안원모(☎668-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도3호선(옥포 기세리) 도로 신설 및 기존도로를 정비하여 산지 곡선부 신인성 확보와 차선 폭 협소, 낙석 위험으로부터 안전사고 예방을 위하여 위험도로를 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 옥포읍 기세리 산 17-1 ~ 산 12-1번지 일원

○ 규 모 : 위험도로 구조개선 B=10m, L=500m(터널L=400m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,000	300		250	13,450
국 비
시 도 비
시군구비	14,000	300		250	13,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 실시설계 착수           : 2021. 6.

□ 향후계획

○ 도로구역 결정 변경 고시 : 2021. 12.

○ 보상계획 및 열람공고    : 2022. 1.

○ 편입토지 및 지장물 보상 : 2022. 1. ~ 2022. 6.

○ 공사 시행               : 2022. 6. ~ 2024. 7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

현풍 국도5호선~원오교간 도로확장

담당자

건설과 최연수(☎668-2914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로정비사업을 통해 마을주민의 교통 불편을 사전 해소하고, 지역 균형개발 및 지역민원 사전 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 현풍읍 원교리 일원

○ 규 모 : B=19.7, L=1.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,350	1,500	10	100	8,240
국 비
시 도 비
시군구비	8,350	1,500	10	100	8,240
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020.  1. : 실시설계용역 완료

○ 2020.  4. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성용역 시행

○ 2021.  3. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성용역 완료

○ 2021.  6. : 실시설계용역 보완 설계 중

□ 향후계획

○ 2021.  9. : 실시계획인가 고시

○ 2021. 10. : 보상계획 열람공고

○ 2022.  6. : 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

하빈PMZ 평화예술마을 조성사업

담당자

도시과 황은령(☎668-3850)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴되어있는 우리군의 주요거점 및 개발 소외지역의 사회, 문화, 경제, 환경적 재생을 통해 지역 불균형해소, 도시경쟁력 강화 및 지속가능한 도시로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 하빈면 봉촌리 및 하산리 일원

○ 규 모

- 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 평화예술촌 진입경관 조성(맞이광장 등)

- 2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성(산책로 쉼터 등)

- 3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 건립

- 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성(마을진입특화, 8골목길 특화 등)

- 주민역량 강화 프로그램사업 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,586 백만원(국 3,062 시 1,531 군 1,993)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,586	3,693	2,024	868	-
국 비		1,924	1,138	-	-
시 도 비	1,531	739	792	-	-
시군구비	1,993	1,032	93	868	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93 %)

○ 2015. 10. : 2016년 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 선정

○ 2017.  8. : 평화예술센터건립 조성예정지 매입

○ 2018.  4. : 대구시 공공디자인 진흥위원회 심의 신청(평화예술센터건립)

○ 2018. 12. ~ 2019. 6. : 평화예술센터건립공사 준공

○ 2019.  5. : 2019 달성 경관재생 국제포럼 개최

○ 2019.  8. : 평화예술센터 개관(8.16.)

○ 2019. 10. ~ 2020. 7. : 평화기념마을조성 프로그램 기획 및 운영 용역 시행

○ 2020.  6. : 하빈PMZ 평화예술센터 민간위탁운영 진행

○ 2020.  4. ~ 2021. 2. : 평화기념마을조성공사 준공

○ 2020. 12. : 낙동강변둑길 야간경관조명 추가 제작설치사업공사 착공, 마을활성화를 위한 상징조형물 제작 및 설치 사업 착수

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 낙동강변둑길 야간경관조명 추가 제작설치사업공사 준공, 마을활성화를 위한 상징조형물 제작 및 설치 사업 완료

○ 2021.  9. : 평화예술촌 마을 주변 환경개선사업 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업

담당자

도시과 정다현(☎668-3852)

□ 사업목적 및 필요성

○ 樂(송해공원의 즐거움)-敬(소계정 선비정신)-淸(용연사계곡의 자연)

3주제를 연결하는 스토리텔링형 테마 관광마을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 옥포읍 옥연지, 기세마을, 용연사 일대 약 6.5㎢

○ 규 모 : 용연사 전통문화가로 경관개선, 낙경청 마을환경정비(벚꽃길 산

책로, 기세마을 경관개선, 소나무숲 산책로 조성), 선비문화체험관

건립, 기세리 주민쉼터 조성, 지역역량강화 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000 백만원(국 1,943 시 971.5 군 3,085.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	6,000	1,038	1,769	3,193	-
국 비	1,943	724	683	536
시 도 비	971.5	109	581	281.5
시군구비	3,085.5	205	505	2,375.5
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  66 %)

○ 2020.  3. : 선비문화체험관 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2020.  9. : 기세리 주민쉼터 조성사업 실시설계 용역 시행

○ 2020. 12. : 선비문화체험관 건립 공사 착공

○ 2021.  2. : 낙경청 선비문화허브네트워크활성화사업 공사 준공

○ 2021.  3. : 낙경청 프로그램 기획 및 운영 용역 착수

○ 2021.  4. : 기세리 주민쉼터 조성사업 실시설계 용역 완료

○ 2021.  5. : 기세리 주민쉼터 조성사업 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021.  9. : 기세리 주민쉼터 조성사업 공사 준공

○ 2021. 10. : 선비문화체험관 건립공사 준공

○ 2021. 12. : 낙경청 프로그램 기획 및 운영 용역 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

현풍 경관광장 조성사업

담당자

도시과 김성훈(☎668-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현풍읍 성하리 398-2번지 일대 경관광장 조성으로 지역미관을 개선하고       주민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 현풍읍 성하리 253-5번지 일원

○ 규 모 : 경관광장 조성 (부지: 19,640㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,670	470		12,200	7,000
국 비
시 도 비
시군구비	19,670	470		12,200	7,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021. 7. 23. : 보상협의 통보

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 공사 착공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경 (안)	비 고
총사업비	총사업비 :19,670백만원 - 설계 470 - 보상비 12,200 - 공사비 7,000	총사업비 :23,381백만원 - 설계 470 - 보상비 14,600 - 공사비 8,000

사업명

달성군 교육문화복지센터 건립

담당자

정책사업과 이민정(☎668-2283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 테크노폴리스 및 대구 국가산업단지 조성으로 급증하는 남부권 주민들의 교육·문화·복지 수요에 적극 대응, 테크노폴리스 부지 내 교육·문화·복지 종합센터 건립으로 군민들의 교육열 및 문화욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 현풍읍 중리 506번지(테크노폴리스지구내)

○ 규 모 : 부지면적 10,737㎡, 연면적 13,757.14㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,000백만원 (국 4,300, 시 2,150, 군 25,550)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	32,000	0	945	12,513	18,542
국 비	4,300	0	0	2,646	1,654
시 도 비	2,150	0	0	1,323	827
시군구비	25,550	0	945	8,544	16,061
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018.  4. : 달성군 교육문화복지센터 건립계획 수립

○ 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완) 용역

○ 2019.  8. : 생활SOC복합화 공모사업 신청 및 선정(‘19.10.)

○ 2019. 12. : 중앙투자심사 승인

○ 2020.  4. : 기본 및 실시설계 용역 실시

○ 2021.  3. : 중앙투자심사 2단계 심사 조건부 승인

○ 2021.  4. : 조달청 공사 입찰 의뢰

○ 2021.  5. : 착공, 감리용역 시행

□ 향후계획

○ 2023.  3. : 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	13,366.6㎡	13,757.14㎡	증) 391㎡
총사업비	29,500백만원	32,000백만원

사업명

비슬산관광지 조성사업

담당자

정책사업과 이상직(☎668-3921)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대견사 중창, 비슬산 숲속 오토캠핑장, 반딧불이 전기차, 호텔 아젤리아와 더불어 향후 케이블카 설치 등으로 급증할 것으로 예상되는 관광객에 대비하여 체계적인 관광명소 개발 하고자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원

○ 규 모 : 250,800㎡(76,000평 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	33,900	7,774	3,620	1,066	21,440
국 비
시 도 비
시군구비	33,900	7,774	3,620	1,066	21,440
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2017.  6. : 비슬산관광지 지정 완료

○ 2019.  6. : 관광지 조성계획 승인(대구시)

○ 2019. 12. : 실시설계 용역 착수(‘21. 7월 現 공정률 54%)

○ 2020.  7. : 참꽃 케이블카 추진에 따른 환경영향평가 용역 시행

○ 2021.  4. : 토지보상완료(41필지, 79,074㎡)

○ 2021.  6. : 비슬산관광지 착수기한 연장 승인(대구시)

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 비슬산관광지 조성계획(변경) 및 케이블카 환경영향평가서 협의완료

○ 2022.  3. : 비슬산관광지 조성계획 변경 및 실시설계용역 완료

○ 2022.  6. ~ 2023. 12. : 비슬산관광지 조성공사 단계별 추진

사업명

비슬산 참꽃 케이블카 설치사업

담당자

정책사업과 이석철(☎668-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대견사 개산 이후 비슬산 탐방 관광객이 증가함에 따라 편리한 신개념 수송시설인 케이블카를 도입하여 새로운 관광인프라를 구축, 대견사 등 비슬산권 관광문화 융·복합 및 부가가치 극대화로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위 치 : 유가읍 양리 산5번지 일원

○ 거 리 : 약 1.9km(공영주차장 ↔ 대견봉 인근)

○ 기 간 : 2016. 5. ~ 2022. 6.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	31,000	81	623	3,021	27,275
국 비
시 도 비
시군구비	31,000	81	623	3,021	27,275
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016.  5. : 비슬산 참꽃케이블카 설치 자문위원회 개최

○ 2016.  9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수

○ 2017. 12. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 완료

○ 2019.  3. : 군립공원계획 변경 및 도시관리계획(궤도) 결정 등 용역 착수

○ 2019. 12. : 도시관리계획(궤도) 결정 및 군립공원계획 결정(변경) 고시

○ 2020.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2020.  6. : 비슬산 참꽃 케이블카 설치 자문위원회 구성

○ 2020.  7. : 환경영향평가 용역 착수

○ 2020. 10. : 환경영향평가 평가준비서 심의 및 결정내용 공개

○ 2020. 12. : 환경영향평가서 초안 제출 및 공람공고

○ 2021.  1. : 환경영향평가 주민설명회 개최 및 의견접수

○ 2021.  3. : 도시관리계획(궤도) 변경결정 고시

○ 2021.  5. : 환경영향평가서 본안 제출

○ 2021.  6. : 환경영향평가서 보완 통보

□ 향후계획

○ 2021.  9. : 환경영향평가 보완서 제출

○ 2021. 10. : 환경영향평가 협의 완료

사업명

달성 화석박물관 건립

담당자

정책사업과 정은경(☎668-2282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단과학도시를 표방하는 테크노폴리스 내 인접한 국립대구과학관과의 연계를 통해 전국 최고 학생교육투어의 장으로 마련하고자 전국 최초 국내 화석전문박물관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2022.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지 일원(국립대구과학관 옆)

○ 규 모 : 부지면적 8,980㎡, 연면적 5,915㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,700백만원 (국 7,457, 군 16,241)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	23,700	0	550	11,645	11,505
국 비	7,459	0	0	4,417	3,042
시 도 비
시군구비	16,241	0	550	7,228	8,463
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2020.  5. : 건축 설계용역 착수

○ 2020. 11. : 건축 설계 중간보고 및 화석박물관 건립 자문위원회

○ 2020. 11.  : 스포츠센터와 연계한 마스터플랜 협의

○ 2020. 12.  : 경제자유구역청 건축허가 신청 사전협의

○ 2021.  3. : 설계 경제성검토 완료

○ 2021.  7.  : 건설기술심의 완료

○ 2021.  7.  : 조달청 실시설계 적정성 검토

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 착공, 달성군 화석박물관 설치·운영 조례 제정

○ 2022. 11. : 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	4,994.6㎡	5,915㎡	증) 921㎡
총사업비	22,700백만원	23,700백만원

사업명

달성문화원 리모델링 공사

담당자

문화체육과 강나연(☎668-2174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 달성문화원을 리모델링하여 지역의 문화융성 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 현풍읍 현풍동로 92

○ 규 모 : 리모델링 1식(지하1층 / 지상2층, 연면적 2,171㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국 737, 군 1,104)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,841	2	1,839	0	0
국 비	737	1	736	0	0
시 도 비
시군구비	1,104	1	1,103	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  5 : 설계용역 완료

○ 2020.  6 : 공사 착공

○ 2020. 12. 22. : 공사 준공 (사업 완료)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

달성테크노스포츠센터 건립

담당자

문화체육과 여해수(☎668-2032)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 공공 체육ㆍ문화시설 건립요구 충족 및 지역의 장기적 미래비전과 지역적 균형 발전을 고려하여 테크노폴리스 지역을 대표하는 스포츠센터를 조성하여 지역 주민의 복지체감도 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 4.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 사업부지면적 23,000㎡(연면적 4,960㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,540백만원 (국 3,000, 군 13,540)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,540	3,540	63	680	12,257
국 비	3,000		63	680	2,257
시 도 비
시군구비	13,540	3,540			10,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 03. : 스포츠센터 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료

○ 2019. 03. : 공모선정[국민체육센터(생활밀착형)]

○ 2019. 06. : 공유재산 관리계획 승인

○ 2019. 11. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020. 05. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국가공공건축지원센터)

○ 2020. 06. : 공공건축심의 완료(달성군 건축과)

○ 2020. 11. : 건축설계공모(조달청) 당선작 선정 및 설계용역 착수

○ 2021. 11. : 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 공사 착공

○ 2023. 04. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경(안)	비 고
사업기간	2019. 11. ~ 2022. 5.	2019. 11. ~ 2023. 4.
사업규모	연면적 4,620㎡, 지하1층/지상3층	연면적 4,960㎡ 지하1층/지상3층	증) 340㎡
시설용도	수영장, 체력단련시설, 다목적체육관	수영장, 헬스장, 필라테스룸, 다목적 강당, 문화강좌실

사업명

화원명곡체육공원 내 유소년축구장 조성

담당자

문화체육과 전준현(☎668-2033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 도시관리계획(체육공원)으로 결정된 명곡체육공원의 잔여필지를 매입       하고 유소년축구장 및 부대시설을 설치하여 이용객의 편의제공과 여가선용        및 체육활동 참여기회를 확대하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 유소년축구장 신설 1면, 진입도로 확장 및 부대시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600		87	1,600	1,913
국 비
시 도 비
시군구비	3,600		87	1,600	1,913
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 07. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020. 03. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 09. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수

○ 2021. 02. : 소규모 재해영향평가 협의 완료

○ 2021. 03. : 소규모 환경영향평가 협의 완료

○ 2021. 05. ~ : 토지보상계획 공고 및 토지보상절차 시행

□ 향후계획

○ 2022. 01. : 공사 발주 및 자재 구매

○ 2022. 02. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경(안)	비 고
사업기간	2018. 10. ~ 2021. 12.	2018. 10. ~ 2022. 12.
총사업비	2,800백만원	3,600백만원	토지보상비 증가

사업명

다사체육공원 생활체육센터 건립

담당자

문화체육과 심상윤(☎668-2035)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실외 체육시설(축구장, 농구장, 테니스장, 풋살장) 위주로 조성되어 있는

다사체육공원 내 4계절 이용이 가능한 다목적 실내 생활체육센터를 건립       하여 지역주민의 여가 선용 및 건강 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 11. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 다사읍 달천리 135번지 일원(다사체육공원 내)

○ 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 1,885.85㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원 (국 1,000, 군 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계			32.3	746	4,721.7
국 비	1,000		14.6	746	239.4
시 도 비
시군구비	4,500		17.7	-	4,482.3
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  4%)

○ 2018. 11. : 중기지방재정계획 수립

○ 2019. 06. : 생활체육시설 확충 지원사업 하반기 추가공모 신청

○ 2019. 07. : 공모선정[국민체육센터(근린생활형)]

○ 2020. 02. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020. 04. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료(계명대학교 산학협력단)

○ 2020. 05. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국가공공건축지원센터)

○ 2020. 06. : 공공건축심의 완료

○ 2020. 08. : 건축설계공모 공고(조달청)

○ 2020. 11. : 건축설계용역 착수(180日)

○ 2021. 02. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 사전심사 완료(국토교통부)

○ 2021. 04. : 설계용역 중지

○ 2021. 07. : 건축물에너지효율등급 예비인증 신청

○ 2021. 08. : 市 지방재정투자심사 2단계 및 공유재산심의회 심의 신청

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 설계용역 완료

○ 2021. 11. : 착공

○ 2022. 11. : 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경(안)	비 고
사업기간	2018. 11. ~ 2022. 5.	2018. 11. ~ 2022. 11.
사업규모	연면적 2,350㎡, 지하1층/지상1층	연면적 1,885.85㎡ 지하1층/지상2층	감) 464.15㎡
시설용도	다목적 체육관, 사무실, 샤워실, 창고	다목적 체육시설, 사무실, 샤워/탈의실, 북카페라운지, 대여락카룸, 다목적실

사업명

달성 테크노폴리스

생활체육광장 조성

담당자

문화체육과 전준현(☎668-2033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 달성 테크노폴리스 내 체육시설용지 중 잔여부지에 생활체육광장을 조성       하여 주변 대구과학관 및 건립예정인 달성테크노 스포츠센터, 화석박물       관과 연계하여 지역주민들의 생활체육 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 06. ~ 2022. 06.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 사업부지면적 13,205㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,990	2,220		20	1,750
국 비
시 도 비
시군구비	3,990	2,220		20	1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 06. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수

○ 2020. 09. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

○ 2020. 11. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020. 12. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 02. : 공사 발주 및 자재 구매

○ 2022. 03. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경(안)	비 고
사업기간	2020. 05. ~ 2021. 12.	2020. 06. ~ 2022. 06.
사업규모	공연/광장, 놀이공간 휴식공간	공연/광장, 놀이공간 휴식공간, 휴게쉼터
총사업비	3,400	3,990	전기‧조경공사추가

사업명

화원관광지 조성

담당자

관광과 전창학(☎668-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아름다운 자연과 도시생활권이 조화를 이루는 화원유원지의 기존 인프라를

체계적으로 개선, 다양한 콘텐츠 및 인프라를 기반으로 하는 폭넓은 계층의

사랑을 받는 체류형 거점 관광지로 조성하여 지역 관광활성화 및 경제효과

창출로 공익실현에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2025.

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 화원읍 사문진로1길40 일원

○ 규 모 : 214,760㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	48,700	691	672	699	46,638
군 비	48,700	691	672	699	46,638

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016.  8. : 관광지 지정 및 기본계획용역 착수

○ 2019.  5. : 화원관광지 지정

○ 2019. 10. : 화원관광지 조성 추진계획(안) 수립

○ 2019. 11. : 지방재정투자 심사

○ 2021.  1. : 화원관광지 조성계획 및 기본설계용역 착수

○ 2021.  6. : 재해·교통영향평가 용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 화원관광지 조성계획 승인

○ 2021. 11. ~ 2025. 12. : 실시설계용역 및 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

달성군보건소 이전 신축

담당자

보건과 김상훈 (☎668-3106)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공보건의료에 대한 지역주민의 요구도가 높아짐에 따라 공공보건의료 향상을 위한 인프라를 구축하고 주민의 기대수준에 부흥하는 양질의 보건의료서비스 제공을 위해 군 보건소를 이전 신축함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 08. 29. ~ 2020. 04. 19.

○ 위 치 : 현풍읍 현풍중앙로 27(하리 253-2번지)

○ 규 모 : 지하1층/지상5층, 연면적 11,978.44㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,009백만원 (국 3,716, 군 24,284)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,000	16,367	11,633
국 비	3,716	3,716
시 도 비
시군구비	24,284	12,651	11,633
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 04. 19. : 달성군보건소 신축 건물 준공(사업 완료)

□ 향후계획

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.

10-3. 민간투자사업

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.