과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
합 계(252건)				240,120,344,210	165,215,399,100	145,252,806,800	87,358,146,590
기획예산실	지방행정□재정지원	군정기획	연구용역비	267,423,000	258,581,360	218,702,300	48,683,000	모두안심 달성군립요양원 건립 타당성 및 기본구상 용역 완료기한 미도래(2021.11.01.~2022.03.30.)
기획예산실	지방행정□재정지원	지역인구정책지원	기타보상금	625,441,000	564,541,790	513,070,590	43,092,000	출생신고 기한이 출생일로부터 1개월이내로 12월 출생아 출산용품 2022.01.지급 예정
기획예산실	지역및도시	주민과 함께하는 마을가꾸기 사업	시설비	631,700,000	570,745,620	570,745,620	55,000,000	마을가꾸기 사업 추진 시상금으로서 마을주민협의체에서 구체적 사업 미 결정에 따라 이행에 기간소요 ※ 옥포 30백만원, 논공 25백만원
자치행정과	일반행정	코로나 상생 국민지원금 지원	민간인재해및복구활동보상금	59,468,500,000	50,232,022,980	50,232,022,980	9,236,477,020	지급기한이 2021. 12. 31.임에 따라 금융기관 정산 및 청구가 2022년도에 이루어질 예정임.
회계과	일반행정	달성군 여성문화복지센터 증축	시설비	8,027,193,650	6,877,016,560	3,505,715,980	4,521,477,670	○공사중으로('21.6.23.착공) 준공기한이 미도래하여('22.6.22.준공예정) 해당사업비를 이월코자함.
회계과	일반행정	달성군 여성문화복지센터 증축	감리비	400,000,000	347,129,000	199,252,000	200,748,000	○공사중으로('21.6.23.착공) 준공기한이 미도래하여('22.6.22.준공예정) 해당사업비를 이월코자함.
회계과	일반행정	달성군 여성문화복지센터 증축	시설부대비	20,000,000			20,000,000	○공사중으로('21.6.23.착공) 준공기한이 미도래하여('22.6.22.준공예정) 해당사업비를 이월코자함.
일자리경제과	산업진흥□고도화	달성1차산업단지 급경사지 붕괴위험지구 정비	시설비	2,690,000,000	2,158,915,780	2,158,915,780	82,873,000	2022년도 급경사지 붕괴위험지구(5지구) 정비예산 13억원중 1원을 2021년에 설계예산으로 편성 2022년 2월 5지구 공사 착공 예정
환경과	대기	가정용 저녹스보일러 설치지원 사업	민간자본사업보조(이전재원)	180,600,000	90,200,000	90,200,000	90,400,000	국시비 교부지연
농업정책과	농업□농촌	벼육묘장 설치 지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000			50,000,000	사업대상자 모집공고를 5회 진행하였으나 신청자가 없어 연도내 사업완료 불가
공원녹지과	지역및도시	국가 물산업클러스터 명품경관 조성	시설비	710,865,000	469,150,950	469,150,950	241,714,050	입주업체 사정으로 인한 1년차 공사계획변경 및 향후 공사일정에 반영하기위한 사업비 이월
공원녹지과	지역및도시	국가 물산업클러스터 명품경관 조성	시설부대비	5,135,000	2,670,000	2,670,000	2,268,000	본사업 이월에 따른 시설부대비 이월
공원녹지과	지역및도시	옥연지 송해공원 조성 및 관리	시설비	1,902,890,000	1,761,466,300	811,810,750	1,091,079,250	옥연지 부지사용 협의 등 행정절차 이행 지연으로 준공기한 미도래(공사기간:2021.09.23~12.31)
공원녹지과	지역및도시	옥연지 송해공원 조성 및 관리	시설부대비	7,110,000	4,420,000	4,420,000	2,530,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
공원녹지과	지역및도시	부리어린이공원 조성	시설비	741,071,110	708,677,480	708,677,480	32,393,630	국유지 매입, 농지전용 협의 등 사전 행정절차 이행 지연에 따른 이월
공원녹지과	지역및도시	삼태장터우목제2공원 조성	시설비	1,500,000,000	1,150,606,230	1,150,606,230	349,393,770	토지보상을 위한 사전 행정절차 이행 지연 (손실보상 협의 등)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
공원녹지과	임업□산촌	임도시설(임도신설)	시설비	434,375,000	19,708,000		414,667,000	임도개설 예정지 산주 부동의로 인한 공사 추진 지연
공원녹지과	임업□산촌	임도시설(임도신설)	감리비	9,031,000			9,031,000	본 사업 이월에 따른 감리비 이월
공원녹지과	임업□산촌	임도시설(임도신설)	시설부대비	3,128,000			3,128,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
공원녹지과	임업□산촌	산림욕장 조성	시설비	3,320,000,000	3,296,076,600	3,252,946,600	67,053,400	보상비 집행 잔액을 활용하여 내년도 공모사업 추진을 위한 실시설계용역 발주 등
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	시설비	772,844,270	764,664,850	764,664,850	8,179,420	공사기간 미도래 - 소나무재선충병 방제지침에 의거 피해고사목제거는 당해연도 11월부터 이듬해 4월까지 시행함
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	감리비	279,430,000	213,985,000	213,985,000	65,445,000	본사업 이월에 따른 감리비 이월
공원녹지과	임업□산촌	소나무재선충병방제	시설부대비	6,000,000	3,320,000	3,320,000	2,000,000	본사업 이월에 따른 시설부대비 이월
복지정책과	보훈	충혼탑 정비사업	시설비	1,900,000,000	1,764,024,050	1,126,373,070	773,626,930	달성군 충혼탑 정비 사업 진행 중으로 2022. 4. 30. 준공 예정, 토목·조경 및 전기 1차 기성금(12월 지출 예정) 제외한 공사비(9억 원) 이월
복지정책과	취약계층지원	논공읍민 복지회관 건립	시설비	380,000,000			380,000,000	2020. 6. 23. 이후 수차례 협의·면담 진행했으나 일부 가구 보상안 거부로 인한 사업 지연
복지정책과	보육□가족및여성	어린이집 확충	민간위탁금	420,000,000	350,000,000	350,000,000	70,000,000	국공립 어린이집 신규인가(2022.04월 예정) 후 집행
복지정책과	보육□가족및여성	어린이집 확충	시설비	731,944,000	560,913,850	560,913,850	140,482,000	국공립 어린이집 리모델링 공사(2022년 3월~4월) 후 지출
희망지원과	취약계층지원	아동학대 조사 및 보호 지원	자산및물품취득비	17,933,000	7,932,600	7,932,600	10,000,000	차량용 반도체 수급문제 발생으로 금년도 조달청 저공해자동차 생산물량 확보 불투명 및 내년도 전기차 보조금 확보 및 편성으로 인한 이월
교통과	문화및관광일반	현풍 교통문화파크 조성	시설비	5,845,000,000	1,196,525,270	1,196,525,270	4,648,474,000	공사기간 미도래(사전 및 행정절차 이행 지연)
교통과	문화및관광일반	현풍 교통문화파크 조성	감리비	200,000,000			200,000,000	공사기간 미도래(사전 및 행정절차 이행 지연)
교통과	문화및관광일반	현풍 교통문화파크 조성	시설부대비	5,000,000			2,000,000	공사기간 미도래(사전 및 행정절차 이행 지연)
건설과	도로	화원 설화2리 달성유통센터 뒤편 외 1개소 도시계획도로 개설공사	시설비	645,597,960	550,756,370	442,878,470	183,000,000	2공구 보상수용재결(11월) 및 11월 공사 발주 후 2022. 5월 공사완료 예정으로 공사비 이월
건설과	도로	화원 성산리(206번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,009,677,500	985,387,670	985,387,670	24,289,830	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률49.9% (편입용지34/30건 지장물51/40건)
건설과	도로	화원 성산리(29-3번지선) 도시계획도로 개설	시설비	2,200,032,110	2,047,867,710	1,925,567,080	274,465,030	보상협의 완료 및 금년(11월) 내 공사 발주 예정으로 공사비 이월
건설과	도로	화원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,002,965,000	985,481,750	985,481,750	17,483,250	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률28.5% (편입용지83/41건 지장물285/70건)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	화원 구라리(산54-3번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,480,356,200	1,441,495,870	1,441,495,870	38,860,330	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률29.2% (편입용지22/10건 지장물72/32건)
건설과	도로	논공 남리 주공아파트뒤 도시계획도로 개설	시설비	313,699,640	195,794,800	124,357,800	175,005,840	공사준공기한 미도래
건설과	도로	달성군청 뒤 도시계획도로 개설	시설비	5,610,589,170	4,588,495,720	4,588,495,720	1,022,093,450	손실보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,424,059,980	1,223,655,290	740,536,610	200,000,000	준공기간 미도래
건설과	도로	논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	시설비	2,030,994,600	1,307,330,800	1,307,330,800	723,663,800	손실보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	시설비	2,074,846,390	1,235,547,030	530,902,430	1,240,017,550	준공기간 미도래 (준공예정일: 2022. 06. 15.)
건설과	도로	다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결 도로개설	시설비	1,285,000,000	616,805,450	616,805,450	668,194,550	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률54.7% (편입용지22/8건 지장물59/23건)
건설과	도로	다사 서재리(683번지선) 도시계획도로 개설	시설비	600,000,000	21,835,500	21,835,500	578,164,500	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률1.9% (편입용지7/1건 지장물9/1건)
건설과	도로	다사 서재리 393번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	612,934,000	214,593,000	214,593,000	398,341,000	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률18.3% (편입용지15/5건 지장물30/11건)
건설과	도로	다사 서재리 서재초등학교 남편 외 2개소 도시계획도로 개설공사	시설비	611,630,000	603,797,590	603,797,590	7,832,410	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률35.4% (편입용지16/10건 지장물85/35건)
건설과	도로	다사 세천리 276번지 외 2개소 도시계획도로 개설공사	시설비	1,014,279,000	985,075,700	985,075,700	29,203,300	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률23.3% (편입용지27/6건 지장물59/11건)
건설과	도로	다사 서재리(595번지)일원 도시계획도로 개설	시설비	300,000,000			300,000,000	공동주택 개발 계획에 따른 공사 발주 지연
건설과	도로	논공 삼리2리 안씩실 도시계획도로 개설	시설비	269,298,100	143,281,610	81,289,110	154,900,000	공사준공미도래(2022. 2. 7.)
건설과	도로	다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	시설비	232,835,000	164,996,480	164,996,480	67,838,520	보상 준비중으로 감정평가비 이월
건설과	도로	유가 유곡1리 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	16,193,100	16,193,100	33,806,900	용역완료 후 2022년도 보상통보 금액 이월
건설과	도로	유가 유곡1리(마을안길) 도시계획도로 개설	시설비	100,000,000	96,549,200	79,329,200	20,670,800	소규모재해영향평가 용역 준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	882,552,300	856,594,340	856,594,340	25,957,960	편입토지 및 지장물 보상협의 지연됨에 따라 보상비 이월
건설과	도로	논공 금포리 대진섬유 옆 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000	110,628,090	110,628,090	89,371,910	손실보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	439,692,260	246,198,300	83,606,000	148,920,000	공사준공기한 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	2,602,400			1,080,000	공사준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 강림2리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	시설비	499,565,330	217,346,980	107,760,600	390,159,400	공사준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 강림2리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	시설부대비	3,600,000	2,686,000	2,686,000	914,000	공사준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	시설비	2,130,876,740	1,871,372,970	1,671,152,970	259,503,770	공사준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	감리비	400,000,000	300,000,000	183,060,000	100,000,000	공사준공기한 미도래
건설과	도로	옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	68,800,500			50,000,000	편입토지 및 지장물 감정평가 후 보상통보 예정으로 보상비 이월
건설과	도로	다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로 개설	시설비	1,809,144,000	1,199,060,480	624,290,780	1,184,853,220	준공기간 미도래 (준공예정일: 2022. 09. 03.)
건설과	도로	옥포 본리1리(본리교 일원) 도시계획도로 개설	시설비	831,323,660	811,661,700	811,661,700	19,661,960	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보 예정에 따라 보상비 이월
건설과	도로	다사 서재리 선진섬유앞 도시계획도로 개설	시설비	770,464,880	667,202,760	435,044,760	335,420,120	공동주택 개발 계획에 따른 공사 발주 지연
건설과	도로	옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	59,693,900			50,000,000	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보 예정에 따라 보상비 이월
건설과	도로	다사 세천리(279-6번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	시설비	3,102,000,000	2,966,603,540	2,898,507,640	203,492,360	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률95.4% (편입용지29/18건 지장물56/45건)
건설과	도로	다사 서재휴먼시아~진흥아파트 도시계획도로 개설	시설비	1,644,317,000	1,189,454,910	859,775,910	784,541,090	준공기간 미도래
건설과	도로	옥포 신당리(옥포농협앞)도시계획도로 개설	시설비	714,608,500			496,400,000	편입토지 및 지장물 보상협의 지연됨에 따라 보상비 이월
건설과	도로	옥포 신당리(옥포농협앞)도시계획도로 개설	시설부대비	3,600,000			3,600,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	시설비	381,448,710	60,527,300	52,107,300	315,001,000	농번기 공사진행불가로 인해 공사지연으로 2022. 4. 준공 예정
건설과	도로	옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	2,520,000			2,520,000	농번기 공사진행불가로 인해 공사지연으로 2022. 4. 준공 예정
건설과	도로	다사 세천리(688-1번지선) 도시계획도로 개설	시설비	1,100,000,000	1,083,374,900	1,083,374,900	16,625,100	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률72.8% (편입용지9/5건 지장물19/14건)
건설과	도로	다사 달성군립도서관 북편 도시계획도로 개설	시설비	421,516,000	121,516,800	121,516,800	299,999,200	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률31.1%, (편입용지2/1건 지장물4/3건)
건설과	도로	옥포 송촌리 348번지선 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000			50,000,000	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보 예정에 따라 보상비 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	가창 동부순환도로 개설	시설비	1,979,346,100	1,155,139,050	1,155,139,050	824,207,050	보상 진행 중
건설과	도로	가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	시설비	2,251,019,220	2,216,211,030	1,574,024,040	676,995,180	보상 진행 중
건설과	도로	다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	시설비	244,282,000	55,587,300	55,587,300	188,694,700	보상 준비중으로 분할측량비용 및 감정평가비 이월 2022년 본예산 편성 후 보상 통보예정
건설과	도로	가창 행정리(511번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	시설비	538,135,500	319,642,940	319,642,940	100,000,000	보상협의 완료 및 내년 공사 발주 예정 (2022 본예산 공사비 확보)
건설과	도로	가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	시설비	978,984,530	717,807,570	717,807,570	261,176,960	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 86.0% (편입용지30/26건 지장물15/12건)
건설과	도로	가창 대일리(73번지선) 도시계획도로 개설	시설비	861,271,300	691,468,750	691,468,750	169,802,550	보상협의 완료 및 내년 공사 발주 예정 (2022 본예산 공사비 확보)
건설과	도로	가창 냉천리(830번지선) 도시계획도로 개설	시설비	593,913,300	18,634,600	18,634,600	300,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 70.8% (편입용지9/9건 지장물11/9건)
건설과	도로	가창 대일리(점촌마을) 도시계획도로 개설	시설비	1,870,132,230	830,460,170	830,460,170	1,039,672,060	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 56.6% (편입용지40/30건 지장물12/9건)
건설과	도로	다사 서동초교 앞 통학로 개설공사	시설비	750,000,000	703,420,400	703,420,400	46,579,600	보상 진행 중
건설과	도로	가창 삼산리(445번지선) 도시계획도로 개설	시설비	839,593,750	144,422,000	144,422,000	600,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 92.2% (편입용지22/20건 지장물12/9건)
건설과	도로	옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	시설비	896,053,200	516,329,710	516,329,710	379,723,490	편입토지 및 지장물 보상협의가 지연됨에 따라 보상비 이월
건설과	도로	가창 용계리(가창댐~대구텍) 우회도로 개설	시설비	100,000,000			100,000,000	보상 준비 중
건설과	도로	옥포 기세리 522번지선 도시계획도로 개설	시설비	70,571,600	24,584,310	24,584,310	45,000,000	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보함에 따라 보상비 이월
건설과	도로	옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	시설비	189,404,050			150,000,000	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보 예정에 따라 보상비 이월
건설과	도로	가창 옥분리(구진터 외곽) 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	22,721,000	22,721,000	27,279,000	보상 준비중으로 감정평가비 등 이월 (2022년 본예산 수립 후 보상통보예정)
건설과	도로	하빈 대평1리(하빈로179길)도시계획도로 개설	시설비	450,000,000	425,388,580	425,388,580	24,611,420	보상협의 완료 및 내년 공사 발주 예정 (2022 본예산 공사비 확보)
건설과	도로	옥포 기세리 666번지선 도시계획도로 개설	시설비	550,000,000	204,480,820	204,480,820	345,519,180	편입토지 및 지장물 감정평가 완료 후 보상통보함에 따라 보상비 이월
건설과	도로	하빈 무등1리(하빈로140길)도시계획도로 개설	시설비	100,000,000	1,104,400	1,104,400	50,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 82.3% (편입용지19/14건 지장물58/42건)
건설과	도로	옥포 간경2길 도시계획도로 개설	시설비	422,287,700	390,109,190	273,744,690	32,178,510	지장물 이설 지연 등으로 공사진행이 불가하여 공사 중지중으로 중지 해제 후 2022. 3. 준공 예정

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	하빈 현내2리 우체국 앞 도시계획도로 개설	시설비	384,953,260	228,593,330	193,680,280	167,374,250	준공기간 미도래
건설과	도로	옥포 교항1리 1263번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	82,557,900	3,670,000	3,670,000	50,000,000	21년도 보상완료됨에 따라 22년도 공사 발주예정으로 공사비 이월
건설과	도로	하빈 기곡1리(터실) 도시계획도로 개설	시설비	631,850,500	354,562,630	221,072,630	299,159,600	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 78.0% (편입용지37/24건 지장물91/69건)
건설과	도로	하빈 현내3리(911번지선) 도시계획도로 개설	시설비	739,328,400	509,000,010	318,175,310	421,153,090	준공기간 미도래
건설과	도로	옥포 간경리 731번지선 도시계획도로 개설	시설비	306,448,720	287,783,650	287,783,650	18,665,070	편입토지 및 지장물 보상협의가 지연됨에 따라 보상비 이월
건설과	도로	하빈 현내2리(하빈로86길) 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	729,348,840	513,155,640	416,991,210	294,801,200	보상협의 완료 및 금년 내 공사 발주 예정으로 공사비 이월
건설과	도로	하빈 감문1리 하빈로52길 도시계획도로 개설	시설비	825,263,240	463,407,920	243,134,720	582,128,520	보상협의 완료 및 금년 내 공사 발주 예정으로 공사비 이월
건설과	도로	하빈 감문1리 하빈로52길 도시계획도로 개설	시설부대비	2,500,000			2,500,000	공사비 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	도로	옥포 김흥리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	시설비	220,000,000	177,262,630	177,262,630	20,000,000	편입토지 및 지장물 보상협의가 지연됨에 따라 22년도 1차 수용재결 예정
건설과	도로	하빈 현내2리(571-2번지선) 도시계획도로 개설	시설비	300,000,000	126,907,420	126,907,420	173,092,580	보상협의 완료 및 내년 공사 발주 예정 (2022 본예산 공사비 확보)
건설과	도로	현풍 지리 지동3길 도시계획도로 개설	시설비	174,426,500			80,000,000	도시관리계획(도로) 결정(변경) 중으로 완료 후 변경되는 편입 필지를 확인하여 추가 보상협의 시행 필요에 따라 보상비 이월
건설과	도로	현풍 부1리 245번지선 도시계획도로 개설	시설비	446,950,160	288,959,560	92,579,560	336,976,000	공사준공기한 미도래 -21년도 11월 착공
건설과	도로	현풍 부1리 245번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	3,024,000	1,720,000	1,720,000	1,304,000	공사준공기한 미도래 -21년도 11월 착공
건설과	도로	현풍 중1리 285-5번지선 도시계획도로 개설	시설비	155,753,270	97,087,000	29,525,000	112,670,000	지장관로 이설 지연으로 인해 공사 중지 중으로 22년도 4월 준공 예정임.
건설과	도로	현풍 중1리 285-5번지선 도시계획도로 개설	시설부대비	1,008,000			1,008,000	지장관로 이설 지연으로 인해 공사 중지 중으로 22년도 4월 준공 예정임.
건설과	도로	현풍 신기리 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000	154,783,800	131,268,800	68,731,200	지적분할 측량 지연으로 관계기관협의 등 지연에 의해 용역 중지 중(용역준공기한 미도래)
건설과	도로	현풍 지리 827번지 일원 도시계획도로 개설	시설비	70,000,000	35,675,500	35,675,500	34,324,500	용역 완료 후 감정평가 및 보상비 이월
건설과	도로	구지 수리리 665~567번지간 도시계획도로개설	시설비	2,279,856,780	1,414,785,540	821,887,540	1,419,341,790	공사준공기한미도래
건설과	도로	구지 수리리 665~567번지간 도시계획도로개설	시설부대비	7,560,000	1,916,000	1,916,000	5,644,000	공사준공기한미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	옥포 간경리 757번지선 도시계획도로 개설	시설비	582,193,100	378,862,550	378,862,550	50,000,000	편입토지 및 지장물 보상협의가 지연됨에 따라 보상비 이월
건설과	도로	구지 가천리 마을외곽 도시계획도로 개설	시설비	100,000,000	80,496,000	56,340,000	43,660,000	도시관리계획 변경에 따른 과업구간 변경 후 22년도 용역준공예정으로 용역비 이월
건설과	도로	옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	388,743,250	368,780,100	368,780,100	19,963,150	편입토지 및 지장물 보상협의가 지연됨에 따라 보상비 이월 후 22년도 1차 수용재결 예정
건설과	도로	도시관리계획 신설 및 변경	시설비	655,490,900	570,094,970	532,257,970	123,232,930	용역기간 미도래
건설과	도로	가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	시설비	1,899,839,970	1,258,826,190	1,258,826,190	641,013,780	보상 진행 중
건설과	도로	가창 정대리(777번지선) 도시계획도로 개설	시설비	546,144,500	401,144,730	306,986,730	217,326,770	준공기간 미도래 (준공예정일: 2022. 5. 8.)
건설과	도로	가창 용계2리 도시계획도로 개설	시설비	1,009,071,000	332,099,800	332,099,800	676,971,200	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 11.5% (편입용지36/4건 지장물40/2건)
건설과	도로	가창 상원2리(436번지선) 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	13,235,200	13,235,200	36,764,800	보상 준비중으로 감정평가비 등 이월 (2022년 본예산 수립 후 보상통보예정)
건설과	도로	가창 삼산리(371번지선) 도시계획도로 개설	시설비	913,086,670	681,034,660	431,913,620	481,173,050	준공기간 미도래 (준공예정일: 2022. 11. 20.)
건설과	도로	가창 단산리(807번지선) 도시계획도로 개설	시설비	452,799,050	237,522,100	106,559,140	330,006,860	준공기간 미도래 (준공예정일: 2022. 06. 16.)
건설과	도로	가창 우록리(1423번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	시설비	1,000,000,000	252,620,180	252,620,180	747,379,820	준공기간 미도래
건설과	도로	가창 옥분리(파티마요양병원 주변) 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	2,640,000	2,640,000	47,360,000	보상 준비중으로 감정평가비 등 이월 (2022년 본예산 수립 후 보상통보예정)
건설과	도로	하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	시설비	160,000,000	85,471,860	85,471,860	74,528,140	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 95.7% (편입용지48/47건 지장물34/31건)
건설과	도로	하빈 대평2리 모산(하빈로172길) 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	355,446,310	286,543,650	286,543,650	10,000,000	보상협의 지연으로 인한 보상비 이월 보상률 98.4% (편입용지62/61건 지장물178/178건)
건설과	도로	현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	시설비	5,160,000,000	4,593,495,980	4,593,495,980	566,504,020	보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	현풍 성하2리(마을안길)도시계획도로 개설	시설비	568,419,220	125,001,600	125,001,600	398,200,000	추가편입토지 보상협의 중으로 인해 추가 보상비 이월
건설과	도로	현풍 성하2리(마을안길)도시계획도로 개설	시설부대비	1,800,000			1,800,000	추가편입토지 보상협의 중으로 인해 추가 보상비 이월
건설과	도로	현풍면 원교2리(KT&G옆) 도시계획도로 개설	시설비	338,056,000	160,340,880	91,265,880	100,000,000	지장물 추가 보상 및 지장전주 이설 지연으로 인해 공사 중지 중으로 22년도 3월 준공 예정임.
건설과	도로	현풍 대리 이양서원 진입 도시계획도로 개설	시설비	482,735,810	151,211,650	151,211,650	242,000,000	2021년도 특별조정교부금 3회추경반영 후 공사비 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	구지 고봉리(122-3번지선) 도시계획도로 개설	시설비	350,000,000	263,574,830	263,574,830	86,425,170	보상완료 후 2022년도 공사비 이월
건설과	도로	구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	623,889,170	516,004,830	516,004,830	107,884,340	손실보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	시설비	1,663,601,680	1,434,718,790	1,434,718,790	228,882,890	보상비 및 2022년도 공사비 이월
건설과	도로	구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	시설비	200,000,000	4,400,000	4,400,000	195,600,000	손실보상협의 지연에 따른 보상비 이월
건설과	도로	유가 음리 214-2번지선 도시계획도로 개설	시설비	55,000,000	55,000,000	45,149,000	9,851,000	용역준공기한미도래(2022. 2.)
건설과	도로	옥포 김흥2리 774번지선 도시계획도로 개설	시설비	20,000,000	11,286,000		20,000,000	용역준공미도래
건설과	도로	옥포 김흥2리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	19,602,000	6,000,000	44,000,000	용역준공미도래
건설과	도로	옥포 기세리 969-61번지선 도시계획도로 확장 공사	시설비	20,000,000	497,200	497,200	19,502,800	용역 완료 후 2022년도 보상통보 금액 이월
건설과	도로	구지 평촌리 568-4번지선 도시계획도로 개설	시설비	30,000,000	12,870,000		30,000,000	지적분할측량 지연으로 인해 용역 중지 중으로 용역준공미도래
건설과	도로	옥포 김흥3리 1292-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	28,980,600	9,378,600	40,621,400	용역준공미도래
건설과	도로	구지 평촌리 618번지선 도시계획도로 개설	시설비	30,000,000	21,560,000	9,680,000	20,320,000	지적분할측량 지연으로 인해 용역중지중으로 용역준공미도래
건설과	도로	구지 평촌리 456-3번지선 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	41,745,000	21,945,000	28,055,000	지적분할측량 지연으로 인해 용역중지중으로 용역준공미도래
건설과	도로	현풍 성하리 359-1번지선 도시계획도로 개설	시설비	50,000,000	26,642,000	26,642,000	15,000,000	용역준공미도래 및 지적분할 측량 수수료 지출금액 이월
건설과	도로	시특법 시설물 정기점검	시설비	119,710,000	89,210,300	89,210,300	30,499,000	2022년 구라2교, 원오교 점검에 따른 사업비 이월
건설과	도로	화원 대구교도소 앞 ~ 화원교 지중화사업	시설비	1,500,000,000			1,500,000,000	부산국토관리청 도로굴착 심의 부결에 따른 사업추진 지연
건설과	도로	화원 설화리 910-4번지선 도로정비	시설비	282,694,900	123,911,300	123,911,300	103,000,000	보상협의 지연으로 이월
건설과	도로	다사 군도6호선 박곡구간 위험도로 정비	시설비	1,500,000,000	1,261,983,900	89,467,000	1,410,533,000	묘지이전 및 토지보상 지연으로 인한 공기 변경 -당초 : 2019.11.15. ~ 2020.05.12. -변경 : 2019.11.15. ~ 2022.04.17
건설과	도로	논공 금포리 863-1번지 일원 도로정비	시설비	948,664,600	817,346,880	817,346,880	131,317,000	보상협의 지연으로 인한 해당사업비 이월
건설과	도로	비슬산 휴양림도로 확포장	시설비	7,038,413,350	6,134,064,730	4,386,881,330	2,477,960,620	공사준공기한 미도래(2023. 4. 15.)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	비슬산 휴양림도로 확포장	감리비	681,192,450	671,192,450	407,192,450	274,000,000	공사준공기한 미도래
건설과	도로	논공 금포리 917-2번지선(대진섬유옆) 도로확장	시설비	358,004,970	237,248,500	237,248,500	120,756,000	보상협의 지연으로 인한 해당사업비 이월
건설과	도로	유가 유곡리 1093번지 일원 도로정비	시설비	120,000,000	76,183,810	42,526,810	77,473,000	공사 중으로 준공기한 미도래하여 해당사업비 이월
건설과	도로	다사 세천리 887번지선 외 2개소 마을안길정비	시설비	574,766,600	129,370,800	129,370,800	390,000,000	보상협의 지연으로 인한 해당사업비 이월
건설과	도로	현풍 부리 511-9번지 일원 도로확장	시설비	700,000,000	354,732,110	354,732,110	345,267,000	보상협의 지연으로 해당사업비 이월
건설과	도로	하빈 하산2리 540번지선(하산교회 앞) 마을안길 정비	시설비	50,000,000	19,320,800	19,320,800	30,679,000	실시설계용역 후 보상 준비중
건설과	도로	구지 도동리 495번지 일원 마을안길 정비	시설비	70,000,000	66,500,000	49,794,400	10,000,000	공사 준공기한 미도래에 따른 이월 -2021.12.21. ~ 2022.03.20.
건설과	도로	유가 유곡1리(짐실) 마을안길 확포장	시설비	512,000,000	256,613,800	256,613,800	112,000,000	보상협의 지연으로 해당사업비 이월
건설과	도로	유가 가태2리(예연서원) 진입도로 확포장	시설비	514,602,400	430,864,560	430,864,560	83,737,000	보상협의 지연으로 인한 해당사업비 이월
건설과	도로	유가 쌍계1리 노후교량 정비	시설비	170,000,000	118,204,000	54,180,000	95,000,000	공사 중지 중으로 준공기한 미도래하여 해당사업비 이월
건설과	도로	옥포 신당리 1150-2번지선 도로정비공사	시설비	237,167,900	122,410,000	122,410,000	100,000,000	잔여지 매수협의중이나 민원 사정으로 인하여 보상비 이월
건설과	도로	옥포 미진이지비아 북편 연결도로 개설공사	시설비	200,000,000	14,022,800	14,022,800	185,977,000	보상협의 지연으로 인한 사업비 이월
건설과	도로	군도 3호선(기세리 인근) 위험도로 개선사업	시설비	550,000,000	503,085,000	301,851,000	248,149,000	용역준공기한미도래
건설과	도로	현풍 오산1리 138번지선 마을안길정비	시설비	343,261,710	284,116,240	187,398,130	155,863,000	공사 중지 중으로 준공기한 미도래하여 해당사업비 이월
건설과	도로	현풍 대리 645번지선 외 2개소 도로정비	시설비	551,263,000	284,320,900	160,382,000	309,618,000	공사 중으로 준공기한 미도래하여 해당사업비 이월
건설과	도로	현풍 대리 848번지선 외 3개소 도로정비	시설비	545,867,950	443,175,030	343,870,030	199,998,000	공사 중으로 준공기한 미도래하여 해당사업비 이월
건설과	도로	가창 군도15호선(우록리 1407-24번지선) 도로확장	시설비	289,764,040	213,584,420	108,783,420	168,272,000	공사 준공기한 미도래에 따른 이월 -2021.10.27. ~ 2022.04.24.
건설과	도로	가창 단산리 755-1번지선 외 1개소 마을안길 정비	시설비	265,507,700	190,236,060	190,236,060	75,271,000	보상협의 지연으로 인한 사업비 이월
건설과	도로	하빈 대평리 191번지선 외 2개소 마을안길 정비	시설비	338,189,600	16,013,700	16,013,700	300,000,000	보상 준비중으로 사업비 이월

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
건설과	도로	하빈 동곡2리 국도 접속도로 가각부 정비	시설비	334,186,000	1,661,000	1,661,000	310,000,000	보상협의 지연으로 사업비 이월
건설과	도로	하빈 동곡2리(마을회관 뒤편) 1142번지선 마을안길 정비	시설비	237,802,400	7,245,000	7,245,000	110,000,000	보상협의 지연으로 인한 사업비 이월
건설과	도로	구지 예현리 301~310간(예현마을) 도로확장	시설비	320,000,000	201,164,070	129,732,070	190,267,000	보상협의 지연으로 공사중지 중이며 해당사업비 이월
건설과	도로	구지 내리 374-1번지선 외 1개소 마을안길 확포장	시설비	631,583,600	146,702,320	146,702,320	484,881,000	보상협의 지연으로 사업비 이월
건설과	도로	유가 한정리 596-53번지 일원 도로확장	시설비	100,000,000	47,718,400	47,718,400	52,281,000	보상협의 지연으로 인한 해당사업비 이월
건설과	도로	다사 서재리 서동초교 앞 인도설치공사	시설비	119,136,000			119,136,000	2회추경 예산으로, 경찰청 협의 결과 반영하여 설계수정으로 사업비 이월
건설과	도로	구지초등학교 통학로 인도정비공사	시설비	80,000,000	7,702,000	7,702,000	72,298,000	2회 추경 이후 실시설계 용역완료하여 2022년 1월 공사발주 예정 (공사비 이월)
안전방재과	재난방재□민방위	재난안전관리	연구용역비	1,121,432,000	496,522,000	316,528,000	254,814,000	○소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역 : 2회추경 예산으로 행정절차 이행 후 용역 착수(2022.2.)예정 ○다사서재2 자연재해 위험개선지구 정비사업 사후분석,평가용역 : 용역기간 미도래(2021.07.14.~2022.05.13.)
안전방재과	수자원	지방하천정비(현풍천 재해예방사업)(전환사업)	시설비	3,153,228,820	2,654,691,730	1,750,763,730	1,389,081,040	공사 준공기한 미도래 (2020.01.~2024.03.)
안전방재과	수자원	지방하천정비(현풍천 재해예방사업)(전환사업)	시설부대비	5,940,000			5,940,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환사업)	시설비	4,610,876,920	3,562,291,200	3,031,124,200	1,022,922,080	공사 준공기한 미도래 (2020.01.~2024.01.)
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환사업)	감리비	768,600,000	615,400,000	580,290,000	188,310,000	본 사업 이월에 따른 감리비 이월
안전방재과	수자원	지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환사업)	시설부대비	20,401,300	11,738,900	11,738,900	6,382,800	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	옥포 김흥리 만수소하천 정비공사	시설비	150,000,000	65,008,800	65,008,800	84,991,000	보상협의 중으로 사업비 이월
안전방재과	수자원	구지 징리 688번지선 징리 소하천 정비공사(전환사업)	시설비	949,500,000	33,585,200	33,585,200	915,914,800	보상 협의중으로 보상비 이월
안전방재과	수자원	구지 징리 688번지선 징리 소하천 정비공사(전환사업)	시설부대비	500,000			500,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	유가 가태리 176번지선 가태소하천 정비공사(전환사업)	시설비	599,500,000	404,074,100	184,431,100	415,068,900	공사 준공기한 미도래 (2021.12.~2022.06.)
안전방재과	수자원	유가 가태리 176번지선 가태소하천 정비공사(전환사업)	시설부대비	500,000			500,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	옥포 강림리 553-1번지선 강림소하천 정비공사(전환사업)	시설비	599,500,000	494,930,290	494,930,290	104,569,710	2022년 공사비 부족분 확보 후 사업 시행 예정

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
안전방재과	수자원	옥포 강림리 553-1번지선 강림소하천 정비공사(전환사업)	시설부대비	500,000			500,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	하빈 무등2리 1251-1번지선 낫골소하천 정비공사(전환사업)	시설비	499,500,000	201,645,660	46,790,100	452,709,900	공사 준공기한 미도래 (2021.12.~2022.03.)
안전방재과	수자원	하빈 무등2리 1251-1번지선 낫골소하천 정비공사(전환사업)	시설부대비	500,000			500,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	옥포 김흥리 665번지선 집푼골소하천 정비공사(전환사업)	시설비	449,500,000	39,105,800	23,790,800	425,709,200	- 보상협의 지연 - 2022년 1월 발주 예정
안전방재과	수자원	옥포 김흥리 665번지선 집푼골소하천 정비공사(전환사업)	시설부대비	500,000			500,000	본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
안전방재과	수자원	가창 상원리 220번지 상원소하천 정비공사(전환사업)	시설비	220,000,000	44,641,300	44,641,300	175,358,700	2022년 공사비 부족분 확보 후 사업 시행 예정
안전방재과	수자원	구지 평촌리 847-8번지선 차천 정비공사	시설비	210,000,000	140,924,150	74,446,070	135,553,930	공사 준공기한 미도래 (2021.12. ~ 2022.04.)
안전방재과	수자원	가창 행정리 1061-7번지선 흥덕소하천 정비	시설비	30,000,000	22,668,300	22,668,300	7,331,700	행정절차 수행 중으로 보상비 이월
안전방재과	수자원	논공 노이1리 503번지선 대바골소하천 정비	시설비	200,000,000	160,309,210	61,821,410	138,178,590	공사 준공기한 미도래 (2021.11.~2022.05.)
안전방재과	수자원	옥포 송촌리 24번지선 본리천 정비	시설비	30,000,000	26,666,800	26,666,800	3,333,200	2022년 공사비 부족분 확보 후 사업 시행 예정
안전방재과	수자원	가창 상원리 606번지선 상원소하천 정비공사	시설비	30,000,000	11,528,500	797,500	29,202,500	현재 용역 진행중으로 용역 완료기한(22.01.02.) 미도래
안전방재과	수자원	다사 매곡리 1099-1번지일원 호안블럭 복구공사	시설비	120,000,000	100,924,540	100,924,540	19,075,460	공사 준공기한 미도래 (2021.11.~2022.02.)
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(하빈 기곡리 829번지 일원 용수관로 정비공사)	시설비	297,840,000	208,083,600	66,216,000	231,624,000	공사 준공기한 미도래 (2022년 2월 28일 준공예정)
도시과	지역및도시	개발제한구역 주민지원사업(하빈 기곡리 829번지 일원 용수관로 정비공사)	시설부대비	2,160,000	900,000	900,000	1,260,000	공사 준공기한 미도래 (2022년 2월 28일 준공예정)
도시과	지역및도시	현풍 경관광장 도시계획시설사업	시설비	12,418,080,000	4,457,639,240	4,457,639,240	7,906,380,000	2022년도 2월~4월 토지수용재결에 따른 보상비 이월
도시과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업(1,000년의 화원, 다시 꽃피다)	시설비	2,686,824,460	2,507,448,680	2,337,973,040	348,851,420	○ 2023년 준공(예정)사업으로 2021년 사업량 중 거점시설(소통봄꿈) 건축 실시 설계 용역기간(2021. 11. ~ 2022. 5.) 미도래
도시과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업(1,000년의 화원, 다시 꽃피다)	시설부대비	13,600,000	12,725,990	12,725,990	874,010	○ 2023년 준공(예정)사업으로 2021년 사업량 중 거점시설(소통봄꿈) 건축 실시 설계 용역기간(2021. 11. ~ 2022. 5.) 미도래
도시과	지역및도시	설화명곡역 주변 간판개선사업	시설비	456,688,000	353,715,490	264,175,000	192,513,000	사업완료 기한 미도래
도시과	지역및도시	설화명곡역 주변 간판개선사업	시설부대비	3,312,000			3,312,000	준공기한 미도래

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시과	지역및도시	달성-고령 상생 사문진교 야간경관개선사업	시설비	52,737,000	52,737,000		52,737,000	기본 및 실시설계 용역 발주, 용역 완료기한 미도래
도시정비과	농업□농촌	가창 단산리(206번지선 외 1개소) 농로 개설공사	시설비	55,000,000	6,231,600	6,231,600	37,000,000	보상협의 지연(4필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 김흥리(1067번지선) 농로개설공사	시설비	274,643,970	180,579,000	180,579,000	94,064,970	보상협의 지연(17필지중 12필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 본리1리 농로 포장공사	시설비	80,519,700	75,856,800	75,856,800	4,662,900	보상협의 지연(지장물 5건 중 5건 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 우록리(1317번지선) 농로개설공사	시설비	117,471,400	37,976,000	37,976,000	50,000,000	보상협의 지연(5필지중 3필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 우록리(303번지선) 농로개설공사	시설비	50,000,000	47,791,300	47,791,300	2,208,700	보상협의 지연(5필지중 5필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	유가 도의리(975-4번지선) 농로개설공사	시설비	180,000,000	151,506,500	151,506,500	28,493,500	보상협의 지연(11필지중 2필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 하산2리(44-3번지선 외 1개소) 농로정비공사	시설비	113,466,490	37,613,350	37,613,350	45,984,000	보상협의 지연(16필지중 7필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	화원 성산리(363-1번지선) 구거정비공사	시설비	300,000,000	176,177,000	82,941,000	217,059,000	농작물로 진입로 확보 불가로 수확후 재개가능
도시정비과	농업□농촌	논공 노이리(647번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	57,126,100	57,126,100	22,873,900	보상협의 지연(3필지중 1필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	다사 문양리(165번지선) 농로정비공사	시설비	200,000,000	135,795,940	135,795,940	64,204,060	보상협의 지연(22필지중 10필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	유가 가태2리(118번지선) 농로 확포장공사	시설비	290,000,000	238,287,750	238,287,750	51,712,250	보상협의 지연(14필지중 5필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	유가 한정2리(243-3번지선) 농로 확포장공사	시설비	80,000,000	21,577,600	21,577,600	58,422,400	보상협의 지연(4필지중 1필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	옥포 송촌리(61번지선) 농로 개설공사	시설비	80,000,000	6,241,400	6,241,400	65,000,000	노선계획 수정요구 민원으로 인한 공사추진 지연
도시정비과	농업□농촌	옥포 김흥리(690번지선) 농로확포장공사	시설비	100,000,000	46,150,800	46,150,800	53,849,200	노선계획 수정요구 민원으로 인한 공사추진 지연
도시정비과	농업□농촌	현풍 오산2리(881번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	63,199,030	63,199,030	16,800,970	보상협의 지연(6필지중 3필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 오리(280번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	64,689,400	64,689,400	15,310,000	입구보상 완료 - 입구보상 잔여금 이월 - 보상금액 예산확보 필요
도시정비과	농업□농촌	가창 대일리(811번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	75,508,500	75,508,500	4,491,500	입구보상 완료 - 입구보상 잔여금 이월 - 보상금액 예산확보 필요
도시정비과	농업□농촌	가창 우록리(1556번지선) 농로개설공사	시설비	280,000,000	258,143,000	258,143,000	21,857,000	보상협의 지연 (지장물 10건 중 10건 미협의)

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
도시정비과	농업□농촌	가창 주리(20번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	66,931,900	66,931,900	13,000,000	입구보상 완료 - 입구보상 잔여금 이월 - 보상금액 예산확보 필요
도시정비과	농업□농촌	가창 상원리(199번지선) 농로개설공사	시설비	150,000,000	29,469,300	7,706,300	140,000,000	구거 무단점용으로 착공지연
도시정비과	농업□농촌	가창 상원리(766번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	42,510,300	42,510,300	37,489,000	보상협의 지연(5필지중 2필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	가창 주리(141번지선) 농로개설공사	시설비	100,000,000	54,085,000	54,085,000	45,915,000	보상협의 지연(9필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 감문리(897-4번지선 외 1개소) 농로개설공사	시설비	100,000,000	17,470,200	17,470,200	82,529,800	감정평가비 및 토지 보상비
도시정비과	농업□농촌	하빈 봉촌리(489-32번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	65,871,390	65,871,390	14,128,610	보상협의 지연(5필지중 1필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 하산리(202번지선) 농로개설공사	시설비	80,000,000	74,248,700	74,248,700	5,751,300	보상협의 지연(7필지중 2필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	구지 응암리(22번지선) 농로확포장공사	시설비	80,000,000	23,134,970	23,134,970	56,865,000	보상협의 지연(5필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	구지 평촌리(216-2번지선 외 1개소) 농로개설공사	시설비	100,000,000	82,305,100	82,305,100	17,694,900	보상협의 지연(12필지중 2필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	구지 평촌리(381-4번지선) 농로정비공사	시설비	50,000,000	17,314,900	17,314,900	32,685,100	보상협의 지연(3필지중 2필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	본리지 외 4개소 조기경보시스템 설치공사	시설비	1,750,000,000	1,243,644,000	900,945,000	849,055,000	공사기간 미도래 (2021.10.27~2022.03.25)
도시정비과	농업□농촌	가창 행정1리(767번지선) 농로개설공사	시설비	50,000,000	5,322,900	5,322,900	44,677,000	보상협의 지연(4필지중 4필 미협의)
도시정비과	농업□농촌	하빈 기곡리(646번지선) 농로 및 구거정비공사	시설비	70,000,000	5,373,900	5,373,900	64,626,100	사업구간 내 경작중인 지주와 협의 지연
도시정비과	농업□농촌	옥포 김흥리(1140번지선) 암반관정 설치공사	시설비	150,000,000	84,576,500	30,196,500	80,000,000	농작물 수확으로 인하여 준공지연
도시정비과	농업□농촌	화원 성산설화들 관정 설치공사	시설비	80,000,000	61,341,700	22,000,000	50,000,000	민원 발생으로 관정설치 위치 협의 필요
도시정비과	농업□농촌	도시생활환경개선(하빈, 옥포 농촌생활환경정비)(전환사업)	시설비	1,491,000,000	1,194,026,240	987,343,940	503,656,060	준공기한 미도래 (완공예정일 : 2022.06.)
도시정비과	농업□농촌	도시생활환경개선(유가, 구지 농촌생활환경정비)(전환사업)	시설비	750,387,440	452,527,540	452,527,540	297,859,900	보상협의 지연 (6필지중 1필 미협의)
정책사업과	문화및관광일반	달성 북부권 복합행정시설 건립	시설비	905,000,000	792,254,060	551,758,760	353,241,000	공유재산관리계획 변경승인('21.2.), 공공건축 사전검토 이행 및 공공건축심의위원회 심의('21.6.)등 사전절차 이행 지연 -기본 및 실시설계용역 : '21. 11. ~'22. 5.
문화체육과	체육	달성 테크노 스포츠 센터 건립	시설비	4,708,750,200	708,750,200	157,375,200	4,000,000,000	행정절차로 인한 사업 일정 지연

과 목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목
문화체육과	체육	달성 테크노 스포츠 센터 건립	감리비	2,428,394,800			1,500,000,000	행정절차로 인한 사업 일정 지연
문화체육과	체육	논공 위천파크골프장 조성 공사	시설비	219,350,000	19,350,000	19,350,000	200,000,000	부산지방국토관리청과 하천점용허가(변경) 협의 지연으로 공사착공 지연
문화체육과	체육	달성군민운동장 리모델링 사업	시설비	2,769,000,000	70,992,000	56,680,000	2,669,000,000	1회추경 예산으로 실시설계 완료(11월) 후 행정절차 이행기간 소요로 공사기간 부족
문화체육과	체육	가창 옥분리 주차장 조성공사	시설비	400,000,000	74,838,000	74,838,000	325,162,000	1회추경 예산으로 실시설계 완료(12월) 후 공사기간 부족
문화체육과	체육	옥포 강변 파크골프장 조성	시설비	66,000,000			66,000,000	2회추경 예산으로 유관기관 사전협의 후 용역발주 예정
관광과	관광	열린관광지 조성사업	시설비	1,226,000,000	245,749,090	162,785,000	1,031,548,000	한국관광공사 컨설팅 및 검수 지연으로 인한 사업기간 연장 -당초 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31. -변경 : 2021.01.01 ~ 2022.03.31.
교육청소년과	노인□청소년	청소년 문화의 집 운영 지원	자산및물품취득비	30,000,000			30,000,000	최초 구입예정이었던 스타렉스 차량의 단종으로 차량구입 시기가 지연되었고, 추후 새로나온 스타리아 차량을 구매요청 하였을때는 금년 내에 생산이 가능할 것으로 예상하였으나, 코로나19로 인해 차량용 반도체 수급이 지연됨에 따라 차량 생산일정이 2022년 2월로 연기됨.
보건과	보건의료	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비	477,985,000	137,499,000	137,499,000	252,128,000	국비 일부 미교부, 실시 설계 완료(11월 중) 후 공사 입찰 등의 사전절차 이행으로 인한 공사 시행 지연이 예상됨에 따라 기 집행한 설계 용역비를 제외한 사업비 이월