사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
계	536,809,848,000			150,225,897,470		88,025,422,148	13,385,000,000	74,640,422,148
달성군 여성문화복지센터 증축	8,220,000,000	2019-01-01 ~ 2022-06-30	기본 및 실시설계 용역 착수	280,721,000	기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사착공	8,220,000,000		8,220,000,000		공사 착공('21.6.23)철골세우기 완료 및 일부 바닥층 슬라브 타설완료	50	회계과
	지하1층/지상8층(2,920□)
안전 영상정보 인프라(CCTV)구축	9,814,599,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	CCTV 설치 및 자가통신망 구축	3,687,623,810	CCTV 설치 및 자가통신망 구축	3,687,623,810		3,687,623,810		CCTV설치 및 자가통신망 구축중	38	정보통신과
	CCTV 설치 및 자가통신망 구축
부리어린이공원 조성	3,600,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-31	공원조성 A=4,395□	3,200,000,000	공원조성 A=4,395□	400,000,000		400,000,000		사유지 매입 완료	100	공원녹지과
	공원조성 A=4,395□
상리근린공원 조성	2,800,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	공원조성 A=28,945□	2,800,000,000	공원조성 A=28,945□					사유지 8필지 중 6필지 토지매입 완료	32	공원녹지과
	공원조성 A=28,945□
화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	4,500,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=8m, L=1,267m	850,000,000	B=8m, L=1,267m	200,000,000		200,000,000		공사중	70	건설과
	B=8m, L=1,267m
달성군청~옥포강림임대주택단지간 도로건설	15,500,000,000	2018-07-12 ~ 2022-07-31	B=30m,L=560m	6,629,590,000	B=30m,L=560m					공사완료(1공구),공사중(2공구)	70	건설과
	B=30m,L=560m
옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	16,400,000,000	2017-07-30 ~ 2022-07-31	B=24.7m,L=1,140m	7,649,000,000	B=24.7m,L=1,140m	751,000,000		751,000,000		공사중	70	건설과
	B=24.7m,L=1,140m
가창 동부순환도로 개설	13,500,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	B=12m,L=1,700m	2,440,000,000	B=12m,L=1,700m	1,500,000,000		1,500,000,000		보상중	45	건설과
	B=12m,L=1,700m
가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설	15,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	B=15m,L=2,170m	1,800,000,000	B=15m,L=2,170m	1,894,000,000		1,894,000,000		보상중	45	건설과
	B=15m,L=2,170m

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	6,700,000,000	2017-01-01 ~ 2019-12-31	B=8(10)m,L=1,130m	3,120,000,000	B=8(10)m,L=1,130m	1,900,000,000		1,900,000,000		공사중	60	건설과
	B=8(10)m,L=1,130m
하빈 군도7호선(감문~대평) 도로확장	18,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	B=19.5m,L=4,500m	700,000,000	B=19.5m,L=4,500m					설계중	5	건설과
	B=19.5m,L=4,500m
도로굴착복구	11,500,000,000	2019-02-01 ~ 2020-01-31			굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□	3,000,000,000		3,000,000,000		공사중	99	건설과
	굴착복구 및 덧씌우기 A=59,056□
비슬산 휴양림도로 확포장	18,500,000,000	2015-11-23 ~ 2023-04-30	B=15~18m L=2,261m	4,100,000,000	B=15~18m L=2,261m	5,500,000,000		5,500,000,000		공사중	70	건설과
	B=15~18m, L=2,261m
유가 초곡리 도로확포장	7,420,000,000	2015-08-11 ~ 2021-08-31	B=8m,L=2,271m	4,170,000,000	B=8m,L=2,271m	70,000,000		70,000,000		준공	100	건설과
	B=8m,L=2,271m
가창 동서 연결도로 개설	3,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	B=8.0m L=5.3km		B=8.0m L=5.3km					설계중	5	건설과
	B=8.0m L=5.3km
가창 최정산 도로공사	16,335,249,000	2016-08-01 ~ 2021-02-28	B=8~10m L=7,600m	12,146,228,000	B=8~10m L=7,600m					준공	100	건설과
	B=8~10m L=7,600m
지방하천정비(현풍천 재해예방사업)(전환사업)	14,939,000,000	2015-01-01 ~ 2024-03-31	유지용수공 1식	6,200,000,000	상리교 재가설	4,908,405,090		4,908,405,090		1차공사 준공, 2차공사 발주(교량공-상리교)	35	안전방재과
	하천정비L=5.3km, 교량공2개소, 유지수확보(펌프장) 1식
지방하천정비(기세곡천 재해예방사업)(전환사업)	36,281,000,000	2018-01-01 ~ 2024-01-31	유지용수공 1식, 호안공 및 데크로드공	20,307,000,000	가동보 2개소(기세1보, 기세2보), 호안공 등	6,376,725,120		6,376,725,120		1차공사 준공, 2차공사 준공, 3차공사 발주(호안공 및 가동보 2개소)	62	안전방재과
	하천정비 L=8.8km, 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 유지수확보(펌프장) 1식

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
도시재생 뉴딜사업(1,000년의 화원, 다시 꽃피다)	24,150,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31			부지매입(3필지), 건축기획 용역 등	2,782,075,540	2,415,000,000	367,075,540		정상추진(주차장 부지매입 협의 중, 설계공모 추진 등)	11	도시과
	천내1,2리 일원(150,000□) : 거점시설 3개소, 주차장 1, 주민역량강화교육 등
도시생활환경개선(하빈 PMZ 평화기념마을 조성)(전환)(전환사업)	6,586,000,000	2016-01-01 ~ 2021-12-31	· 3구간 하빈PMZ 평화예술센터 건립	6,424,000,000	· 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성 · 2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성 · 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성	162,000,000		162,000,000		정상추진	85	도시과
	· 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성 · 2구간 : 하천둑길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성 · 3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 조성 · 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성
도시생활환경개선(낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업)(전환)(전환사업)	6,000,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□	3,886,000,000	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□	2,114,000,000		2,114,000,000		정상추진(선비문화체험관 착공, 기세리 주민쉼터 조성사업 실시설계중)	47	도시과
	옥연지, 기세마을, 용연사길 일대 6.5□
경찰특공대 이전 부지 교환	15,100,000,000	2014-04-01 ~ 2021-12-31	보상비 및 기타비용	14,479,917,130	보상금 지급 및 부지교환	365,374,198		365,374,198		수용재결 완료, 부지교환 완료, 보상금 공탁	100	정책사업과
	면적 94,798□ 65필지
달성 화석박물관 건립(전환사업)	23,700,000,000	2016-12-01 ~ 2023-05-31	건축설계용역 등 시행	549,575,180	건축설계용역 등 시행	11,645,424,820	4,417,000,000	7,228,424,820		건축허가 진행 중	50	정책사업과
	연면적5,915.68□, 지하1층/지상3층
달성군 교육문화복지센터 건립	32,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-03-31	건축설계용역 등 시행	945,198,140	설계용역 완료 및 공사 시행	12,512,801,860	2,646,000,000	9,866,801,860		공사 진행 중	60	정책사업과
	연면적13,757.14□ 지하1/지상3층

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
					사업량	사 업 비
	총사업량		사업량	사업비
						계	국비	지방비	기타
달성 북부권 복합행정시설 건립	40,000,000,000	2018-03-01 ~ 2023-08-31	부지매입	21,000,000,000	설계용역 등 시행	353,241,000		353,241,000		설계용역 진행중	25	정책사업과
	연면적 5,566.91□(1,683평), 지하1층/지상3층
화원공공복합청사 리뉴얼사업	79,990,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	부지매입 및 설계용역 시행	14,480,000,000	설계용역 등 시행	4,100,000,000		4,100,000,000		설계용역 진행중	40	정책사업과
	18,562□,, 지하2층/지상7층
비슬관광지 조성	33,900,000,000	2016-06-01 ~ 2023-12-31	주차장조성공사, 비슬산관광지 조성계획수립, 주차장정비공사, 손실보상금 협의	7,887,123,710	수용재결 완료	3,620,181,320		3,620,181,320		비슬산관광지 실시설계 중	42	정책사업과
	관광지 조성 250,800□정도
참꽃케이블카 설치	31,000,000,000	2016-05-01 ~ 2022-06-30	군립공원계획 결정(변경) 및 도시관리계획(궤도)결정 용역	43,400,000	기본 및 실시설계, 환경영향평가	622,569,390		622,569,390		기본 및 실시설계, 환경영향평가 중	30	정책사업과
	케이블카 설치 연장1.9km
달성 테크노 스포츠 센터 건립	11,300,000,000	2019-01-01 ~ 2023-06-30	설계용역 계약 수수료 및 보상비 지출	157,375,200	실시설계용역 및 심의 등 수수료 지출	5,500,000,000	1,300,000,000	4,200,000,000		정상추진	5	문화체육과
다사체육공원 생활체육센터 건립	2,500,000,000	2018-11-01 ~ 2021-12-31	설계용역 계약 수수료 및 보상비 지출	236,465,300	사업취소					사업취소	5	문화체육과
	사업취소
달성군민운동장 리모델링 사업	2,674,000,000	2020-05-01 ~ 2022-07-31	실시설계용역	56,680,000	토목조경 공사 시행 및 폐기물 용역등 수수료 지출	2,174,000,000	774,000,000	1,400,000,000		정상추진	20	문화체육과
	군민운동장 시설물 리모델링 1식
공공도서관건립지원(달성교육문화복지센터 건립)	5,500,000,000	2019-09-01 ~ 2023-03-31				3,666,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000		공사진행(2021. 5. : 착공)	60	교육청소년과
	공공도서관 건립(3,130□)