개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군 화석박물관 건립

담당자

정책사업과

배태랑☎668-2282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 보유 화석유물을 무상양수, 국립대구과학관 인근에 화석박물       관을 건립하여 학생들의 교육의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 8.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 부지면적 8,980㎡, 연면적 6,020.69㎡(지하1층~지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,700백만원 정도

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	23,700	1,151	284	14,526	8,340
국 비	7,754		217	5,465	1,776
시 도 비
시군구비	15,946	1,151	67	9,060	6,564
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 2017. 1. : 화석박물관 기본계획 수립

○ 2019. 5. : 화석박물관 건립 타당성조사 보완용역 시행

○ 2019. 10. : 중앙투자심사 승인

○ 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역 실시(~‘22. 7.)

○ 2022. 4. : 착공, 감리용역 시행

○ 2022. 6. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 2. : 골조공사 완료

○ 2023. 8. : 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군 교육문화복지센터 건립

담당자

정책사업과

조영운(☎668-2283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 테크노폴리스 및 대구 국가산업단지 조성으로 급증하는 남부권 주민들의 교육·문화·복지 수요에 적극 대응, 테크노폴리스 부지 내 교육·문화·복지 종합센터 건립으로 군민들의 교육열 및 문화욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 현풍읍 중리 506번지

○ 규 모 : 부지면적 10,737㎡, 연면적 13,757.14㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,000백만원 정도

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	31,970	5,532	7,926	18,512	-
국 비	4,250	1,416	1,230	1,604	-
시 도 비	2,125	708	615	802	-
시군구비	25,595	3,408	6,081	16,106	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2018.  4. : 달성군 교육문화복지센터 건립계획 수립

○ 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완) 용역

○ 2019.  8. : 생활SOC복합화 공모사업 신청 및 선정(‘19.10.)

○ 2019. 12. : 중앙투자심사 승인

○ 2020.  4. : 기본 및 실시설계 용역 실시(~‘21. 3.)

○ 2021.  5. : 착공, 감리용역 시행(21개월)

○ 2022.  6. : 전체 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 2023.  3. : 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화원공공복합청사 리뉴얼사업

담당자

정책사업과 심상윤(☎668-3993)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 화원읍 행정복지센터(1990년 준공)는 보건지소(1987년 준공)와 작은도서관/군민독서실(2003년 준공)로 구성되어 있으며, 사용승인 후 30년 이상 경과하여 시설이 노후화됨

○ 시설 노후화, 휴식·문화 활동 공간 협소로 주민 이용률이 낮음

○ 2010년 이후 화원읍을 비롯한 반경 5km이내 지역인 옥포읍, 진천동의 인구가 급격히 증가하고 있는 추세로 행정·복지적 수요를 뒷받침할 공공시설의 건립이 요구됨

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 6. ∼ 2024. 8.

○ 위 치 : 화원읍 천내리 426-1번지 일원

○ 규 모 : 연면적 18,562㎡(지하2층/지상7층) ※작은도서관 리모델링(1,618㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 79,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	79,990	13,580	836	4,100	61,474
국 비
시 도 비
시군구비	79,990	13,580	836	4,100	61,474
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2014.  6. : 화원읍행정복지센터 개발계획 기본구상 용역

○ 2016. 12. : 사업기본계획 수립

○ 2020.  4. : 사업계획 변경 및 타당성조사 의뢰

○ 2021.  1. : 타당성조사 완료

○ 2021.  3. : 시 지방재정투자심사

○ 2021.  6. : 설계공모(조달청)

○ 2021.  8. : 설계공모 당선작 선정

○ 2021.  9. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2022.  5. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022.  6. : 착공

○ 2024.  8. : 준공 및 개관준비

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군여성문화복지센터 증축

담당자

회계과 신민재(☎668-8372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여성문화복지센터 증축을 통해 본관 및 신축 건물을 활용한 평생교육

능력 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 화원읍 설화리 556-15 외 1필지

○ 규 모 : 연면적 2,920㎡, 지하1층/지상8층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,590	142	3,505	4,943
국 비
시 도 비
시군구비	8,590	142	3,505	4,943	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ 2019.  9. 기본계획 수립 및 지방재정계획 심의(투자심사)

○ 2019. 10. 공유재산 관리계획 심의 및 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 11. ~ 2020. 3. 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2020.  4. 공공건축심의

○ 2020.  9. ~ 2021. 6. 기본 및 실시설계 용역

○ 2021.  6. 착공

□ 향후계획

○ 2022.  6. 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 연면적 2,600㎡, 지하1층/지상7층 ➜ 연면적 2920㎡, 지하1층/지상8층

※ 기본설계 확정에 따른 연면적 및 층수 증가

○ 사 업 비 : 8,400백만원 ➜ 8,590백만원

※ 건설사업관리 방식 적용에 따른 감리비 증가

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화물자동차 공영차고지 건설지원

담당자

교통과 전준홍(☎668-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 운수사업자에게 주차공간을 제공하여 차고지 난을 해소함으로써 도심 내 불법 주‧박차에 따른 안전사고 예방 및 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2024.

○ 위 치 : 달성군 화원옥포IC 일원(화원읍 설화리, 옥포읍 간경리)

○ 규 모 : 79,574㎡ 정도(주차면 612면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,000백만원

,(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	49,000	7,283	13,389	12,514.5	15,813.5
국 비	950	950		-	-
시 도 비	40,700	5,216.5	11,380	8,290	15,813.5
시군구비	7,350	1,116.5	2,009	4,224.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본구상 및 타당성 용역 완료	: 2016. 8월

○ GB관리계획변경 및 도시관리계획시설 결정 용역 착수	: 2017. 5월

○ 2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경 신청	: 2018. 3월

○ 지방도시계획위원회 심의(GB관리계획변경)	: 2019. 1월

○ GB관리계획변경 승인 승인(국토부)	: 2019.11월

○ 지방재정 중앙 투자사업 재심사(조건부 승인)	: 2020. 4월

○ 기본 및 실시 설계 용역 착수	: 2020. 5월

○ 지방도시계획위원회(도시계획시설결정) 심의 결정            : 2020. 6월

○ 재해영향평가, 소규모환경영향평가 등 준공	: 2021. 3월

○ 중앙토지수용위원회 사업인정 협의	: 2021. 4월

○ 설계의 경제성(VE) 검토 완료	: 2021.10월

○ 손실보상 협의 실시	: 2021.11월

○ 건설기술심의(100억 이상) 완료	: 2021.12월

○ 제4차 지방토지수용위원회 개최	: 2022. 6월

○ 제4차 재결보상금 지급 및 공탁	: 2022. 8월

□ 향후계획

○ 제5~6차 재결보상금 지급 및 공탁	: 2022.12월

○ 문화재 시굴조사 실시	: 2023. 1월

○ 공사착공 및 준공	: 2023. 7월

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2016~2022년 / (변경) 2016~2024년

○ 사 업 비 : (당초) 400억원(국 9.5, 시 330.5, 군 60)
(변경) 490억원(국 9.5, 시 407, 군 73.5)

* 변경사유 : ·토지지가 상승에 따른 보상비 및 GB부담금 상승

·물가변동에 따른 건설자재비 상승

·국·공유지 무상귀속 불가에 따른 유상매입비 반영

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시) - 사업별로 별지 작성

사업명

화원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설

담당자

건설과 성대은(☎668-3045)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의       질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하       고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 화원 구라리 891번지선 일원

○ 규 모 :  B=6~8m, L=730m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,160	57	985	1,500	2,618
국 비
시 도 비
시군구비	5,160	57	985	1,500	2,618
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 04. : 실시설계 용역 완료

○ 2020. 05. : 실시계획 고시

○ 2021. 01. : 보상통보

□ 향후계획

○ 보상 협의 진행

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시) - 사업별로 별지 작성

사업명

화원 구라리 (산54-3번지선) 도시계획도로 개설

담당자

건설과 성대은(☎668-3045)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의       질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하       고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 화원 구라리 산54-3번지선 일원

○ 규 모 : B=8~10m, L=400m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,500	20	1,441	1,500	3,539
국 비
시 도 비
시군구비	6,500	20	1,441	1,500	3,539
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 02. : 실시설계 용역 완료

○ 2020. 08. : 실시계획 고시

○ 2021. 01. : 보상통보

□ 향후계획

○ 2023. 01. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장

담당자

건설과 서민수(☎668-3044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의       질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하       고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 다사읍 매곡리 861-1~부곡리 629번지 일원

○ 규 모 : B=19.5m, L=1,564m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	196	55	1,000	4,749
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	196	55	1,000	4,749
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 6. : 도시관리계획 변경결정 및 실시설계용역 완료

○ 2020. 9. ~ 2021. 8. : 소규모 환경・재해 영향평가 등 용역 실시

○ 2022. 8. : 관련기관(부서) 협의

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 보상통보

○ 2023.  6. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가창 용계2리 도시계획도로 개설

담당자

건설과 이재원(☎668-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의       질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하       고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 가창면 용계리 226번지 일원

○ 규 모 : B=6~8m, L=381m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	41	373	2,000	1,586
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	41	373	2,000	1,586
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2020. 3. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 9. : 보상통보

□ 향후계획

○ 2023.  1. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가창 동부순환도로 개설

담당자

건설과 유상종(☎668-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의       질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하       고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 가창면 행정리 854번지~상원리 266번지 - 1공구

가창면 단산리 926번지~옥분리 277번지 - 2공구

○ 규 모 : B=12m, L=1,700m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,500	4,161	1,155	2,000	6,184
국 비
시 도 비
시군구비	13,500	4,161	1,155	2,000	6,184
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 1. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2019.10. : 보상통보

○ 2022. 3. : 1공구 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 1공구 공사 준공

○ 2023.  9. : 2공구 공사 착공

○ 2024. 12. : 2공구 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

현풍읍 경관광장 조성사업

담당자

도시과 김성훈(☎2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 국도5호선, 현풍IC와 인접하고 현풍의 관문 경관을 형성하는 곳으로 달성종합스포츠파크와 군민체육관이 입지하고 있으며, 불량한 경관을 정비하여 현풍의 이미지 제고를 위한 랜드마크를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2023. 7.

○ 위 치 : 현풍읍 성하리 398-2번지 일원

○ 규 모 : 경관광장 조성 19,640㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  23,781백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	23,781	12,670	4,627	6,439	-
국 비
시 도 비
시군구비	23,781	12,670	4,672	6,439	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (공사5%)

○ 2020.  4. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  1. : 실시설계용역 완료

○ 2022.  3. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  7. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 당초 19,670백만원(설계 470 보상 12,200 공사 7,000)

총사업비 변경 23,781백만원(설계 470 보상 16,000 공사 7,000 기타 311)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성-고령 상생 사문진교 야간경관개선사업

담당자

도시과 이선아(☎668-3850)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구·경북 행정통합 추진에 따른 첫 번째 상생 사업으로 상생협력의 기틀을 다져 지역경제 활성화 도모

○ 대구의 새로운 명소 사문진을 찾는 방문객들에게 사문진교의 특화된 경관연출을 통해 다양한 볼거리와 문화교류의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 대구시 달성군 화원읍 성산리 사문진교

○ 규 모 : 교량 측면 양방향(L≒1,560m) 야간경관개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,070	10	60	2,000
국 비	800	10	60	730
시 도 비
시군구비	270			270
지 방 채
민간자본
기 타	1,000			1000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 12. : 기본계획 수립

○ 2021. 11. : 달성군-고령군 사문진교 야간경관개선사업 업무협약 체결

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계·구조검토 용역 시행

□ 향후계획

○ 2022. 05 ~ 08. : 경관조명 전기공사

○ 2022. 06 ~ 10. : 미디어파사드 용역

○ 2022.      12. : 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성 테크노 스포츠센터 건립공사

담당자

문화체육과 여해수(☎668-2032)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민 누구나 일상생활 속에서 편리하게 이용할 수 있는 체육시설 확충을

통해 군민의 체력 및 건강 증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 9. ~ 2023. 9.

○ 위    치 : 유가읍 상리 971

○ 규    모 : 연면적 5,078.54㎡, 지하1층/지상3층 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,470	3,603	157	4,000	13,710
국 비	3,000	63	157	2,780
시 도 비
시군구비	18,470	3,540		1,220	13,710
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9.4%)

○ 2020. 11. : 설계용역 착수

○ 2021.  8. : 설계 경제성 검토(V.E)

○ 2021.  9. : 건설기술심의

○ 2022.  2. : 군 일상감사

○ 2022.  4. : 대구시 계약심사

○ 2022.  4. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 공사 준공

○ 2023. 9. : 건설사업관리용역 완료 및 시설물 개방

□ 사업변경 내역

❍ 규    모

- 건축시설면적 : [변경]연면적 5,078.54㎡, 지하1층/지상3층)

[당초]연면적 4,620㎡, 지하1층/지상3층)

- 지하1층 : 기계실, 전기실 등 수영장 설비시설

- 지상1층 : [변경] 수영장, 영유아풀 등

[당초] 수영장, 잠수풀, 영유아풀 등

- 지상2층 : 헬스장, 체력측정실, G.X.룸 등 체력단련시설

- 지상3층 : 다목적 체육관

- 옥   상 : [변경] 제외(건설기술심의로 인한 구조변경)

[당초] 조깅트랙, 카페, 쉼터 등

- 야   외 : [변경]주차장, 야외부지 일부(운동장 제외)

[당초]축구장, 주차장, 야외부지(야외 물놀이 및 스케이트장 등)

❍ 총사업비 : [변경] 214.7억원 (국비 30, 군비 184.7)(증49.3)

[당초] 165.4억원(국비 30, 군비 135.4)

- 공 사 비 : [변경] 15,730백만원(증4,160)

[당초] 11,570백만원

- 감 리 비 : [변경] 1,500백만원(증1,340)

[당초] 160백만원

- 설 계 비 : [변경] 680백만원(감36)

[당초] 716백만원

- 부 대 비 : [변경] 3,560백만원(감534)

[당초] 4,094백만원(부지매입비 포함)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화원명곡체육공원 유소년축구장 조성

담당자

문화체육과 정재헌(☎668-2033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화원명곡체육공원 내 운동시설과 연계하여 체육시설 이용기회 확대로        이용자 증대 및 주민복지 증진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 10. ~ 2023. 12.

○ 위    치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원

○ 규    모 : 유소년축구장 신설 1면, 진입도로 확장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,687백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,687	290	1,597		1,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,687	290	1,597		1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(보상중, 진도율 30%)

○ 2020.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2020.  9. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고

○ 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회

소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수

○ 2021.  3. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 완료

○ 2021.  4. : 실시계획인가 고시

○ 2021.  5. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행

□ 향후계획

○ 2023.  5. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성 대구현대미술제

담당자

문화체육과 임재화(☎668-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1970년대 기성 미술계의 경직성에 도전하며 다양한 미술 실험을 펼쳤던 ‘대구현대미술제’의 정신을 계승하여, 2012년부터 펼쳐진 「달성 대구현대미술제」의 성공적 개최를 통하여 대구지역 대표 대규모 야외 미술축제로서 그 위치를 공고히 하고, 지역의 대표 문화브랜드로서 시민들의 문화예술 향유와 수준 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 매년 9. ~ 10.

○ 위    치 : 다사읍 강정고령보

○ 규    모 : 국내외 작가들이 참여하는 대규모 야외 설치미술제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	550	400	400	550	550
국 비
시 도 비
시군구비	550	400	400	550	550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○  2021.  6. : 사업계획, 주제 설정, 참여작가 섭외

○  2021.  8. : 보도자료 배포, 기자간담회 진행, 홍보 진행

○  2021.  9. : 전시 오픈

○  2021. 10. : 전시 종료, 도록제작

○  2021. 11. : 정산, 결과보고서 작성

□ 향후계획

○  2022.  9. : 전시 오픈

○  2022. 10. : 전시 종료, 도록제작

○  2022. 11. : 정산, 결과보고서 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군민운동장 리모델링 사업

담당자

문화체육과 정재헌(☎668-2033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 달성1차산업단지 근로자 및 지역주민들의 원활한 체육활동이 가능하도록

시설물을 정비하고 휴게시설을 조성하여 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 5. ~ 2023. 6.

○ 위    치 : 논공읍 논공로 697-10

○ 규    모 : 자연석폭포, 물놀이시설, 산책로, 휴게쉼터, 겸용구장 조성

공중화장실 재건축 및 시설물 전기공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,644백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,644	2,718	56	870
국 비
시 도 비	774	774
시군구비	2,870	1,944	56	870
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(1차분 준공, 진도율 80%)

○ 2020.  9. : 기본계획 및 타당성조사용역 완료

○ 2021.  1. : 실시설계용역 착수

○ 2021.  2. : 공모선정

○ 2021. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2022.  1. : 공사 착공(토목‧조경)

○ 2022.  2. : 공사 착공(전기)

○ 2022.  4. : 공사 착공(건축)

○ 2022.  8. : 공사 준공(토목‧조경, 전기, 건축)

□ 향후계획

○ 2022. 10. ~ 12. : 실시설계용역 착수 및 완료(2차분)

○ 2022. 12. ~ 2023.  6. : 공사 착공 및 준공(2차분)

사업명

달성군민운동장 리모델링 사업

담당자

문화체육과 정재헌(☎668-2033)

□ 사업변경 내역

- 사업규모 변경 내역

(단위 : 억원)

구 분	당 초		현 재		비고
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	27.74		36.44
공사비	27.2		35.7
- 토목	19.7	자연석폭포, 산책로, 물놀이시설, 휴게쉼터, 겸용구장 등 조성	28.2	운동장 인조잔디 설치 겸용구장 휀스설치 산책로 추가 및 정비 물놀이장 시설 추가 폭포시설 여과‧살균 장치 설치 등
- 건축	4.5	공중화장실 재건축	4.5
- 전기	3.0	운동장 시설물 전기공사	3.0
용역비	0.54	토목, 건축, 전기 실시설계	0.74	실시설계(2차분)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

부리 어린이공원 조성사업

담당자

공원녹지과 이승민

(☎668-2702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설로 결정된 공원에 대한 토지매입을 우선 시행하여 장기

미집행도시계획시설로 인한 민원해소 및 주민 휴식공간 확보로 행정

신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 현풍읍 부리 252번지 일원

○ 규 모 : 부리어린이공원 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,568	3,200	368	1,000	-
국 비
시 도 비
시군구비	4,568	3,200	368	1,000	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020. 9. ~ 2021. 12. : 토지보상 완료

○ 2022. 1. ~ 2022.  9. : 국유재산 보상 협의

○ 2022. 7. ~ 2022. 10. : 공원조성계획 변경 용역

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 일상감사 및 계약심사

○ 2022. 11. : 공사시행

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화원명곡 산림욕장 조성

담당자

공원녹지과 김단비(☎668-3762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림의 공익적 기능 및 생태적 역할이 증가됨에 따라 산림문화 활동의        장을 더욱 확대해야 한다는 사회적 요구 증가

○ 도시근교 생활권을 중심으로 산림휴양시설 수요 및 체험형‧체제형 위주의       다양한 산림환경 조성에 대한 필요성 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 931번지 외 2필지

○ 규 모 : 토지매입 및 산림욕장 조성 A=45,919㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,320		3,296	1,024
국 비	700			700
시 도 비
시군구비	3,620		3,296	324
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2021. 4. : 편입 토지 보상완료

○ 2021. 9. : 국비 공모사업 선정에 따른 사업비 확보

[2022년 개발제한구역 주민지원 사업 10억원(국 7, 군3)]

○ 2021. 8. ~ 10. : 기본계획 수립 용역 완료

○ 2021. 10. ~ 2022. 1. : 실시설계 용역 및 허가사항 등 행정절차 이행

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~  3. : 산림욕장 조성계획 승인

○ 2022. 4. ~ 10. : 공사 착공 및 준공