개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군 화원공공복합청사리뉴얼

담당자

정책추진단 백근애(☎3992)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 화원읍행정복지센터를 리뉴얼하여 지역경제를 활성화하고 분산된 주민편의시설을 집중화하여 양질의 공공서비스 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 화원읍 천내리 426-1 일원(구 화원읍행정복지센터)

○ 면    적 : 6,593㎡(1,994평)

○ 규    모 : 21,980.79㎡(6,649평)(지하4층/지상7층)

○ 주요시설 : 공공복합시설

(화원읍행정복지센터, 보건지소, 도서관, 주민편의시설 등)

○ 기    간 : 2014. 6. ~ 2025. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 83,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	83,990	14,416	1,128	19,950	48,496
국 비
시 도 비
시군구비	83,990	14,416	1,128	19,950	48,496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2014.  6. : 화원읍행정복지센터 개발계획 기본구상 용역

▸사업규모 : 연면적 35,500㎡, 지하4층/지상17층

○ 2015. 12.  : 공공건축물 민관 복합개발 선도사업 선정(국토부)

○ 2016. 12. : 사업기본계획 수립(국토부)

▸사업규모 : 연면적 47,690㎡, 지하4층/지상18층

타당성조사 의뢰(1차) *한국지방행정연구원

○ 2017.  4. : 화원읍행정복지센터 및 보건지소 정밀안전진단 실시

▸안전진단 결과 : 화원읍행정복지센터(D등급), 보건지소(D등급)

＊작은도서관 : 철거기준 미달로 존치(리모델링)

○ 2019.  8. : 타당성 조사 의뢰(2차) *한국지방행정연구원(’19. 10. 반려)

▸반려사유 : 위탁개발에 따른 사전절차 이행 및 사업성(공실률) 고려

사업명	달성군 화원공공복합청사리뉴얼	담당자	정책추진단 백근애(☎3992)
○ 2019. 12. : 도시관리계획 변경(용도지역 변경, 2종일반주거지역→준주거지역) ○ 2020. 2. : 타당성 조사 연구용역 ▸용역결과 : 타당성조사 통과가능 적정규모 도출 (연면적 19,027㎡, 지하2층/지상7층) ○ 2020. 4. : 사업계획 변경 및 타당성 조사 의뢰(한국지방행정연구원) ○ 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영 ○ 2021. 1. : 타당성 조사 완료(한국지방행정연구원)※ 조사완료 : 2021.1.28. ○ 2021. 2. : 공유재산 심의(결과:원안가결), 시 투자심사(결과:조건부 승인) ○ 2021. 3. : 공공건축 심의(결과:원안가결) ○ 2021. 4. : 설계용역 일상감사·계약심사 ○ 2021. 6. : 설계용역 계약심의(결과:원안가결), 설계공모(조달청) ○ 2021. 8. : 설계공모 당선작 선정 ○ 2022. 4. : 기존 화원읍청사 석면 및 건축물 해체공사 용역 ○ 2022. 5. : 작은도서관 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료 ○ 2022. 6. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료(시 건설산업과) ○ 2022. 8. : 지반 및 지질 현장조사 용역착수 ○ 2022. 8. : 사업계획 변경 및 설계용역 변경계약 *8.11.(목) ○ 2022. 9. : 소규모 지하안전영향평가용역 착수, 교통영향평가용역 일상감사 및 계약심사 ○ 2022. 10. : 교통영향평가용역 착수 ○ 2022. 12. : 교통영향평가 접수(시)(~ 23.1.) ○ 2023. 1. : 교통영향평가 심의 완료 ○ 2023. 5. : 건설기술 심의 신청(시) 및 건축협의 철도보호지구 내 행위에 대한 도시철도 안정성 검토 BF, 제로에너지, 에너지효율등급, 녹색건축 접수 소규모 지하안전영향평가 접수 ○ 2023. 5. : 기본 및 실시설계용역 중지(당초 5월 완료 → 9월) (건설기술 심의 등 관련 행정절차 수행) □ 향후계획 ○ 2023. 8. : 일상감사 및 계약심사, 계약심의 ○ 2023. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료 공사계약 의뢰(조달청) ○ 2023. 12. : 착공 ○ 2025. 12. : 준공 및 개관준비

사업명	달성군 화원공공복합청사리뉴얼	담당자	정책추진단 백근애(☎3992)
□ 사업변경 내역 ○ 사업규모 : (당초) 연면적 18,855.60㎡(5,704평), 지하2층/지상7층 (변경) 연면적 21,980.79㎡(6,649평), 지하4층/지상7층 → 변경사유 : 설계경제성검토(VE) 심의 결과 및 지역주민 의견 반영(주차장면적 증가 등) ○ 총사업비 : (당초) 80,000 백만원 → (변경) 83,990 백만원 → 변경사유 : 사업규모 증대에 따른 예산 증가

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성 화물자동차 공영차고지 조성공사

담당자

교통과 김헌수(☎668-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 화물자동차의 주차난을 해소하고, 안전하고 쾌적한 환경조성 및 화물자동차 운전자 편의증진 제공을 목적으로 화물자동차 공영차고지를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ∼ 2025년

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 809, 옥포읍 간경리 253번지 일원

○ 규 모 : 화물자동차 공영차고지 조성(A=79,574㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,000	39,187	16,585	3,500	6,313
국 비	950	950	-	-	-
시 도 비	40,700	30,887	14,084	3,500	6,313
시군구비	7,350	7,350	2,501	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 매장문화재 시굴조사 용역 착수

○ 공용건축물 건축협의 진행 중

□ 향후계획

○ 일상심사 및 계약심사 (10월)

○ 건설사업관리 착수 및 공사착공 예정(12월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군 교육문화복지센터 건립

담당자

교육정책과 김도연(☎668-8322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 테크노폴리스 및 국가산업단지 조성으로 급증하는 납부권(현풍·유가·구지) 지역 주민들의 교육·문화·복지 수요에 적극 대응하여, 테크노폴리스 부지 내 교육·문화·복지 종합센터를 건립하여 군민들의 교육열 및 문화 욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2023. 4.

○ 위 치 : 현풍읍 테크노중앙대로235

○ 규 모 : 대지면적 10,737㎡, 연면적 13,757.14㎡, 지상3층/지하1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,440	23,476	14,364	11,600	-
국 비	4,300	2,540	1,760	-	-
시 도 비	2,150	1,323	827	-	-
시군구비	42,990	19,613	11,777	11,600	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2018.  2. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료

○ 2018.  3. : 유가읍‧현풍읍 주민 설명회 및 의견 수렴

○ 2018.  4. : 달성군 교육문화복지센터 건립계획(방침), 시 투자심사(⇒보완)

○ 2018. 10. : 市투자 재심사(⇒장래 이용수요예측 감안, 사업규모 재검토)

○ 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완)용역

○ 2019.  1. : 시 투자심사 재신청(⇒조건부승인,‘19.3.)

○ 2019.  5. : 공공건축사업계획 사전검토 접수 및 회신(⇒건축도시공간  연구소)

○ 2019.  8. : 생활SOC복합화 공모사업(~ 2019. 10.)

○ 2019.  9. : 공유재산심의 승인

○ 2019. 12. : 중앙투자심사  승인(조건부)

○ 2020.  1. : 건축설계공모 실시

○ 2020.  4. : 건축설계용역 시행

○ 2021.  5. : 착공

○ 2022.  6. : 전체 골조공사 완료

○ 2022.  7. : 지열공사

○ 2022.  8. : 내·외부 마감공사

○ 2022. 12. : 부대토목 및 조경공사

○ 2023.  4. : 준공 예정

□ 향후계획

○ 각 시설 운영 및 청사관리

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화원 구라리(891번지선)도시계획도로 개설

담당자

건설과 최주헌(☎688-3045)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 화원읍 구라리 891번지 일원

○ 규 모 : B=6~8m, L=730m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	5,310	1,040	1,600	1,000	1,650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (보상률 87%)

○ 2019. 11. ~ 20. 4. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 05. : 실시계획 고시

○ 2021. 01. : 보상통보

○ 2022. 10. : 보상완료 예정

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 보상 완료

○ 2024. 01. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설

담당자

건설과 정순영(☎688-3754)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 01. ~ 2023. 11.

○ 위 치 : 옥포읍 본리리 2452번지 일원

○ 규 모 : B=6~12m, L=518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		3900	30	200	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2018. 05. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 11. : 보상협의 실시

○ 2023. 01. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 11. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도3호선(기세리 인근) 위험도로 개선사업

담당자

건설과 이재욱(☎688-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 06. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 옥포읍 기세리 산17-1 ~ 산12-1번지 일원

○ 규 모 : B=8~10m, L=500m(터널 L=400m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	16,700	850	0	1,700	14,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 06. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 03. : 소규모재해영향평가 및 소규모환경영향평가 협의 완료

○ 2023. 05. : 市 설계 VE 완료

○ 2023. 06. : 실시계획 고시 및 보상협의

□ 향후계획

○ 2023. 08. : 보상 및 공사 발주

○ 2025. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

현풍 국도5호선~원오교간 도로확장공사

담당자

건설과 방호원(☎668-2914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 확장 공사로 삶의 질을 향상 하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 현풍읍 원교리 722-1번지 일원

○ 규 모 : B=6→19.7m, L=1.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,350	1,500	1,412	1,500	5,350
국 비
시 도 비
시군구비	8,350	1,500	1,412	1,500	5,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (보상률 82%)

❍ 2019. 12. : 실시설계용역 착수(세기엔지니어링)

❍ 2020.  1. : 실시설계용역 완료

❍ 2020.  4. : 도시관리계획(도로)결정 및 지형도면 작성용역 시행

❍ 2021.  2. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

❍ 2021.  6. : 실시설계용역 보완 설계(현대기술단)

❍ 2021. 10. : 주민의견 청취

❍ 2022.  6. : 실시계획 고시

❍ 2022. 10. : 보상계획 열람 통보 및 보상 실시

□ 향후계획

❍ 2024.  6. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가창 동부순환도로(행정~상원) 개설

담당자

건설과 박준호(☎688-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 가창면 행정리 854번지~상원리 266번지

○ 규 모 : B=12m, L=857m(중로3-241호선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	8,140	6,490	1,650	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (보상률 87%)

❍ 2018. 02. : 실시설계용역 발주

❍ 2018. 06. : 사전재해, 소규모환경영향평가 용역 착수

❍ 2019. 01. : 실시설계용역 완료, 사전재해 용역 완료

❍ 2019. 03. : 소규모환경영향평가 용역 완료

❍ 2019. 03. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

❍ 2019. 05. : 보상계획 열람공고

❍ 2022. 03. : 공사착공

□ 향후계획

❍ 2023. 09. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

비슬산 휴양림도로 확포장

담당자

건설과 이재욱(☎688-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 08. ~ 2023. 06.

○ 위 치 : 유가읍 용리 일원

○ 규 모 : B=8m → 15~18m, L=2,261m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	19,200	14,100	2,761	600	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2018. 10. : 보상계획 열람공고. 경관 심의

○ 2019. 03. : 보상 통보

○ 2019. 05. : 설계경제성(VE) 검토 완료

○ 2019. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 04. : 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수

○ 2023. 05. : 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료

□ 향후계획

○ 해당 없음.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설

담당자

건설과 허요성(☎688-3755)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 구지면 응암리 121번지 일원

○ 규 모 : B=8m, L=625m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,200	2,070	277	65	1788
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 06. : 보상계획 열람공고

○ 2020. 09. : 보상협의 시행

□ 향후계획

○ 2024. 03. : 공사 착공

○ 2024. 03. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군청 뒤 도시계획도로 개설

담당자

건설과 홍승완(☎688-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 논공읍 달성군청 ~ 옥포 보금자리 주변

○ 규 모 : B=8~20m, L=796m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	12,900	7,600	2,900	1,000	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 03. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 05. : 실시계획인가고시

○ 2020. 05. : 보상계획열람 공고

○ 2020. 09. : 보상협의 시행

□ 향후계획

○ 2023. 09. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설

담당자

건설과 홍승완(☎688-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2023. 06.

○ 위 치 : 옥포읍 강림리 582번지 일원

○ 규 모 : B=6~8m, L=370m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,185백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,185	1,335	487	150	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 02. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 04. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 10. : 실시계획인가 고시

○ 2020. 02. : 보상계획열람 공고

○ 2020. 04. : 보상협의 실시

○ 2022. 04. : 공사 착공

○ 2023. 06. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설공사

담당자

건설과 배민준(☎688-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 8.

○ 위 치 : 다사읍 매곡리 457번지 일원

○ 규 모 : B=8m, L=405m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,300	650	150	2,900	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상률 77%)

○ 2019. 4. ~ 8. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 6. : 실시계획 고시

○ 2021. 8. : 보상 통보(3공구)

○ 2021. 8. ~ 12. : 공사 착·준공(3공구)

○ 2022. 6. : 보상 통보(1공구, 2공구)

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 보상 완료

○ 2024.  2. : 공사 착공

○ 2024.  8. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가창 삼산리(삼성요양병원 뒤편) 도시계획도로 개설공사

담당자

건설과 김태희(☎688-3044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 가창면 삼산리 806번지 일원

○ 규 모 : B=8m, L=258m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	557	443	700	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 01. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 04. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 07. : 실시계획고시

○ 2021. 12. : 보상계획 열람공고

○ 2022. 03. : 보상통보

□ 향후계획

○ 2024. 01. ~ 2025. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

유가 한정리 596-53번지 일원 도로확장공사

담당자

건설과 방호원(☎668-2914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 확장 공사로 삶의 질을 향상 하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 유가읍 한정리 596-53번지 일원

○ 규 모 : B=4→10m, L=1.1km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,150	950	824	1,200
국 비
시 도 비
시군구비	2,150	950	824	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (공사 중지)

❍ 2021.  1. : 실시설계용역 착수

❍ 2021.  5. : 실시설계용역 완료

❍ 2022.  1. : 보상협의 실시

❍ 2023.  3. : 일상감사 및 계약심사 완료

❍ 2023.  5. : 공사 착공

❍ 2023.  7. : 공사 중지

□ 향후계획

❍ 2023. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

하빈 군도7호선(감문~대평) 도시계획도로 개설

담당자

건설과 박준호(☎688-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발을 위해 도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 하빈면 감문리 감문교차로 ~ 대평리 일원(칠곡경계)

○ 규 모 : B=15m->19.5m, L=5,100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	800	1,000	5,000	11,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 12. : 착수(중간)보고회

○ 2020. 05. : 주민설명회 개최

○ 2020. 07. : 도로구역 결정(변경) 입안, 관계기관 협의

○ 2021. 10. : 농업적성도 2등급 지역으로 농림부 협의

○ 2022. 07. : 보상 열람계획

○ 2022. 11. : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시

○ 2023. 05. : 보상 통보

□ 향후계획

○ 2024. 02. ~ 2025. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

현풍읍 경관광장 조성사업

담당자

도시계획과 김성훈(☎2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 국도5호선, 현풍IC와 인접하고 현풍의 관문 경관을 형성하는 곳으로 달성종합스포츠파크와 군민체육관이 입지하고 있으며, 불량한 경관을 정비하여 현풍의 이미지 제고를 위한 랜드마크를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2023. 11.

○ 위 치 : 현풍읍 성하리 398-2번지 일원

○ 규 모 : 경관광장 조성 19,812㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  24,931백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	24,931	12,670	11,111	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	24,931	12,670	11,111	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (공사30%)

○ 2020.  4. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  1. : 실시설계용역 완료

○ 2022.  3. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  11. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시) - 사업별로 별지 작성

사업명

달성 테크노 스포츠센터 건립

담당자

체육진흥과 황혜성

(☎668-8473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 체육시설 확충을 통한 군민의 체력 및 건강 증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9 ~ 2023. 9

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 지하 1층/지상 3층, 연면적 5,078.54㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,470	3,760	5,333	12,377
국 비	3,000		3,000
시 도 비
시군구비	18,470	3,760	2,333	12,377
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   93%)

❍ 2020.  8. : 건축설계공모 공고(조달청)

❍ 2020. 11. : 실시설계용역 착수

❍ 2021.  8. : 설계경제성(VE) 검토 심의

❍ 2021.  9. : 건설기술 심의

❍ 2022.  1. : 공용건축물 건축협의(대구경북경제자유구역청)

❍ 2022.  2. : 군 일상감사

❍ 2022.  4. : 시 계약심사, 공사 착공

❍ 2023.  3. : 어린이 놀이시설 제작‧설치 용역 시행

□ 향후계획

❍ 2023.  9. : 공사 준공, 어린이 놀이시설 물품 제작‧설치 완료

❍ 2023. 11. : 개관식(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성 테크노폴리스 생활체육광장 조성공사

담당자

체육진흥과 강희정 (☎668-8482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적공간을 조성하여 체육활동뿐만 아니라 지역축제나 행사 등을 유치

하여 시설물과 연계된 복합단지로서의 기능을 향상시키는데 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 유가읍 상리 971번지

○ 규 모 : 생활체육광장, 어린이물놀이시설, 휴식공간 등 조성(A=13,205m2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,819백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,819	19	374	1,426
국 비
시 도 비
시군구비	1,819	19	374	1,426
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020.  9. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

○ 2020. 11. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020. 12. ~ 2021. 12. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2022. 1. ~ 2. : 실시설계용역 착수 및 완료(전기)

○ 2022. 1. : 개발행위허가, 건축허가 등 행정절차 이행

○ 2022. 4. : 일상감사 및 계약심사 이행

○ 2022. 6. : 공사 착공 및 관급자재 구매

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성군민운동장 리모델링

담당자

체육진흥과 강희정 (☎668-8482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 건강증진과 여가선용 기회제공 및 생활체육 활성화로 주민 만족도 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 논공읍 북리 1번지

○ 규 모 : 어린이 물놀이터, 유소년축구장 및 산책로 조성, 관람석 보수 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,643백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,643	112	2,661	870	0
국 비			774
시 도 비
시군구비	3,643	112	1,887	870	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020.  9. : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료

○ 2021.  1. : 실시설계용역 착수

○ 2021.  2. : 공모선정[공공체육시설 개보수 분야(국비확보)]

○ 2021.  3. : 군 투자심사 완료

○ 2021. 10. : 공공디자인 심의 완료

○ 2021. 11. : 실시설계용역 완료 및 일상감사 등 행정절차 이행(토목,조경,전기)

○ 2021. 12. : 건축 분야 건축협의 요청,

건축 분야 장애물 없는 생활환경 예비 및 본 인증 용역 착수

토목조경 분야 공사 발주 및 자재 구매

○ 2022.  1. : 전기 분야 공사 발주 및 자재 구매

○ 2022.  2. : 건축 분야 공사 발주 및 자재 구매

○ 2022.  5. : 공사 완료(1차분)

○ 2022.  10. ~ 12. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2023.  1. : 일상감사 및 계약심사 이행

○ 2023.  3. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 공사 준공(2차분)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

비슬산관광지 조성

담당자

관광과 김은국(☎668-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대견사 중창, 비슬산 숲속캠핑장, 반딧불이 전기차, 호텔아젤리아와 더불어 체계적인 관광명소 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 유가읍 용리 산17-8번지 일원

○ 규 모 : 253,587㎡(76,710평 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	33,900	12,700	2,313	1,600	17,287
국 비
시 도 비
시군구비	33,900	12,700	2,313	1,600	17,287
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2017. 6. : 비슬산관광지 지정

○ 2019. 6. : 비슬산 관광지 조성계획 승인고시

○ 2019. 9. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 4. : 토지보상완료(79,074㎡)

○ 2022. 3. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료

○ 2022. 5. : 지방건설기술심의회 심의 완료

○ 2022. 6. : 전기공사 우선 발주 및 착공

○ 2023. 4. : 비슬산관광지 조성계획 변경 승인

○ 2023. 6. : 비슬산관광지 조성사업(1차) 착공

□ 향후계획

○ 2024.  3. : 비슬산관광지 조성사업(1차) 준공

○ 2024. 12. : 비슬산관광지 조성 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

달성 화석박물관 건립

담당자

관광과 심상윤(☎668-8295)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 보유 화석유물을 이용하여 인접한 국립대구과학관과 연계한

화석박물관을 건립하여 학생들의 교육의 장을 마련 및 달성관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 유가읍 상리 971번지 인원

○ 규 모

- 면적 : 8,980㎡(2,716평 정도)

- 건축규모 : 6,020㎡(1,821평 정도), 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,660백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,660	14,202	5,749	10,709
국 비	5,683	217	2,022	3,444
시 도 비	1,776			1,776
시군구비	23,201	13,985	3,727	5,489
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2017.  1. : 화석박물관 기본계획 수립

○ 2017.  3. : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료

○ 2017.  7. : 화석박물관 건립을 위한 소장물품 양·수도 계약 체결

○ 2017. 10. : 화석박물관 유물 임시 보관 장소 운반(구, 화원면허시험장)

○ 2018.  7. : 공립박물관 설립타당성 사전평가

※ 2017년 1차(5월), 2차(11월), 2018년 3차(11월) : 부적정

○ 2019.  1. : 화석박물관 건립 변경계획(입지변경)

○ 2019.  1. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청(4차)

○ 2019.  5. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 결과 : 적정

○ 2019.  5. : 달성 화석박물관(입지변경) 기본계획 및 타당성조사 보완용역

○ 2019.  6. : 공유재산관리계획 수립

○ 2019.  9. : 국립대구과학관 간 업무협약(MOU) 체결

○ 2019. 10. : 중앙투자심사 통과

○ 2020.  1. : 설계공모 공고

사업명

달성 화석박물관 건립

담당자

관광과 심상윤(☎668-8295)

○ 2020.  5. : 건축설계용역 시행(8개월)

○ 2020.  8. : 화석고증용역 착수(~2021. 8.)

○ 2020. 11. : 화석박물관 건립·운영자문위원회 개최

○ 2021.  2. : 국비교부신청

○ 2021.  3. : 실시설계완료 및 설계경제성검토(VE) 심의 완료

○ 2021.  4. : 전시설계 및 전시물 제작설치 용역 착수

○ 2021.  5. : 총사업비 지침상 등록 절차 이행(→기재부 및 조달청)

○ 2021.  7. : 건설기술심의 완료

○ 2021.  7. : 조달청 실시설계 적정성 합동 심의

○ 2021. 10. : 도시계획시설 실시계획 인가

○ 2021. 11. : 건설사업관리용역 일상감사, 계약심사 완료

○ 2021. 12. : 기획재정부 총사업비 조정 협의 완료

○ 2022.  2. : 공사 및 건설사업관리용역 조달청 계약 체결 의뢰

○ 2022.  6. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 준공 예정

□ 사업변경 내역

	당초(2019)	변경(2022)	비 고
규 모	연면적 4,994㎡, 지상3층	연면적 6,020㎡, 지하1/지상4층	설계용역 및 공사 시행하며 변경
사 업 비	29,700백만 원	30,660백만 원
사업기간	2016. 12. ~ 2022. 9.	2016. 12. ~ 2023. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도동서원 주차장 조성

담당자

관광과 전창학(☎668-8292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도동서원이 유네스코 세계문화유산으로 지정된 이후 매년 증가하는 관광객들의

편의를 제공하기 위하여 관광기반시설을 조성해 달성군의 대표관광지로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 대구광역시 달성군 구지면 도동리 14번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성(4,700㎡, 84대 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,295백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,295	791	618	886	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,295	791	618	886	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 11. : 주차장 조성계획 수립, 손실보상금 결정 및 통보

○ 2021. 12. : 실시설계용역 시행

○ 2022.  7. : 공사 착공

○ 2023.  6. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

부리 어린이공원 조성사업

담당자

공원녹지과 박경준

(☎668-2703)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설로 결정된 공원에 대한 토지매입을 우선 시행하여 장기

미집행도시계획시설로 인한 민원해소 및 주민 휴식공간 확보로 행정

신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 현풍읍 부리 252번지 일원

○ 규 모 : 부리어린이공원 1개소(A=4,587㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,600	3,568	59	973
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020.  5. : 도시계획시설(공원)사업 실시계획 고시

○ 2020.  6. ~ 2023. 8. : 토지보상

○ 2022. 12. : 도시관리계획(공원) 변경 결정(경미한변경) 및 실시계획(변경),

지형도면 고시

○ 2023.  2. : 공원조성계획(변경) 결정 및 지형도면 고시

○ 2023.  7. : 일상감사 및 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 2023.  8. : 공사시행