109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 달성군에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
달성군 화원공공 복합청사리뉴얼	83,990	14,416	1,128	19,950	48,496	2025	2021	45%
달성 화물자동차 공영차고지 조성공사	49,000	39,187	16,585	3,500	6,313	2025	2020	70%
교육문화복지센터 건립	49,440	23,476	14,364	11,600	-	2023	2021	95%
화원 구라리(891번지선)도시계획도로 개설	5,310	1,040	1,600	1,020	1,650	2024	2019	40%
옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	5,240	3,900	30	200	-	2024	2019	60%
군도3호선 (기세리 인근) 위험도로 개선사업	16,700	850	-	1,700	14,150	2025	2020	10%
현풍 국도5호선~원오교간 도로확장공사	8,350	1,500	1,412	1,500	5,350	2025	2020	40%
가창 동부순환도로(행정~상원) 개설	8,140	6,490	1,650	-	-	2023	2021	95%
비슬산 휴양림 도로 확포장	19,200	14,100	2,761	600	-	2023	2021	100%
구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	4,200	2,070	277	65	1,788	2024	2022	50%
달성군청 뒤 도시계획도로 개설	12,900	7,600	2,900	1,000	1,400	2025	2022	50%
옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설	2,185	1,335	487	150		2023	2022	100%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
가창 삼산리(삼성요양병원 뒤) 도시계획도로 개설	2,200	557	443	700	500	2024	2022	20%
유가 한정리 596-53번지 일원 도로확장공사	2,150	950	824	1,200	-	2023	2022	55%
하빈 군도7호선(감문~대평) 도로확장 공사	18,000	800	1,000	5,000	11,200	2025	2018	20%
현풍읍 경관광장 조성사업	24,931	12,670	11,111	1,150		2023	2019	30%
달성 테크노스포츠센터건립	21,470	3,760	5,333	12,377	0	2023	2019	93%
달성 테크노폴리스 생활체육광장 조성공사	1,819	19	374	1,426	0	2023	2020	70%
달성군민운동장 리모델링	3,643	112	2,661	870	0	2023	2022	80%
비슬산관광지조성	33,900	12,700	2,313	1,600	17,287	2024	2018	55%
달성 화석박물관 건립	30,660	14,202	5,749	10,709	-	2023	2019	65%
도동서원 주차장 조성	2,295	791	618	886	-	2023	2022	100%
부리 어린이공원 조성사업	4,600	3,568	59	973		2023	2020	70%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

10-2. 지방채 발행사업

우리 달성군에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
도시재생 뉴딜사업 (1,000년의 화원, 다시 꽃피다!)	24,150	1,150	11,500	5,750	5,750		1,150	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

1,000년의 화원, 다시 꽃피다!

담당자

도시계획과 김원양

(☎ 668-3892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구교도소의 장기간 입지로 인한 지역의 쇠퇴현상을 개선하기 위해

지역공동체 활성화 기반조성, 공공복지 서비스 활성화, 골목상권 활성화,       생활 인프라 개선 등을 통한 지역 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024. (※ ‘19.10 공모사업 선정)

○ 위 치 : 화원읍 천내리 860-2일원 (대구교도소 후적지 주변)

○ 규 모 : 150,669㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	24,150	9,200	2,985	7,201	4,764
지 방 채	1,150		107	1,043
국 비	11,500	7,740	1,460	2,300
시 도 비	5,750	30	1,274	2,466	1,980
시군구비	5,750	1,430	144	1,392	2,784
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ 지역공동체 활성화 공간 “소통·봄꿈” 외부마감 및 내부공사

□ 향후계획

○ 2023. 12. 부대토목 및 조경공사

○ 2024. 01. 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-3. 민간투자사업

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.