□ 주요 투자사업 추진현황

우리 달성군에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
대구 제2국가산업단지 유치 기념 축하 행사	280	0	279.7	0	0	2023	2023	100
도시가스 공급시설 설치 지원사업	2,230	0	2,230	2,600	5,200	2026	2023	50
금호강 캠핑장 조성	6,000	0	86	814	5,100	2025	2022	15
화원초 학교시설 복합화 사업 및 경비지원	3,200	0	0	1,400	1,800	2025	2023	20
달성중 학교시설 복합화 사업 및 경비지원	7,700	0	0	6,250	1,450	2025	2023	20
달서중고 후적지 개발	37,850	0	4,000	10,200	23,650	2027	2023	20
달성 비슬도서관 건립	49,475	12,102	1,420	900	35,053	2028	2023	20
(구)논공 학생야영장 부지 활용 논공 상하리 창작캠핑장 조성	10,600	0	600	5,046	4,954	2027	2023	10
과학관공원 리뉴얼 사업	6,956	0	0	456	6,500	2025	2023	15
논공 다다촌 특화거리 조성사업	12,000	0	2,495	80	8,920	2026	2023	30
달성100대피아노	2,700	550	650	500	1,000	2023	2020	100
달성 대구현대미술제	2,980	500	830	550	1,100	2023	2020	100
비슬산 참꽃문화제	1,037	0	260	259	518	2023	2021	100
문화교차로	650	0	200	150	300	2023	2022	100
예스!키즈존	1,340	0	290	350	700	2023	2022	100
송해음악회	290	0	290	0	0	2023	2022	100
달성군 문화도시 조성	15,000	0	3,000	3,000	9,000	2027	2023	30
달성군북부노인복지관 주차장 조성	2,600	0	0	90	2,510	2026	2023	5
가창 주민종합복지회관 건립	7,381	1,130	0	6,251	0	2025	2022	10
달성군민운동장 리모델링	3,588	2,718	870	0	0	2023	2022	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
달성종합스포츠센터다목적체육관리모델링사업	2500	0	0	1,590	910	2025	2023	5
하빈군도7호선(감문~대평)도로확장공사	28,000	616	870	1,860	19,901	2027	2023	보상중(35%)
화원 성산1리(삼주아파트 뒤편) 도시계획도로 개설공사	3,460	50	0	400	3,010	2027	2023	보상시작
다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장공사	10,500	14	5,623	46	35	2026	2023	보상중(72%)
다사 박곡리(소2-박1호선) 도시계획도로 개설공사	2,000	0.4	35	14.6	3	2025	2023	보상시작
다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설공사	4,450	544	10	150	706	2025	2023	보상완료
가창 상원2리(436번지선) 도시계획도로 개설	3,042	2,442	2	600	0	2025	2022	보상중(93.4%)
가창 옥분리(파티마요양병원 주변) 도시계획도로 개설	2,620	1,770	3,050	700	0	2025	2022	보상중(10%)
가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	2,200	1,500	0	700	0	2025	2022	보상완료
가창 삼산리(삼성요양병원 뒤) 도시계획도로 개설	2,200	1,000	700	0	500	2025	2022	보상중(59.5%)
논공 금포리 1973-1번지선 도시계획도로 개설	6,790	0	90	0	6,700	2025	2023	10
현풍 지리 827번지선 도시계획도로 개설	2,070	70	700	400	900	2026	2022	20
옥포 본리리 2176번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	2,320	0	700	500	1,120	2025	2023	30
옥포 본리리 새마을회관 서편 도시계획도로 개설공사	5,800	0	0	500	5,300	2026	2023	15
군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업	22,200	850	1700	4200	15,450	2026	2023	15
옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설	2,285	2,135	150	0	0	2023	2022	100
유가 한정리 596-53번지 일원 도로확장공사	2,150	900	850	400	0	2024	2022	0.1

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

우리 달성군에서 ‘23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

‣ 우리 군은 해당사항이 없습니다.

우리 달성군에서 ‘23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 3 민간투자사업

‣ 우리 군은 해당사항이 없습니다.